문서번호	시책사업부-12187
보존기간	5년
결재일자	2008.12.23.
공개여부	공개
방침번호	시설안전국장 방침 제(614)호

담당자	2팀장	시책사업부장		시설안전국장
협 조
	5팀장

(여의도샛강 생태공원조성공사)

1차공사 설계변경 및 2차공사 발주계획

2008. 12

시 책 사 업 부

(여의도샛강 생태공원조성공사)

설계변경(총괄1회, 1차1회)시행 및 2차공사 발주계획

□ 공사개요

○ 위    치 : 영등포구 여의도샛강 일대(63빌딩~국회의사당)

○ 규    모 : 생태공원조성 758,000㎡

○ 사업기간 : 2008. 8. 20. ～ 2009. 12. 12

○ 총사업비 : 42,940백만 원

○ 시 공 사 : 화성산업㈜ 외 1(매일건설㈜)

□ 공사비 변경 내용

< 총차 1회 변경 >

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 공 사 비	35,947,829,000	39,350,000,000	증 3,402,171,000
도 급 비	28,351,729,000	33,344,310,000	증 4,992,581,000
관급자재비	2,682,800,000	4,374,770,000	증 1,691,970,000
지장물이설	1,191,200,000	1,013,710,000	감 177,490,000
폐기물처리	1,925,900,000	-	감 1,925,900,000
전 기 공 사	1,796,200,000	617,210,000	감 1,178,990,000

< 총차 1회 변경 주요내용 >

1. 2008. 10. 27 : 공사안내홍보간판 등 -----------------------------    증 32,500천원

2. 2008. 10. 31 : 비산먼지 발생 방지 살수비 ------------------     증 23,000천원

3. 2008. 11.  6 : 수질오염방지를 위한 오탁방지막 -----------     증 93,000천원

4. 2008. 11. 25 : 사토장 선정에 따른 운반비 증가 -----------   증 2,581,000천원

5. 2008. 11. 26 : 과거매립 폐기물처리비 -------------------------    증 955,288천원

6. 2008. 12.  1 : 순환골재 생산비용 반영 ------------------------    증 148,000천원

7. 2008. 5. 15 : 백사장추가조성(사업기획과-664) --------------   증 511,793천원

8. 상류IC 진입로개선공사(본부장 지시사항) --------------------   증 648,000천원

총 계--------------------------------------------------------------------------  증 4,992,581천원

< 1차 1회 변경 >

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 공 사 비	13,900,000,000	13,900,000,000	-
도 급 비	6,303,900,000	9,881,190,000	증 3,577,290,000
관급자재비	2,682,800,000	2,682,800,000	-
이 설 비	1,191,200,000	718,800,000	감 472,400,000
폐기물처리	1,925,900,000	-	감 1,925,900,000
전 기 공 사	1,796,200,000	617,210,000	감 1,178,990,000

< 1차 1회 변경 주요내용 >

1. 2008. 10. 27 : 공사안내홍보간판 등 -------------------------------    증 32,500천원

2. 2008. 10. 31 : 비산먼지 발생 방지 살수비 ---------------------     증 23,000천원

3. 2008. 11.  6 : 수질오염방지를 위한 오탁방지막 -------------     증 93,000천원

4. 2008. 11. 25 : 사토장 선정에 따른 운반비 증가 -------------   증 1,464,000천원

5. 2008. 11. 26 : 과거매립 폐기물처리비 ---------------------------    증 955,288천원

6. 2008. 12.  1 : 순환골재 생산비용 반영 --------------------------     증 83,130천원

7. 차수물량조정 : 수목식재, 저수호안, 교량가시설  --------------   증 926,372천원

총 계 ---------------------------------------------------------------------------  증 3,577,290천원

□ 2차공사 발주

(단위 : 원)

구 분	총 괄	1차 공사	2차 공사	비 고
총 공 사 비	39,350,000,000	13,900,000,000	25,450,000,000
도 급 비	33,344,310,000	9,881,190,000	23,463,120,000
관급자재비	4,374,770,000	2,682,800,000	1,691,970,000
이설비	1,013,710,000	718,800,000	294,910,000
전기공사	617,210,000	617,210,000	-

□ 공사기간 변경

○ 총괄 : 변경없음.

○ 1 차  : 2008. 8. 20 ~ 2008. 12. 28 ⇒ 2008. 8. 20 ~ 2009. 4. 30.

○ 지체상금 부과 : 미부과(동절기로 인한 절대공기 부족)

□ 조 치 의 견

○ 1차공사는 2008년도 예산범위내에서 공사추진 계획에 따라 물량 및 계약기간을 조정하고, 2009년도 예산 추가확보에 따라 총괄 및 2차 공사비를 변경

○ 2차공사는 예산조기 집행을 위한 연내 발주계획에 따라 1차공사 설계변경과 연계하여 물량을 확정, 계약체결 추진.

첨부 : 1. 설계서(총괄 1차, 1차1회 변경설계서, 2차 발주설계서)각 1부.

2. 사업비 집행계획서

3. 공사 시행계획서

4. 차수별 물량 내역서 각 1부. 끝.