문서번호	시책사업부-4149
보존기간	5년
결재일자	2009.04.21.
공개여부	공개
방침번호

★담당자	2팀장	시책사업부장		시설안전국장
협 조
	5팀장

(여의도샛강 생태공원조성공사)

총차 2회, 1차 2회, 2차 1회 설계변경 보고

2009. 4

시 책 사 업 부

설계변경(총차 2회, 1차 2회, 2차 1회)시행

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 여의도샛강 생태공원조성공사

○ 사업기간 : 2008. 8. 20. ～ 2009. 12. 12

○ 총사업비 : 42,940백만 원

○ 시 공 사 : 화성산업㈜ 외 1(매일건설㈜)

□ 설계변경 사유 : 09년상반기 추경예산 배정에 따라 실정보고사항 및 물량변경 반영

□ 공사비 변경

< 총차 2회 변경 >

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 공 사 비	39,350,000,000	44,290,000,000	증 4,940,000,000
도 급 비	33,344,310,000	36,067,710,000	증 2,723,400,000
관급자재비	4,374,770,000	4,374,770,000	-
지장물이설	1,013,710,000	2,555,510,000	증 1,541,800,000
폐기물처리	-	674,800,000	증 674,800,000
전 기 공사	617,210,000	617,210,000	-

< 1차 2회 변경 >

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 공 사 비	13,900,000,000	13,900,000,000	-
도 급 비	9,881,190,000	9,881,190,000	-
관급자재비	2,682,800,000	2,682,800,000	-
지장물이설	718,800,000	718,800,000	-
폐기물처리	-	-	-
전 기 공사	617,210,000	617,210,000	-

< 2차 1회 변경 >

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 공 사 비	25,450,000,000	30,390,000,000	증 4,940,000,000
도 급 비	23,463,120,000	26,186,520,000	증 2,723,400,000
관급자재비	1,691,970,000	1,691,970,000	-
지장물이설	294,910,000	1,836,710,000	증 1,541,800,000
폐기물처리	-	674,800,000	증 674,800,000
전 기 공사	-	-	-

□ 공사기간 : 변경없음

□ 조 치 의 견

○ 2009년도 예산 추가확보(4,940백만 원)에 따라 총차 및 2차공사비를 변경하고, 1차공사는 2008년도 예산범위내에서 공사물량을 조정코자 함.

첨부 : 1. 설계서(총차2차, 1차2회, 2차1회 변경설계서) 각 1부.

2. 차수별 설계변경 내용 요약 1부.

3. 사업비 집행계획서. 끝.