총인처리시설 설치사업 추진현황

□ 사업개요

○ 사업목적 : 강화된 총인 방류수 수질기준 준수

○ 사 업 명 : 4개 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

○ 사업기간 : 2015.1.~2019.12.

○ 사업규모 : 총인처리시설 204만㎥/일

(중랑 41, 난지 44, 탄천 45, 서남 74)

○ 총사업비 : 2,346억원

(중랑 525, 난지 531, 탄천 400, 서남 890)

○ 사업내용 : 3차 총인처리시설 추가설치

- 기존 수처리시설 후단에 ‘약품투입+혼화‧응집+부상․침전․여과시설’ 설치

<수처리 흐름도>

※ 총인시설 설치공사 기간중 환경부 ‘하수처리장 인처리시설 설치 가이드북’에 제시된 생물반응조 후단에 약품투입시설 설치하여 방류수중 총인농도 최대한 저감 운영 중

□ 추진경과 및 향후계획

○ ‘13.12~’14.10 : 3차(총인)처리시설 설치 타당성조사 및 기본계획 용역

○ ‘15. 7~’17. 3 : 3차(총인)처리시설 기본 및 실시설계 용역

○ ‘17. 4~’17. 9 : 사전행정절차(계약심사, 투자심사 등)

○ ‘17.10 : 공사계약 및 총인처리시설 설치사업 공사착공

○ 향후일정

- ‘17.10~’19.12 : 공사시행

- ‘20. 1~ ’20. 6 : 시 운전(총인 수질기준 준수)

<센터별 추진일정>

‣ 중랑․탄천 : ‘19. 6월 설치완료, ’19. 7월 시 운전 실시

‣ 난지       : ‘19.10월 설치완료, ’19.11월 시 운전 실시

‣ 서남       : ‘19.12월 설치완료, ’20. 1월 시 운전 실시

□ 향후 투자계획

(단위 : 억원)

합 계	기 투자	2017	2018	2019이후
2,346	65	609	811	861

○ 투자재원 : 시비 + 국비(국비 미지원시 시비 투자)

○ 재원조달

- 방류수 수질기준 준수를 위한 사업으로 타 사업에 우선하여 예산반영

(‘18년도 811억원 예산편성 추진 중)

- 대규모 재정투자사업으로 국비지원 지속요청(사업비의 50%)

참고자료

□ 위 치 도

□ 시설배치도

중랑물재생센터	난지물재생센터
탄천물재생센터	서남물재생센터