문서번호	시책사업부-15184
보존기간	5년
결재일자	2009.12.24.
공개여부	공개
방침번호

★담당자	2팀장	시책사업부장		시설안전국장
협 조
	5팀장

- 여의도 샛강 생태공원 조성공사 -

설계변경(총차3회, 2차2회)사항 보고

도시기반시설본부

( 시 책 사 업 부 )

설계변경(총차3회, 2차2회)사항 보고

여의도 샛강 생태공원의 유지관리부서인 한강사업본부에서 여의도 샛강 방문자 센터 신축, CCTV설치 요구사항 등과 지하철 9호선 쉴드터널 구간에 강관을 추진하기 위한 공법변경 등 설계변경 사항에  대한 보고임

※ 관련근거 - 동일(감리) 제 09-3900호(2009. 12. 22) : 설계변경 승인 요청

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 여의도샛강 생태공원조성공사

○ 사업기간 : 2008. 8. 20. ～ 2010. 4. 30

○ 총사업비 : 56,100백만원

○ 시 공 사 : 화성산업㈜, 매일종합건설㈜

□ 설계변경사유

○ 09년 하반기 추경예산 8,220백만원 배정에 따른 실정보고사항 및 물량변경 반영

○ 주요 변경내용

(단위 : 백만원)

공 종	변경내용	공 사 비	비 고
조경공사	․ ‘09. 9. 24 공원 개장에 따른 현장점검 결과에 의한 추가공사 시행외 12건	증) 1,043	붙임 “주요설계 변경사항” 참조
토목공사	․ 지하철 9호선 쉴드터널 통과구간 공법변경외 23건	증) 7,843	“
기 타	․ 설계변경에 의한 물가변동금액 조정외 1건	감) -666	“
계		증) 8,220

□ 감리단 의견

○ 설계변경조건 및 공사계약일반조건 등의 설계변경 기준에 따라 적정하게 변경되었으며 설계변경 예산서상의 변경은 적정함

□ 조치계획

○ 설계내역 검토한 바, 감리단 검토의견대로 적정하게 설계변경 되었으므로 2009년도 하반기 추경예산 8,220백만원 추가확보에 따라 총차 및 2차공사비를 변경하고자 함

○ 공사비 변경

- 총차 3회 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 공 사 비	44,290,000,000	52,510,000,000	증) 8,220,000,000
도 급 비	36,067,710,000	43,295,855,000	증) 7,228,145,000
관급자재비	4,374,770,000	4,200,480,000	감) -174,290,000
지장물이설	2,555,510,000	2,555,510,000	-
폐기물처리	674,800,000	774,312,000	증) 99,512,000
전 기 공사	617,210,000	1,683,843,000	증) 1,066,633,000

- 2차 2회 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 공 사 비	30,390,000,000	38,610,000,000	증) 8,220,000,000
도 급 비	26,186,520,000	33,414,665,000	증) 7,228,145,000
관급자재비	1,691,970,000	1,517,680,000	감) -174,290,000
지장물이설	1,836,710,000	1,836,710,000	-
폐기물처리	674,800,000	774,312,000	증) 99,512,000
전 기 공사	-	1,066,633,000	증) 1,066,633,000

첨부 :   1) 감리단 검토의견서   1부

2) 사업비 집행계획서  1부

3) 주요설계변경사항   1부

4) 설계변경사유서      1부

5) 설계서(총차3회, 2차2회 변경설계서) 각 1부. 끝.