최근 5년간 당초 설계대로 공사중 주민 민원으로 변경된 내역

연번	소관 부서	공 사 명	공사금액 (도급비,백만원)	설계변경금액 (백만원)	민원내용(요약)	설계변경 일 시
1	도기본 토목부	경인로~구로1동간 도로개설공사	1,860	증 10	삼성물류센타 임시포장 요구	'08. 8.29
2				증 133	롯데마트앞 부가차로 설치요구	'09.12.30
3		남부순환로~부천시계간 도로개설공사	42,609	증 863	방음벽설치 및 녹도 조성요구	'08.10.22
4				증 4,191	연결램프 설치요구	'08.12.23
5				증 2,722	연결램프 추가 반영	'09.12.24
6				증 23	한교진입로 개설요구	'10.12.24
7				증 2,500	생태터널 설치요구	'10.12.29
8				증 75	연결램프구간 방음벽설치요구	'11.12. 5
9		남부순환로(개봉역앞) 도로구조개선공사	49,487	증 9,518	지하차도 연장 및 방음터널설치요구	'10.12.30
10				증 684	교통안전시설물 추가설치 및 포장도로 보수요구	'11.12.26
11		서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사	77,234	증 27,414	지하차도 연장요구 L=265m	'10. 6.30
12		율곡로(창경궁앞) 도로구조개선공사	50,800	증 614	도로폭원축소 및 지하차도연장요구	'12. 2.13
13		방화대교 남단 접속도로 건설공사	66,092	증 311	터널입구 양측 아파트 구간으로 소음 및 먼지 발생으로 옹벽변경요구 (현장타설→공장제작)	'11.2.18
14		우이천 하천정비공사	14,691	증 288	고수호안변경요구 (생태블럭→조경석)	'11.12.16
15				증 714	고수호안변경요구 (생태블럭→조경석) 진출입로 정비 산책로 정비	'12. 7.30
16		동부간선도로 확장공사(2공구)	165,814	증 60,045	도봉구 확장구간 교통정체 해소를 위한 도봉지하차도 연장	'12.12.27
17		천호대로(광나루역) 확장공사	39,926	증 40	인접지 침수민원으로 배수구조물 확대설치요구	'12. 9.20
18		헌릉로 연결도로 (강남순환접속)공사	39,911	증 13,315	교량건설시 경관훼손 및 생활환경 피해와 추모공원 진입도로라는 인식으로 도로건설반대 및 노선지하화 요구	'10.01.21
19		강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사	194,689	증 12,779	고가차도건설 반대민원 (고가차도→지하차도)	'10.12.17
20		여의도 샛강 문화다리 건설공사	9,523	증 301	보도교가 윤중로를 횡단할 경우 광장아파트 사생활 침해 우려가 있으므로 횡단을 반대함 (L=354m→324m)	'10.11.24