2014년 예방사방사업(예장동,이화동)

추가 소요 공사비 요청내용

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2014년 예방사방사업(예장동,이화동)

❍ 위    치 : 중구 예장동 산5-6, 종로구 이화동 9-417 등

❍ 공사기간 : 2014. 3. 17 ~ 5. 25

❍ 공사내용 : 배수로 정비, 사면보호, 폐기물철거 등

❍ 도급업체 : 산오름(주) 대표 권민정

❍ 도 급 액 : 223,586천원

□ 추가 공사비 요청내역

구분	공종	변경내용	추가소요예산(천원)	비고
예장동	소계		36,100
	식재공	측구수로 등 시설주변 사면보호	15,100
	소운반공	준설물량, 돌수로 등 자재 소운반 증가	21,000
이화동	소계		36,000
	부대공	콘크리트, 석축 등 철거 등 물량증가	8,000
	소운반공	철거물량 증가에 따른 소운반 증가	28,000
순공사비 합계			72,100
경비+부가세			43,875
도급비 증액 합계			115,975
폐기물 처리용역	운반 및 처리	콘크리트, 석축 등 철거 등 물량증가	10,000
증액합계			125,975
집행잔액		낙찰차액	- 29,732
추가 공사비 요청액			96,243

□ 현황사진

철거지역 전경(폐기물 매립상태)	혼합폐기물 증가
석축 철거 추가	석축 및 구조물 철거 추가
토사유실 등 예방사면녹화 추가식재	준설물량 증가