문서번호	안전관리과-7368
결재일자	2018.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	안전관리과장	시설국장		도시기반시설본부장
협 조
	도시철도국장
	주무관
	주무관

추석 전 공사장 특별점검 결과 보고

2018. 9.

도시기반시설본부

(안전관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

추석 전 공사장 특별점검 결과 보고

가산동·상도동 흙막이가시설 및 옹벽 붕괴사고와 같은 사회적 물의를 일으키는 사건이 없도록 추석 전 흙막이가시설에 대한 특별점검을 시행하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 9월 건설공사장 점검계획(안전관리과-6663, ‘18.8.27) 및 9월 첫째주 간부회의 요청사항( ‘18.9.7)

Ⅱ		점 검 개 요

❍ 추진기간 : ‘18.9.3(월) ~ ‘18.9.14(금) 10일간

❍ 점검현장 : 서초역~방배로간 도로개설공사 등 30개 현장

※ 주요 대상은 터파기 진행현장

❍ 점검인원 : 안전관리과 직원과 외부점검위원 30명(구조, 토질, 안전, 품질)

❍ 점검내용

- 흙막이 가시설 구조 및 시공계획 전반에 관한 사항

- 시공 품질 및 기타 안전에 관한 사항

- 집중호우 시 대비체계 점검

- 공사장 주변 시민안전 확보 사항

- 추석연휴 기간 공사장 비상연락망 정비 상태

Ⅲ		점 검 결 과

□ 점검결과

부 서 명	점검 현장수	총 점검건수	흙막이 가시설	떨어짐 (추락·낙하)	통 로	감전․ 화재	기계․ 기구	품질 관리	기 타
총 계	22	164	38	13	12	23	14	11	53
토 목 부	5	30	4	1	1	6	3	3	12
건 축 부	8	64	24	7	3	9	4	2	15
방재시설부	5	40	6	4	5	6	4	2	13
도철사업부	3	22	4	1	2	1	2	1	11
도철토목부	1	8	-	-	1	1	1	3	2

□ 주요 지적사항

❍ 버팀보․주형보 받침 스티프너 보강 미실시 및 띠장 단차부 미폐합 등 시공관리 부실

❍ 띠장 및 이음부 용접 불량 등 접속부 관리 부실

❍ 수직․수평 앵글 및 X브레이싱 미설치 등 보강재 설치시기 미준수

❍ 되메우기 지연 및 층다짐 등 관리 미흡

❍ 배면 재하하중 미검토 및 사면 기울기 미준수 등 사면관리 미흡

❍ 어스앵커 강선에 공사용 작업물 설치 등 관리 부실

❍ 구조계산 오류, 누락, 구조적 결함 등 설계 안전성 미검토

□ 종합의견

❍ 점검 결과 도시기반시설 본부 현장 중 가산동·상도동 흙막이가시설 및 옹벽 붕괴와 같은 대규모 붕괴사고가 발생할 위험이 있는 현장은 없음

❍ 보수 보강 및 설계 안전성 검토 등이 필요한 사항에 대하여 해당 부서로 기 통보하여 조치토록 하였음

❍ 추석연휴 긴급 상황시 연락가능한 비상연락망을 보완․정비 하였음

❍ 소규모 현장 등 집중 관리가 필요한 현장은 전문가를 지정하여 집중 관리 토록 하고, 흙막이 가시설 컨설팅을 의무적으로 시행토록 방침 수립 예정임

붙임 : 1. 흙막이가시설 주요 지적사항  1부.

2. 안전점검 결과보고 1부.  끝.