‘17년 3분기 서울주택도시공사 공정사업 총괄 보고

□ 총괄 추진현황 : 총 9개 유형, 20개 사업

계	정상 추진	다소 지연	지연우려(지속)	기타(보완필요)
20	8	8	2	2

□ 3분기 사업별 추진상황

연번	사 업 명	진행현황	사업비 (백만원)	SH추진부서 / 서울시
	계		2,426,587
1~5	거점공간 확충(창신숭인 1~4, 해방촌)	다소 지연 (1~4개월)	10,735	주거재생사업부/ 주거재생과 공공재생과
6	거점공간 확충(서울역)	정상 추진
7	공공토지 자원 활용(장위동 주차장 부지)	정상 추진	2,705	공유재산개발부/ 주거재생과 공공개발센터
8	등촌동 어울림 플라자 위탁개발사업	지연 지속	479
9	대림동 디딤플라자 위탁개발사업	다소 지연 (1~2개월)	800
10	가로주택정비사업 활성화	정상 추진	-	저층주거지원부 주거복지기획부/ 주거재생과 주거환경개선과
11	주거재생교육 프로그램 구축 운영	정상 추진	-
12	저층주거지 집수리 지원사업	정상 추진	-
13	건축협정 활성화를 위한 매입연대 연계사업	정상 추진	9,469	재생기획부
14	플랫폼 창동 61 운영	정상 추진	1,500	도시재생사업부/ 동북권사업반
15~ 16	두레주택 조성사업(휘경동, 신사동)	보완 필요	1,108	주거재생사업부 공동체주택사업부/ 주거환경개선과
17	두레주택 조성사업(충신동)	다소 지연 (1개월)	2,000
18	세운4구역 도시환경정비사업	다소 지연 (1개월)	1,280,200	세운사업부/ 역사도심재생과
19	개포(구룡마을) 도시개발사업	지연 우려	941,233	개포미래도시부/ 도시활성화과
20	공공토지공간 활용사업 성동구치소 이전부지	정상 추진	176,358	개발기획부/ 공공개발센터

□ 2분기 도시재생본부장 요청사항 조치결과

◯ 추진상황 : 추진완료 1, 추진 중 3, 검토 중 2

연번	사 업 명	요청사항 및 당부말씀	추진상황	추진현황 및 향후계획	처리부서
1	가로주택정비 사업 활성화	□공사에서 요청한 사업자금 지원에 관한 서울시-SH간 업무협약 체결	추진완료	□市 예산확보 협의 완료 이후 협약 체결 ※ 예산지원 협의사항 - 사업성 검토비:1천만원 - 이주비:서울시 이차보전 - 건축공사비 : 공사비의 60%, 50억 원이하	SH 저층주거지원부 서울시 주거환경개선과
2	상동	□SH공사는 국토부, HUG와 협의, 자금지원 방식 전국적 모델화 추진 □市는 전략적 업무 추진 - 사업 활성화를 위해 초기 지원 사업비 규모 상향 등	추진완료	□市 예산확보 협의 완료 이후 협약 체결 ※ 예산지원 협의사항 - 사업성 검토비:1천만원 - 이주비:서울시 이차보전 - 건축공사비 : 공사비의 60%, 50억 원이하
3	상동	□ 성공사례 창출방안 검토 -재생지역내 샘플구역을 정해 집중 투자 관리 등	추 진 중	□상동4동 재생활성화 계획에 반영 추진 중(3건) <추진방법> ┍SH: 자율주택정비사업 ┕자치구: 기반시설 설치비 지원 등 검토 중
4	상동	□사업성이 낮은 지역의 경우, 앵커시설(문화, 보육 등) 설치 방안 검토 -주민수요 반영을 통해 사업 효과성 제고	검 토 중	□가로 및 자율주택정비사업 시행시 사업구역 일부 토지 또는 건물에 지역공동이용시설 설치 검토 ※ 요청사항 - 시설조성비(토지+건물) 개소 당 약 3억 원 지원
5	두레주택 조성사업	□충신동 연극인 두레 주택 2018년도 초순 준공, 입주하도록 노력	추 진 중	□내년 3월 입주 하도록 추진공정 조정 예정 ※ 현재 1~2개월 공정 지연	SH 공동체주택사업부 서울시 주거환경개선과
6	기타사항	□3분기 회의시 정리보고 ① SH의 사업 추진계획 중 실행 가능 사업 ② 3년간의 성과에 대해 평가하고 사업 추진상의 문제점과 개선안 ③ 그간 중앙부처, 국회에 제도개선 등 건의 한사항을 정리하고 -관련 성과와 사업 추진 효과 사례	추 진 중	□ 3분기 보고회의시 별도 서면자료로 보고	SH 재생기획부

※ 사업별 유형 분류

연번	유 형 별	사 업 명	비 고
1	거점공간 확충	거점공간 확충 (창신숭인 1~4, 해방촌, 서울역)
2	공공토지 자원개발 (단일사업)	공공토지 자원 활용(장위동 주차장 부지)
		등촌동 어울림 플라자
		대림동 디딤플라자
3	저층주거지 지원	가로주택정비사업 활성화
		주거재생교육 프로그램 구축 운영
		저층주거지 집수리 지원사업
4	건축협정	건축협정 활성화
5	창동상계	플랫폼 창동 61	경제기반형
6	두레주택	두레주택 조성사업 (휘경동, 신사동, 충신동)
7	세운상가	세운4구역 도시환경정비사업	중심지형
8	도시개발사업	개포(구룡마을) 도시개발사업
9	공공토지 지원개발 (복합개발)	공공토지공간 활용사업 성동구치소 이전부지