6-1		정릉공영차고지 지하화 커뮤니티 공간조성

(주차계획과)

시내버스 차고지가 주민 기피시설(혐오시설)로 인식되어 제기된 성북구 정릉동 차고지 이전요구 민원 해소 및 현장시장실 운영시 건의된 친환경 공영차고지 건설(복합커뮤니터 건립) 추진

□ 사업 개요

○ 위    치 : 성북구 보문국로 145(정릉동 771-7)

○ 규    모 : 대지면적 3,600㎡

○ 소요예산 : 7,600~10,100백만원(상부구조에 따라 변동될 수 있음)

※ 현 건물현황 : 지하1층, 지상2층, 연면적 1,570㎡, 1968년 준공

학술용역 : 정릉차고지 활용방안 수립을 위한 학술용역

용역기간 : 2014. 7. 8. ∼ 2014. 12. 1.(용역비 : 40,470천원)

- 주요내용 : 차고지 기능을 유지하면서 지형적 여건 및 지역적 특성을 감안          하여 적합한 복합개발 허용방안 마련

‣ 연차별 집행(투자)계획(문화복합시설건립사업예산 별도)       (단위 : 백만원)

구분	총사업비	단기		중기			장기	비고
		기 투자액	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년 이후
총계	10,500	-	40	360	10,100	-	-
시비	10,500	-	40	360	10,100	-	-

□ 추진 사항

○ ‘13.10. : 정릉차고지 활용방안을 위한 학술용역 시행 결정

- 연구용역비 50백만원 (‘14년도 예산 편성)

○ ‘14. 3.28.: 정릉차고지 활용방안을 위한 연구용역 추진계획

○ ‘14. 7. 8. ~ 11. 1.: 정릉차고지 활용방안을 위한 연구용역 시행

○ ‘14. 8. 7.:  정릉동 친환경 공영차고지 건립 계획 방침

○ ‘14.10.: 투자심사 실시

○ ‘14.12.30.: 학술용역 결과 보고

- 건축(안)

ㆍ대지면적: 3,600㎡

ㆍ건축면적: 360㎡(건폐율 10%)

ㆍ연 면 적: 1,556.55㎡[용적률 30%, 지하1층(476.55㎡: 차고지 편익시설), 지상1~3층(각 360㎡ : 복합문화시설)]

- 상부구조

ㆍ데크: 건축구조물(76억), 교량구조물(101억)

ㆍ형태: 중앙절개형, 측면절개형

○ ‘14.12.  : 기본 및 실시설계 용역비 360백만원(‘15년도 예산 편성)

○ ‘15. 3.  3.: 설계 의뢰전 사전 검토 의뢰(주차계획과⇒도시기반시설본부)

□ 향후 계획

○ ‘15. 4. : 업체 선정(설계공모 등)

○ ‘15. 4.~12. : 기본 및 실시설계 시행

○ ‘16. 3.~ : 건설 사업 시행

작 성 자	주차계획과장 : 홍현구☎2133-2350 / 차고지관리팀장 : 허원회☎2371 / 담당 : 박형서☎2374

□ 위 치 도

□ 현황사진