침수 취약지역 해소사업 추진현황

침수취약지역	주 요 사 업	추 진 현 황	비 고
광화문 일대	∘ 저류시설 유입관로 개선(0.22km) ∘ C자형 관로 개선(0.85km)	∘ 기본 및 실시설계 ∘ 기존 단기대책 검증후 착공예정
용산 한강로 일대	∘ 펌프장 신설(1,010㎥/분) ∘ 유역분리 관거(신설 1.03km, 개량 1.30km)	∘ 펌프장 가시설 설치중 ∘ 유역분리관거 설치중
신월 지역 (2개소)	∘ 빗물저류배수시설(터널 3.61km), 유도터널 1.1km, 수직구 6개소	∘ 수직구 6개소 굴착 완료 터널 굴착중
동작 사당역 일대	∘ 저류조(2개소), 하수관거 개선(4.1km) ∘ 빗물저류배수시설(3.71km)	∘ 저류조 실시설계 및 관거개선 계획 중 ∘ 민자 도로터널 연계방안 검토중
강남역 일대	∘ 배수구역 경계조정(116.5ha) ∘ 유역분리 터널(D=7,500mm, L=1.3km)	∘ 배수구역경계조정 우선시공분 발주 ∘ 유역분리터널 우선시공분 설계 중
도림천 일대 (3개소)	∘ 저류조 설치(3개소 6.5만톤)	∘ 서울대정문앞 구조물 공사 중
길동 일대	∘ 하수관거 개량(4.46km)	∘ 하수관로 개량 공사중
강서구청 사거리	∘ 하수관거 개량(2.51km)	∘ 하수관로 개량 공사중
시흥사거리	∘ 시흥천 확장(0.595km)	∘ 실시설계중
대치역 사거리	∘ 도곡 빗물펌프장 신설(900㎥/분)	∘ 가시설 설치중
내방역 사거리	∘ 하수관거 신설(2.1km)	∘ 하수관거 부설 공사중
암사역 일대	∘ 하수관거 개량(1.97km)	∘ 하수암거 부설 공사중
공항펌프장 주변	∘ 마곡1(4,080㎥/분)펌프장 재설치 ∘ 마곡2(2,600㎥/분)펌프장 신설	∘ 마곡2펌프장 완료 ∘ 마곡1펌프장 마감공사중(’16.6완료예정)
망원 유역	∘ 빗물저류조 9.9만톤, 하수관거 개량 340m	∘ 기본계획 완료
오류동역 주변	∘ 오류천 확장(1.7km)	∘ 기본 및 실시설계중
잠원 지역	∘ 자연방류관로 설치 1식(640m)	∘ 자연방류관로 설치중
신천 지역	∘ 신천펌프장 유입관로 개량(2.71km)	∘ 유입관로 개량 공사중
공릉초교 주변	∘ 공릉2 빗물펌프장 신설(520㎥/분)	∘ 펌프장 구조물 공사중(’16.6완료예정)
용답동,답십리역 일대	∘ 하수관거 개량(0.55km)	∘ PC BOX 부설중(’16.6완료예정)