팀장				부장				본부장				이사장
														01/11
박민준				김병회				오병혁				김호연
협조자	팀장				부장
			정신교				김진이

등록번호	체육사업부-286
등록일자	2018.01.11
결재일자	2018.01.11
공개구분	공개

구민에게 신뢰받는 일류 공기업

쾌적하고 안전한 체육시설 조성 추진계획

- 2018년 자본적지출(수탁자산취득비) 집행계획 -

2018.01.10

강 남 구 도 시 관 리 공 단

체육사업부

쾌적하고 안전한 체육시설 조성 추진계획

- 2018년 자본적지출(수탁자산취득비) 집행계획 -

구립체육시설의 노후된 시설 개･보수 및 운영장비 교체사업을 연중 추진함으로써 쾌적하고 안전한 시설물 유지관리를 통해 이용고객 만족도 제고에 기여하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 최상의 운동환경 조성을 위한 시설장비 현대화 추진 결과보고(체육사업부-7442호, 2017.12.28)

□ 제158회 이사회 개최결과 통보(경영기획부-3228호, 2017.11.21)

□ 2018년도 사업계획 시달(경영기획부-61호, 2018.01.03.) - 부서 주요업무

Ⅱ		추 진 개 요

□ 추진기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.

□ 대상시설 : 총 7개 시설(강남스포츠문화센터 외 6개 시설)

□ 추진내용 : 시설 개보수 및 장비 구매․교체 등

□ 편성예산 : 총 817,241천원

(단위 : 천원, 건)

구 분		편성예산	추진(집행)내용
			계	공사	구매	기타
총 계		817,241	56	16	34	6
강남구민회관		219,924	15	9	4	2
강남스포츠문화센터		380,717	18	5	11	2
체육 시설	소 계	188,300	16	2	13	1
	구민체육관	150,800	9	1	7	1
	대진체육관	2,700	3		3
	봉은테니스	34,800	4	1	3
구민회관체육교실		12,100	3		3
매봉산실태배드민턴장		16,200	4		3	1

□ 예산과목 : 자본적지출/수탁자산/수탁자산취득비(회계별)

Ⅲ		추 진 방 향

□ 각 사업추진 시 공개경쟁 입찰, 조달 구매 시행을 원칙으로 하되, 불가피한 사유 발생 시에는 수의계약 추진

□ 재정신속집행 정상추진을 위한 분야별 통합 발주 및 적기(조기) 추진

□ 사업 특성 등 고려 지원부서(안전시설팀, 전산정보팀) 협조 진행

□ 시설 공사 시 철저한 관리, 감독으로 부실공사 예방노력 확행

□ 공사 진행 시 사전 안내 철저, 휴관일 시행 등으로 이용고객 불편 최소화

Ⅳ		추 진 계 획

□ 시설별 추진사업 세부내역

구 분		사 업 명	편 성 액	비 고
강 남 구 민 회 관	소 계		219,924,000
	시설 개선 (공사)	1. 지하층 트랜치 보수 및 에폭시 작업	46,584,000
		2. 공연장 무대조명바톤 설치	31,900,000
		3. 대강당 냉난방기 자동제어장치 설치	9,922,000
		4. 온수탱크 헤드라인 교체	3,355,000
		5. 온수보일러 배관 교체	31,033,000
		6. 기계실 펌프 수리 및 교체	12,274,000
		7. 냉각탑 및 판넬 보수	5,505,000
		8. 무대시설보수(정밀안전진단결과조치)	37,924,000
		9. 샤워실 온수전기보일러 설치	3,259,000
		기타. 설계/감리비, 민원/긴급비 등	23,368,000
	물품 장비 구매	1. 대강당 피아노운반구(캐리어)	9,000,000
		2. 업무용 컴퓨터/모니터	3,600,000	통합구매
		3. 사무용 의자	1,000,000
		4. 카드 단말기 세트	1,200,000	포털시스템
강 남 스포츠 문 화 센 터	소 계		380,717,000
	시설 개선 (공사)	1. 숭강기 교체	160,000,000
		2. 골프장 개보수(스크린타석)	75,000,000
		3. CCTV 장비교체	15,000,000
		4. 필라테스교실 설치(기구포함)	42,000,000
		5. 안내데스크 개선	20,000,000
		기타. L3 네트워크 스위치 교체	4,700,000	전산정보팀
		기타. 민원/긴급 물품구매 및 개보수	7,000,000
	물품 장비 구매	1. 헬스장비	7,000,000
		2. 전자게시판	2,417,000
		3. 강습용기자재(미니빔외)	3,000,000
		4. 바코드리더기 외 장비	1,000,000	포털시스템
		5. 독서실 의자 교체	4,000,000
		6. 교실(강습) 의자 교체	2,500,000
		7. 음향장비 교체	9,000,000
		8. 컴퓨터/모니터	8,400,000	통합구매
		9. 사무용 의자	2,100,000
		10. 카드 단말기 세트	3,600,000	포털시스템
		11. 체육관/교실용 에어컨 구매/설치	14,000,000
구 민 체육관	소 계		150,800,000
	시설 개선	1. 교실 바닥 교체(탁구장 외)	55,000,000
	물품 장비 구매	1. 탁구대 교체	3,900,000
		2. 헬스장비/농구대(천정조하식)	72,000,000
		3. 냉난방기 구매/설치	7,500,000
		4. 업무용 컴퓨터/모니터	2,400,000	통합구매
		5. 사무용 의자	900,000
		6. 프린터	500,000	인바디용
		7. 카드 단말기 세트	3,600,000	포털시스템
		기타. 민원/긴급 물품구매 및 개보수	5,000,000
대 진 체육관	소 계		2,700,000
	물품 장비 구매	1. 업무용 컴퓨터/모니터	1,200,000	통합구매
		2. 사무용 의자	300,000
		3. 카드 단말기 세트	1,200,000	포털시스템
봉 은 테니스	소 계		34,800,000
	시설 개선	1. 샤워/탈의실 개선	33,000,000
	물품 장비 구매	1. 사무용 의자	300,000
		2. 콤프레샤	300,000
		3. 카드 단말기 세트	1,200,000	포털시스템
구 민 회 관 체 육 교 실	소 계		12,100,000
	물품 장비 구매	1. 냉난방기 구매/설치	2,500,000
		2. 사물함 교체	8,400,000
		3. 카드 단말기 세트	1,200,000	포털시스템
매봉산 실 내 배 드 민턴장	소 계		16,200,000
	물품 장비 구매	1. 사물함 신규구매	5,600,000
		2. 업무용 컴퓨터/모니터	2,400,000	통합구매
		3. 카드 단말기 세트	1,200,000	포털시스템
		기타. 민원/긴급 물품구매 및 개보수	7,000,000
총 계			817,241,000

□ 추진방법

○ 원활한 사업추진을 위해서 동일 또는 유사 건은 통합하여 진행하며, 시설별 담당자 지원(지정)을 통해 대부분의 사업이 상반기 내 완료될 수 있도록 추진

구 분	총 괄(전체시설)	강남스포츠 문화센터	구민회관 (체육교실)	구민체육관
주관/담당	일반5급 박민준	기술6급 곽희섭 일반7급 정희정	일반7급 김순용	업무7급 백현영
추진내용	대수선/통합구매	단위(개별) 사업 추진 - 시설별 공사 및 구매업무 등

※  대규모 공사의 경우 고객만족부(안전시설팀) 지원 및 협조 하 추진

○ 이용불편 최소화 등을 위해 사전 설명/안내(내역공지) 및 의견수렴 후 공사나 구매 시 반영 ☜ 고객만족 및 주민(회원)참여

□ 추진일정(안)

○ 2018. 1. 12. : 사전보고(집행실적 및 계획) 및 종합방침 수립

○ 2018. 1. 15. ~ 1. 26. : 예산배정 요청(구 주관부서) 및 확인 등

○ 2018. 1. 22. ~ 1. 31. : 시설별 내역공지/안내 및 의견수렴 등 사전준비

○ 2018. 1. 29. ~ 2.  9. : 사업별 추진(공사/구매)계획 품의, 발주 등

※ 통합구매와 공사 설계는 2월말 이전, 본 공사는 4월말 이전 발주

○ 2018. 2월초 ~ 6월중순 : 사업별 집행

○ 2018. 하반기 : 상반기 미추진 사업 및 민원사항 해결 등 추가집행

Ⅴ		기 대 효 과

□ 노후시설 개보수, 장비확충 통한 시설 안전성 확보 및 자산 가치 증대

□ 친환경 물품구매, 시설개선 공사를 통한 쾌적하고 안전한 시설물 제공, 구민 생활체육 활성화에 기여

□ 소통으로 통합하는 공공기관, 지역주민(회원)과 함께하는 고객감동경영 실천

□ 시설물 유지관리 비용 절감 등 시설 관리운영의 효율성 제고

□ 시설안전을 최우선으로 노후 체육시설 개선활동 지속, 안전경영 실천

Ⅵ		행 정 사 항

□ 본 방침 후 즉시 구 주관부서에 예산 배정 요청

□ 자산취득 시 정부권장물품, 중소기업제품 우선 구매

□ 자본적지출(수탁자산취득비) 집행관련 경영지원부(재무회계팀) 협조 하 적의 집행 및 시행

□ 확대간부회의(2018.1.9.화)시 보고한 인력충원(기술직 포함) 요청

붙임  1. 2018년 자본적지출(수탁자산취득비) 예산편성 내역_체육사업부 1부

2. 구립체육시설 개보수 추진실적 및 계획_간부회의 1부

3. 최상의 운동환경 조성을 위한 시설·장비 현대화 추진 결과 보고.  끝.