문서번호	건축부-11345
결재일자	2016.8.25.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		의료시설과장	건축부장
협 조

탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사 관급자재 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.

도시기반시설본부

건  축  부

탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사

관급자재 구매계획

우리 본부에서 추진 중인 탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사의 건축공사 관급자재에 대한 구매 계획임

1. 공사개요

○ 대지위치 : 강남구 개포로 625(탄천물재생센터 제2처리장)

○ 규    모 : 구조물복개상부 공원화 및 주민친화시설 조성

- 건축공사 : 관리동(340㎡) 및 화장실(135㎡), 다목적 체육실(2,211㎡), 온실(720㎡)

○ 공사기간 : `1310.01～`16.9.29(건축:`16.7.11～`16.9.29)

○ 총사업비 : 33,902백만원(건축:2,800백만원)

○ 시 공 자 : 웅진개발㈜, 대우조선해양건설㈜

○ 건설사업관리자 : ㈜유신, ㈜경동엔지니어링

2. 추진경위

○ `15.12.31 : 탄천복개 4단계 상부 활용계획 변경(물재생시설과)

- 실시설계 : 탄천환경 시행,  설계변경 및 공사 : 도기본 시행

○ `16. 6.27 : 다목적체육시설, 온실 기본 및 실시설계 완료(탄천환경)

○ `16. 7.28 : 추가공사 협의율(적용단가) 결정(강제 협의율 적용)

○ `16. 7.11 : 건축공사 착수

○ `16. 7.14 : 공공건축물 건축허가 협의(강남구청 건축과)

○ `16. 8.18 : 관급자재 수급계획서 검토보고 제출(건설사업관리단)

3. 관급자재 현황 및 구매계획

□ 설계현황

품 명	공종	단위	수 량	설계금액(원)	비고
막구조물	구조	㎡	3,357	1,040,710,000	제작및현장설치도

□ 소요예산 : 1,040,710,000(조달수수료 별도)

□ 구매계획

○ 구매방법 : 조달구매

○ 투입시기 : 공사일정에 따라 구매 및 납품요구

○ 구매조건 :

- 수행가능업종 : 금속구조물•창호공사업종(업종코드1440)

※ 당 현장의 막구조물 공사범위가 금속구조물 및 창호설치 등의 공정만 해당되어, 공사 성격상 금속구조물, 창호공사업종만 참여

- 실적제한 : 1,000㎡ 이상 막구조물 실적이 있는 업체(본공사 막재면적 3,357㎡)

※ 행정자치부 예규 제4장 운영요령에 의거 시설공사를 시공 실적 규모, 양으로 제한하는 경우 해당공사 규모의 1/3을 원칙으로 하되, 공사의 특성, 경쟁성, 공사의난이도, 계약방법 등을 고려하여 조정할 수 있다.

□ 예산과목 : 하수도사업특별회계, 물재생시설개선및관리, 물재생시설개선, 탄천물재생셍터복개공원화(4단계), 시설비

붙임  1. 관급자재 내역서 1부.

2. 관급자재 수급계획 검토보고(감리) 및 수급계획서 각 1부.  끝.