문서번호	방재시설부-1913
결재일자	2018.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
협조

탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

사토 운반 관리시스템 소요경비 반영 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

사토 운반 관리시스템 소요경비 반영 검토 보고

「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」사토 발생량에 대하여 사토 운반 관리시스템을 이용한 운반 차량에 대한 운행경로 파악 등 관리업무의 효율성 증대를 위한 소요경비 반영 검토 보고 임.

□ 관련근거

○ 토목부-6215(2017.3.27.) : 사토 및 폐기물 운반 관리시스템 도입 보고

○ 탄천하감2018-28(2018.1.26.) : 사토 등 운반 관리시스템 시행에 따른 소요경비 반영 실정보고

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

○ 위    치 : 서울시 강남구 개포로 625일원(탄천물재생센터 내)

○ 공사규모 : 총인처리시설 Q=450,000㎥/일

- 1처리장 245,000㎥/일, 2처리장 205,000㎥/일

○ 총공사비 및 공사기간                                 (단위 : 천원)

구 분	전 체	1 차 분	장 래
총공사비	15,462,489	10,892,700	4,569,789
도 급 비	12,009,905	8,872,000	3,137,905
관 급 비	3,452,584	2,020,700	1,431,884
공사기간	`17.09.01.~`19.10.31.	`17.09.01.~`18.12.31.	`19.01.01.~`19.10.31.

○ 시공사/사업관리 : 백상건설(주)외 2개사/㈜선진엔지니어링종합건축사사무소외 3개사

○ 예산과목

- 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비, 시설비

□ 사토 및 폐기물 운반 관리시스템(스마트송장) 개요

○ 적용대상 : 사토 연간 4,000㎥이상, 폐기물 연간 2,000ton 이상

○ 조치사항

- 소요경비로 사토 및 폐기물 운반비의 1.5%(부가세 제외)를 도급비 반영

- 스마트 송장 시스템을 사전 숙지하여 사토 및 폐기물 반출시 적용

○ 관리업체 : ㈜비투텍(02-2624-1806)

□ 검토내용

○ 당 현장은 연간 사토 발생량이 4,000㎥ 이상으로 사토 운반관리시스템 적용 소요경비로 사토 운반비의 1.5%(부가세 제외)를 도급비 반영(물량에 따라 연동)이 필요한 실정임.

○ 사토 발생량                                         (단위 : ㎥)

구 분	토 사	풍화암	합 계	비 고
1처리장	19,977	116	20,093	연 간 발생량
2처리장	21,658	-	21,658
합 계	41,635	116	41,751

○ 소요예산(증9,856천원)

구 분	수 량	단위	단가(원)	운반비(원)	비고
사토(토 사)	41,635	㎥	14,292	595,047,420	운반관리 시스템 소요경비
사토(풍화암)	116	㎥	19,942	2,313,272
공급가액		식		597,360,692
스마트송장시스템	1.5	%	8,960,410	8,960,000
부가가치세				896,000
도 급 비				9,856,000

※ 사토장(수도권매립지) 반입불가로 운반비 재산정 및 사토량 추후 정산조치

□ 검토의견

○ 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업으로 발생된 사토에 대한 사토 운반 관리시스템 소요경비를 운반비의 1.5%(부가세 제외)를 적용하여 추후 설계변경시 반영이 필요하며,

○ 사토장(수도권매립지) 반입불가로 사토장 변경에 따른 운반비 재산정 및 사토 발생량에 대하여 사후 정산조치가 필요함.

□ 조치계획

○ 상기 검토의견과 같이 실정보고 사항을 승인처리하고 공사비에 반영하여 추후 설계변경하고자 함.

붙임  감리단 실정보고서 1부.  끝.