건설사업관리기술자 배치계획표 - 총차 (당초)

구분	성 명	등 급	투 입 월 수	환산비	투입 인.일수	2017							2018																2019									비고
						10		11	12	1			2		3		4		5	6	7	8		9		10	11	12	1		2		3			4
						0		1	2	3			4		5		6		7	8	9	10		11		12	13	14	15		16		17			18
상주	책 임 박승훈	특 급	18.00	1.188	470	16																															8	유탑
							16	30	31	31			28		31		30		31	30	31	31		30		31	30	31	31		28		31			8
	건 축 김정훈	중 급	18.00	0.814	322	16																															8	유탑
							16	30	31	31			28		31		30		31	30	31	31		30		31	30	31	31		28		31			8
	건 축 추후배치	초 급	14.00	0.646	198					14																								9				ITM
											18		28		31		30		31	30	31	31		30		31	30	31	31		28		9
	토 목 전재동	특 급	8.00	1.188	209	16												13											9					9				ITM
							16	30	31	31			28		31		13													23	28		9
	조 경 추후배치	중 급	9.00	0.814	161					14						14						12													9			ITM
												18	28		14								20	30		31	30	31	31		28		9
	기 계 류국환	고 급	14.00	1.000	308					14																									9			유탑
												18	28		31		30		31	30	31	31		30		31	30	31	31		28		9
	전 기 김용규	특 급	13.00	1.247	356								13																						9			ITM
														16	31		30		31	30	31	31		30		31	30	31	31		28		9
	전 기 추후배치	초 급	13.00	0.778	222								13																						9			유탑
														16	31		30		31	30	31	31		30		31	30	31	31		28		9
	통 신 추후배치	고 급	6.00	1.000	132																			11											9			유탑
																									20	31	30	31	31		28		9
소계				-	2378
기술지원	건 축 채규헌	고 급	16.00	전체 용역기간에 적절히 투입	30	16																										7						유탑
	구 조 윤양수	기술사	16.00		30	16																										7						유탑
	안 전 강세남	기술사 ,기사	16.00		30	16																										7						ITM
	토 목 권오익	고 급	16.00		30	16																										7						ITM
	조 경 예재대	고 급	16.00		30	16																										7						ITM
	기 계 장영구	고 급	16.00		30	16																										7						유탑
	전 기 이성일	고 급	16.00		57	16																										7						ITM
	통 신 홍춘식	고 급	16.00		13	16																										7						ITM
	소 방 이경목	중 급	16.00		64	16																										7						유탑
소계					314
총계					2692