구의 재건설 통수 및 시운전 일정표

□ 통수일정

구 분	추진 일정
수계전환	○ 월계 수계전환 추진 - 주관부서 : 배수과, 북부수도사업소 - 협조부서 : 구의정수센터, 고도정수반 - 추진일시 : 2014.12.29.(월) 10:00~14:00 - 추진내용 : 강북(직송)→강북(공릉)
월계배수지 시운전및세척	○ 월계배수지 시운전 및 세척 - 주관부서 : 배수과, 북부수도사업소 - 협조부서 : 구의정수센터, 고도정수반 - 추진일시 : 2014.12.29.~30(2일간) - 추진방법 : 월계#1개지 비워서 운영(담수물량은 퇴수)

□ 시운전 계획

구 분	추진 일정
1단계	○ 1단계 추진 - 주관부서 : 기전설비과, 고도정수반 - 추진일시 : 2015.01.05.~07--(2일간, 24hr) - 추진개요 : D1650mm, L=10.6km(구의→월능) - 추진방법 : 순차적 모터 가동하여 월능교에서 퇴수시행 ※ 최종 통수시(2단계)에는 관계자회의 결과를 반영하여 시행
2단계 (통수)	○ 2단계 추진 - 추진기간 : 1단계 완료이후 이상 없을시 월계배수지로 단계별 수계전환 운영 - 추진개요 : D1650mm, L=23km(구의→월계배수지) - 추진방법 : 월계배수지 단계별 운영