문서번호	설비부-20481
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
협 조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 통신공사 -

공사기간(1차분) 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

도시기반시설본부

설비부

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 통신공사 -

공사기간(1차분) 연장 검토 보고

본 통신공사 진행과 관련하여 도로확장 구간에 위치한 VMS이설 위치 협의 진행 중 도수관로(D=2200㎜) 안전진단 사항 등이 추가로 발생함에 따라 대책을 수립하고 이설작업 추진이 필요하여 당초 계획한 통신공사 1차분 준공기한(‘17.12.31일)으로는 절대공기가 부족하기에 공사 기간을 다음과 같이 연장 조치하고자 검토 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 통신공사

□ 공사규모 : 램프신설 L=1,383m, 램프이설 L=1,309m)

VDS(차량검지기) 이설×6개소, CCTV(동영상수집기) 이설×2개소

VMS(도로전광판) 이설×2개소, LCS(차로통제시스템) 이설×4개소

기타(광통신케이블, 영상검지기 등) 이설×1식

□ 공사기간 : 총차 `17.04.27.~`20.03.25.( 1차 `17.04.27.~`17.12.31.)

□ 도 급 비 : 총차 금1,029,932,841원(1차 금367,000,000원)

□ 계 약 자 : ㈜한포넷 대표 이현우

□ 감 리 자 : ㈜이산

2		공사기간(1차분) 연장검토 내용

□ 관련근거

○ 풍납취수장 부지내 VMS 철거 및 설치작업에 대한 회시

: 영등포아리수정수센터 정수시설과-10316호(`17.11.02)

○ 통신공사(1차) 준공기한 연기 검토 보고 : 올대감 17-307호(`17.12.05)

□ 공사기간 연장사유

○ 본 통신공사 진행 중 도로확장 구간에 위치한 VMS이설 위치 협의 진행중 해당 위치에 매설된 도수관로(D=2200㎜) 안전진단 사항 등이 추가로 발생함에 따라 대책을 수립하고 이설작업 추진이 필요하여 당초 1차분 준공기한(`17.12.31일)으로는 절대공기가 부족한 실정으로 전체 공사기간은 변경없이 1차분 준공기한을 연기조치하고자 함

- 공정율(토목 26%, 전기 4%, 통신 44%) : 현재 2017.12월 기준

<VMS>

이설 위치도	이설 대상	도수관로 매설지역

□ 공사기간 연장내용

구 분	당 초	변 경	비 고
전 체	2017.04.27.~2020.03.25	2017.04.27.~2020.03.25	변경없음
1 차	2017.04.27.~2017.12.31	2017.08.01.~2018.05.30	증150일

□ 귀 책 소 재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금부과여부 : 미부과

3		조 치 계 획

□ 본 통신공사의 당초 1차분 공사 준공기한을 `18.05.30.일까지 연기조치하여 당초 계획한 공사추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.