		2017. 2. 15.(수) 조간용
		이 보도자료는 2017년 2월 14일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :	도시교통본부 보행정책과(설계)			보행정책과장	이 방 일	2133-2410
				보행시설팀장	박 영 기	2133-2436
				담 당 자	전 하 현	2133-2437
	도시기반시설본부 토목부(시공)			토목부장	김 영 수	3708-2540
				토목총괄과장	이 동 훈	3708-2541
사진없음 □	사진있음 ▣		쪽수 : 7쪽	담 당 자	이 상 욱	3708-2543
퇴계로(서울로~회현역7번출입구) 보행환경개선 공사 첫 삽 뜬다 - 오는 2.16일 차로를 줄이고 보도를 확충하는 퇴계로 보행환경 개선사업 착공 ① 보도포장 ② 한전지상기기·보도시설물 정비 ③ 조업정차공간 조성 ④ 교차로 횡단보도 확대 등으로 안전하고 걷기 편한 보행거리 조성 - 서울로7017(회현역5번출입구)~회현역7번출입구(250m)에 대하여 ’17.3월말 준공 - 공사로 인한 차로점용 등 교통혼잡 및 시민불편 최소화를 위한 교통대책 마련 - 市, 공사기간 내 교통정보 제공 및 우회 안내 시행, 시민협조 당부

□ 서울시는 ‘걷는 도시, 서울’ 사업의 일환으로 퇴계로 서울로(회현역5번출입구)부터 회현역7번출입구사거리 구간을 보행자 중심으로 재편하기 위하여 오는 ’17.2.16일 착공한다고 밝혔다.

○ 본 사업은 ‘서울로 7017 보행특구’사업과 연계한 보행네트워크를 구축하기 위한 것으로 도심 내 도로공간재편 사업으로는 처음으로 착수하게 되었다.

< 서울로(회현역 5번 출입구) ~ 회현역 7번 출입구(250m) 2017.3월말 완료〉

□ 이번 서울로 7017과 연결되는 남대문시장 구간(연장 약250m) 공사는 ’17.2.16일 착수할 계획이며 4개 구간(A,B구간 회현동측, C,D구간 남대문시장측)으로 사업구간을 나누어 3월 말까지 시행할 예정이다.

○ ’17.2.16일 착수하여 각 구간별 7일에서 15일가량 소요될 예정으로 경계석·측구를 설치하고 보도포장 공사를 시행하여 3.27일까지 마무리한다는 계획이다.

- A구간(회현역4번출입구~티마크그랜드호텔, 215m, 544㎡)

- B구간(티마크그랜드호텔~회현역1번출입구, 142m, 504㎡)

- C구간(회현역7번출입구~남대문시장 6번게이트, 145m, 1,011㎡)

- D구간(남대문시장6번게이트~회현역5번출입구, 159m, 680㎡)

□ 공사추진은 1개구간 시공완료 후 다음 구간을 시공하는 단계적인 방법으로 추진하여 공사기간을 단축하고 주로 야간시간대(24시~06시)에 작업을 시행하여 시민불편을 최소화 한다는 계획이다.

< 안전하고 걷기 편한 거리 조성을 위한 보행환경 개선 주요 내용 >

□ 퇴계로 보행환경개선 공사는 ① 보도포장, ② 한전지상기기 등 보행지장물 정비, ③ 조업정차공간 조성, ④ 교차로 횡단보도 확대 등을 통하여 걷기 편하고 안전한 보행공간을 조성할 계획이다.

① 회현역5번 출입구~7번 출입구(250m)는 서울로 7017의 포장재질과 유사한 재질의 PC콘크리트 블록을 사용하여 전면 포장(3,431㎡)을 시행한다.

② 한전지상기기 중 회현역 5번 출입구~7번 출입구 구간에 산재되어 있는 8기는 1곳에 모아 넣고(회현역 복합시설 사업구간 내) 그 외 구간의 나머지 2기는 띠녹지로 이설하는 방식으로 보행지장물을 정비한다.

③ 남대문시장의 지역특성을 반영하여 조업정차공간을 조성한다. 남대문시장 4번 게이트 주변에 일반차량 2개소(5면, 30m), 이륜차전용공간 2개소(25면, 25m)를 조성한다.

④ 보행연계성을 향상시키기 위하여 회현역1번 출입구의 교차로 횡단보도를 추가 설치한다. ㉢형이던 횡단보도를 ㉤형태로 횡단보도를 1개소 추가 설치함으로써 남대문시장에서 남산으로 보다 쉽게 접근할 수 있도록 하였다.

< 공사로 인한 시민불편을 최소화하기 위한 교통대책 마련 >

□ 차로축소 및 보도확장을 하는 구간인 남대문시장측은 차로축소 후 신설보도 공사 중에는 보행자는 기존 보도를 이용하고 기존 보도 공사 시에는 신설된 보도를 보행통로로 이용할 수 있게 해 보행불편을 최소화한다.

○ 차로축소구간이 많지 않아 주로 보도정비를 시행하는 회현동측은 별도 보행통로를 마련하여 보행자의 안전을 확보하고 점진적이고 단계적 공사를 시행하여 공사기간을 단축할 계획이다.

□ 또한 공사 시 차량의 교통혼잡을 최소화하기 위하여 단계별(150~200m) 편도1차로를 점용하도록 하였다.

○ 도로점용으로 차로가 변경되는 구간은 교통안내표지판을 통한 사전안내를 시행하여 차량의 지·정체 현상을 최소화 할 계획이다.

□ 공사로 인한 버스노선의 변화는 없으나 버스정류소 구간의 보도공사시 인근에 임시버스정류소를 운영하여 대중교통 이용에 불편함이 없도록 조치할 계획이다.

○ 서울로(회현역 5번 출입구)부터 회현역 7번 출입구 공사구간에는 총2개의 버스정류소(남대문시장역 상·하행 2개소)가 있으며 버스노선의 변화는 없다. 다만 해당 버스정류소의 보도공사시에는 인근 10~30m지점에 임시버스정류소를 운영할 예정이다.

□ 서울시는 평소 퇴계로를 이용하던 차량이 원활하게 우회할 수 있도록 도심 내 주요 도로에 지점별로 차별화된 우회정보를 담은 교통안내간판을 설치하고, 도로전광표지(VMS) 등을 활용해 적극 안내할 계획이다.

○ 동대문역사공원 내지 만리재로 등에서 퇴계로를 이용하던 차량은 남대문로, 종로, 을지로 방면으로 우회하도록 유도할 예정이이며 이를 위해 도심내 VMS 총15개소에 퇴계로 공사안내, 우회도로 안내 문구를 표출하도록 계획하였다.

번호	지점명
1001	새안빌딩 앞
1002	현대자동차 카센터 앞
1003	경복궁역 버스정류소
1004	독립문역 중앙정류소
1009	이대역 중앙정류소
1011	아현초등학교 중앙정류소
1012	만리주유소 앞
1013	철도시설공단 앞
1015	갈월동 중앙정류소
1016	남산파크호텔 맞은편
1017	퇴계로2가 교차로
1018	금호역
1019	우리은행 앞
1025	종묘시민공원 앞
1026	태평로 동아일보 앞

<서울로부터 회현역7번출입구 보행환경개선 공사 안내 표출 대상 : 도심권 15개 VMS>

구분	사전홍보	공사 중 홍보
홍보 내용	2.16(목)~3.27(월) 서울로~회현역 7번 출입구 간 보행환경 개선공사 예정 대중교통 이용바랍니다	2.16(목)~3.27(월) 서울로~회현역 7번 출입구 간 보행환경 개선공사 대중교통 이용바랍니다
<VMS 안내문구 표출 예시>

□ 시는 지난 ’16년 11월 공사로 발생될 수 있는 교통혼잡 방지와 보행자 안전확보를 위한 ‘도로점용공사장 교통소통대책’을 교통전문가 자문및 서울지방경찰청 등 유관기관과 긴밀히 협의하여 수립하였다.

□ 서울시는 2월부터 퇴계로 보행환경개선 사업이 본격적으로 시작되면 공사장 주변 교통체계 변경 등으로 정체가 예상되므로, 시민들의 대중교통 이용과 우회경로 활용 등 적극적인 협조를 당부했다.

□ 이방일 서울시 보행정책과장은 “퇴계로 공간재편 공사로 발생될 수 있는 교통정체 및 시민불편을 최소화 할 수 있도록 모든 역량을 집중할 계획”이라며 “공사기간 동안 우회도로 이용 및 대중교통 이용 등 시민여러분의 이해와 협조를 당부드린다.” 고 말했다.

붙임 : 1. 퇴계로 보행환경개선 사업 개요 1부.

2. 보행지장물 정비 계획도 1부.

3. 교통안내표지판 설치 계획도 1부.

<붙임 1 >

퇴계로 보행환경개선 사업 개요

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울로(회현역 5번 출입구)~회현역 7번 출입구(6차로, 연장250m)

○ 사업내용 : 차로축소를 통한 보행공간 확충, 보행환경개선

- 차로축소(1차로 축소), 보도확충(4.4~5.8m → 4.4~12.5m)

- 조업정차공간 2개소(5면 30m), 이륜차 정차공간 2개소(25면, 25m)

- 교차로 횡단보도 확대(1개소) : 회현역1번 출구앞(㉢형→㉤형)

- 조경식재 : 남대문시장 구간 클러스터 식재 및 신세계백화점앞 2열 식재

- 한전지상기기 이설 : 총8개를 1곳에 모음(회현역 복합시설 부지내)

- 가로등 설치공사 : 사업구간내 전체 41본을 신규로 교체

○ 사업예산 : 18억원

□ 공사계획도

위 치	구간별 현황		주요공종	공사기간(안)
	A	- 연장 215m - 면적 544㎡	측구경계석 설치 보도토공 및 포장	’17.2.16 ~ 3.27
	B	- 연장 142m - 면적 504㎡
	C	- 연장 145m - 면적 1,011㎡
	D	- 연장 159m - 면적 680㎡

<붙임 2 >

보행지장물 정비 계획도

□ 보행지장물 정비계획

남대문시장 주변(250m)

<붙임 3>

퇴계로 교통안내표지판 설치 계획