교량안전과 2014년 투융자심사 대상사업

투융자심사 사업 추진현황 총괄표

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
동작대교 보수ㆍ보강공사	36,340	6,000	3,500	18,400	2017	2011	34%
한강대교 보강․보수공사	12,363	4,800	2,439	-	2014	2011	100%
아현고가차도철거	12,500	5,000	2,576	0	2014	2012	100%
성산대교 성능개선사업	112,800	1,850	847	110,103	2022	2012	2.4%
장안교(구교) 성능개선 사업	18,800	400	1,500	18,800	2017	2012	10%
북악스카이웨이1교 보수․보강	4,630	-	322	6,540	2016	2014	7%

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

동작대교 보수ㆍ보강공사

담당자

교량안전과 임동운

(☎2133-1952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1984년도에 준공된 동작대교의 정밀안전진단 결과, 시설물의 노후화가 진행되고 있어 대대적인 보수ㆍ보강을 통한 적기 보수로 내구성 증대 및 안전성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2017

○ 위 치 : 용산구 이촌동 ~ 동작구 동작동

○ 규 모 : 본교  폭 14.3m, 연장 1920m

접속교 및 램프  폭 6~33.5m, 연장 3,326m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  27,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	27,900	6,000	3,500	9,000	9,400
국 비
시 도 비	27,900	6,000	3,500	9,000	9,400
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  34%)

○ 2011. 12   : 실시설계완료

○ 2012~2014 : 1차공사완료(사업비 95억원)

○ 2015. 6 ~  : 2차공사시행중(2015년 사업비 90억원)

□ 향후계획

○ 2017. 12 : 2차공사 완료 예정(사업비 94억원)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경없이 당초 총사업비가 363억원에서 시공사 선정을 위한

입찰결과 총사업비가 279억원으로 변경됨

사업명

한강대교 보강․보수공사

담당자

교량안전과 이정훈

(☎2133-1958)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한강대교는 구교 1937년, 신교는 1982년에 건설되어 교량노후화가 진행되고 있고 '09년 정밀점검 및 ‘11년 안전진단 결과 강재 부식, 신축이음장치 및 교면 방수재 파손 등의 손상이 발생하였으며, 내구성 증대 및 성능개선을 위한 보강공사를 시행함에 있어 일정수준 이상의 시공능력과 하자책임능력을 보유하고 있는 업체의 일관성 있는 시행이 필요한 바, 연차별 계속사업으로 내구성 증대 및 안전성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2014

○ 위 치 : 한강대교(용산구 한강로 3가 ∼ 동작구 노량진 본동)

○ 규 모 : 받침교체 149개, 콘크리트보수 804㎡, 강재도장 2,339㎡,

보차도 경계면 측구 보수 1,681m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,239백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,239	4,800	2,231
국 비
시 도 비	7,239	4,800	2,439
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2011.4~11 : 한강대교 보강·보수공사 실시설계

○ 2012.4~2014.11 : 한강대교 보수공사(1~3차) 공사

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

○ 총사업비

- 당초 : 12,363백만원

- 변경 :  7,239백만원

○ 사업규모

- 당초 : 게르버 구·신교, 아치 구·신교

- 변경 : 게르버 신교, 아치 구·신교

- 변경사유

․2011년도 한강상 교량 보수비 잔여분(영동대교, 성산대교)으로 게르버(구교)구간은 내진보강 완료하고, 게르버(신교), 아치(구,신교) 보강치 못함

․내진완료구간(게르버 구교)은 한강교량일상유지 예산으로 시행

- 세부변경내역

공종별		당 초	변 경	비 고
콘크리트 보수		1,380 ㎡	804 ㎡
강재 보수	일반부	223 ㎡	92 ㎡
	신축이음부	3,016 ㎡	2,247 ㎡
방호벽 보도부 박층포장		5,036 ㎡	2,135 ㎡
방호벽 보도부 이음새		2,523 m	2,523 m
중분대 보도부 열화단면		2,504 ㎡	1,252 ㎡
보차도경계면 측구부		2,601.0 m	1681 m
신축 이음	Finger	20 ea	10 ea
	Monocell	4 ea	2 ea
	뱅조인트	8 ea	8 ea
배수구 설치		11 ea	10ea
내진보강 (받침교체)		받침 149조	받침 149조

사업명

아현고가차도 철거

담당자

교량안전과 우창원

(☎2133-1954)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시경관 및 지역발전을 저해하는 노후화된 고가차도 철거

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2014

○ 위 치 : 마포구 아현동 267 ~ 중구 중림동 754

○ 규 모 : 고가차도철거 1개소(폭15m, 연장 939m), 환기구이설 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,576백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,576	5,000	2,576	0	0
국 비
시 도 비	7,576	5,000	2,576	0	0
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 02. 27 : 실시설계완료

○ 2013. 06. 16 : 공사 계약

○ 2014. 10. 31 : 공사 준공

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	차액	변경사유
사업비 (백만원)	12,500	7,576	△4,924	투자심사금액중 버스중앙차로 설치 공사비를 교통사업 특별회계 예산에서 집행함

사업명

성산대교 성능개선사업

담당자

교량안전과 김귀용

(☎2133-1943)

□ 사업목적 및 필요성

○  위험교량의 성능개선으로 교량 수명연장 및 시민안전 확보

○  1등교로서 중차량 통과 등 서부 주요 도로축인 성산대교 인근 교통소통 완화

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013. 11 ~ 2022. 12

○ 위 치 : 마포구 망원동 ~ 영등포구 양평동

○ 규 모 : 연장 1,455m,  폭 27~39m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 112,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	112,800	1,850	847	500	109,603
국 비
시 도 비	112,800	1,850	847	500	109,603
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (기본 및 실시설계 용역 시행중 : 실시설계 75% 진행중)

○ 2012.  9. 27  : 투자심사

○ 2013. 11.  1  : 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2015. 10. 31 : 실시설계 용역 준공

○ 2016.  1 ~  : 단계별 성능개선사업 시행

□ 사업변경 내역

○ 사업변경 없음

사업명

장안교 성능개선 공사

담당자

교량안전과 유진호

(☎2133-1979)

□ 사업목적 및 필요성

○ 암사대교∼용마터널∼사가정길로 연계되는 주간선도로 상의 장안교(구교)가 노후화되어 대형차량의 통행을 위해 교량의 성능 개선(DB18→DB24) 필요

○ 주간선도로의 기능을 확보하여 도로망 효율성 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 03. 01 ~ 2017. 05. 31

○ 위 치 : 서울특별시 동대문구 장안동 92번지∼중랑구 면목동 170번지

○ 규 모 : B=17.0m, L=218m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,700백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	20,700	400	1,500	4,000	14,800
국 비
시 도 비	20,700	400	1,500	4,000	14,800
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ ‘12. 8.	장안교(구교) 정밀안전진단 (C등급)

○ ‘12. 8.17	장안교(구교) 성능개선공사 추진계획(도시안전실장 방침)

○ ‘12. 9.27	투자심사

○ ‘14. 4.28	기술심사

○ ‘14. 8.31      실시설계용역 준공

○ ‘14.10.14 ~ 10.30    계약심사

○ ‘14.12.10	공사계약

○ ‘14.12.16	공사착공

○ ‘15. 1.27	교통규제심의 완료

○ ‘15. 1. ~ 7.	지장물 이설 검토 및 하천점용허가 협의

□ 향후계획

○ 2015. 8 ~ 2015.12 : 가교설치

○ 2016.1~2016.12 : 구교철거, 가시설 공사, 교량하부공

○ 2017.1~2017. 4 : 교량상부공

○ 2017. 5 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	차액	변경사유
사업비 (백만원)	18,800	20,700	1,900	실시설계 과정에서 증액됨

사업명

북악스카이웨이1교 보강공사

담당자

교량안전과 기효상

(☎2133-1969)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북악스카이웨이1교(성북구 정릉동)는 1970년 (설계하중 DB-18, 2등교)

건설 하여 공용 중인 도로교로서, 시설물 노후화 및 안전성 저하로 통행

차량, 보행자 및 주변 시민 등에 대한 안전에 위험 해소와 장기적인

시설물 안전성 확보 필요.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016

○ 위 치 : 서울시 성북구 정릉2동 544-1호

○ 규 모 : 폭 9.75m, 연장 60m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,862백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,862		322	3,140	3,400
국 비
시 도 비	6,862		322	3,140	3,400
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

○ 2015.01.05. : 북악스카이웨이1교 실시설계용역 완료

○ 2015.07.09. : 도시계획시설(도로) 변경결정 및 지형도면 고시

○ 2015.07.13. : 지적분할 및 현황측량 의뢰(한국국토정보공사)

□ 향후계획

○ 2015.07~08 : 도시계획시설사업 실시계획인가 열람공고, 계약심사의뢰

○ 2015.09    : 도시계획시설사업 실시계획 인가

○ 2015.09~12 : 토지(건물) 보상 추진

○ 2015.12~2016.12 : 공사착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모

- 당초 : L=60m, B=8.35m(왕복2차로)

- 변경 : L=60m, B=9.75m(왕복2차로)

○ 사업기간 :

- 당초 : 2014 ~ 2015

- 변경 : 2014 ~ 2016

○ 총사업비

- 당초 : 4,540백만원

- 변경 : 6,862백만원

- 세부변경내용

· 당초 :  상부구조물 철거 및 교체,  하부구조(교대 및 교각) 보강

· 변경 :  상부구조물 철거 및 교체,  하부구조 교대 신설, 교각 일부신설 및 보강

- 세부변경내역

구분	당 초		변 경		비고
총계		4,540		6,540
공사비	소계	1,923	소계	3,823
	상,하부철거공 교좌장치 및 신축이음신설 상부신설 및 하부 보강 가설교량설치 기타(폐기물 처리비 등)	150 133 630 910 100	상,하부철거공 교좌장치 및 신축이음신설 상·하부 신설 및 하부 일부보강가설교량설치 기타(폐기물 처리비 등)	457 83 2,252 694 337
보상비	토지 및 물건 보상	2,617	토지 및 물건 보상	2,617