1. 청계천박물관 운영

(일반회계, 매우우수, 시설비․자산 및 물품취득비․행사관련시설비)

작 성 자	청계천박물관장 : 사종민☎ 2286-3401 담당 : 강용운☎2286-3430

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
94.5	20	28.5	46

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

2014년(결산)	2015년(결산)	2016년(예산)
978,000	1,102,250	296,578

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도 증가(상설전시 리모델링 공사, 기획전 개최 등)

□ 성과지표

○ 상설전시실 리모델링 공사 추진율(%)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	-	-	-	30	70	-
▪달성	-	-	-	30	70	-
○ 기획전 개최(횟수)
▪계획	3	3	3	3	3	3
▪달성	3	3	3	3	3	추진중

□ 사업개요

☐ 사업목적

○ 상설전시실 리모델링 공사(’14.10.1~’15.9.30)

- 개관 이래 노후된 전시시설을 교체하고, 청계천 복원공사 홍보 위주의   콘텐츠 비중을 축소하여, 청계천의 수계와 자연환경, 연대기별 역사, 공간사, 생활사를 체계적, 종합적으로 구성(실제 유물 전시 비율 증가로 역사적 고증 및 진정성 강화)함으로서

‘청계천전문박물관’으로서의 위상 재정립 및 지역 대표문화공간으로 정체성을 확립

○ 청계천 주변 지역중심으로 한 기획전(2회) 및 특별전(서울-북경교류전)개최로 청계천 중심박물관으로서의 위상을 제고

□ 사업내용

○ 상설전시실 리모델링

- 사업기간 : 상설전시실 리모델링 공사 : 2014년～2015년 (2년계속사업)

- 총사업비 : 1,800,000천원(전년까지 기 투자액* : 900,000천원)

- 사업규모 : 상설전시 공간(1,170.55㎡) 및 로비전시공간(326.7㎡)

- 사업내용 : 상설전시 리모델링 전시물(영상, 그래픽, 모형, 전시보조물 등) 제작 설치

- 사업시행주체 : 서울역사박물관(청계천박물관)

○ 기획(특별)전시 개최

- 사업기간 : ～ 계속

- 총사업비 : 1,102,250천원

- 사업내용

․ ‘청계천 6070’ (’15.9.18~11.8)

․ ‘물길 도시, 서울(국제교류전)’ (’15.11.27~’16.1.24)

․ ‘청계천 복개시대(가제)’ ( ’15.12.1~’16.3.13)

- 사업시행주체 : 서울역사박물관(청계천박물관)

○ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’14 예산	’15 예산 (A)	’16 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 청계천박물관 운영
ㅇ 상설전시실 리모델링 공사	900,000	900,000	0	-900,000	순감
ㅇ 기획전시 설계비	12,000	12,000	15,000	3,000	20
ㅇ 서울-북경 교류특별전	0	12,000	0	-12,000	순감
ㅇ 리모델링 추가공사 (전시실내 편의시설 보완)	0	66,000	0	-66,000	순감
ㅇ 전시보조물 공사	66,000	66,000	75,000	9,000	12
ㅇ 서울-북경 교류특별전 전시 보조물 설치 및 철거	0	40,000	0	-40,000	순감
ㅇ 업무용 사무기기구입	0	1,650	5,500	3,850	70
ㅇ 자원봉사실 및 방재실 에어컨 교체	0	4,600	0	-4,600	순감
□ 세출예산비목
ㅇ시설비(401-01)	912,000	990,000	115,000	-875,000	760
ㅇ행사관련시설비(401-04)	66,000	106,000	75,000	-31,000	-41.3
ㅇ자산 및 물품취득비(405-01)	0	6,250	106,578	100,328	94.1

□ 사업추진 절차

○ 상설전시실 리모델링 공사

추 진 시 기	세 부 추 진 절차
’14. 1. ~ 5.	유물실사 및 대외자료 협조요청
’14. 6. ~ 9.	사업계획 방침 수립 및 용역발주 (공고, 협상) 및 사업자 선정
’14. 10 ~ ’15. 9.	전시물 제작설치 용역 시행 및 완공

○ 기획(특별)전시 개최

- ‘청계천 6070’ (’15.9.18~11.8)

추 진 시 기	세 부 추 진 사 업
’15. 7.~8.	전시구성안 수립 및 자료 조사
’15. 8월 말	사업방침 수립 및 설계 시행
’15. 9.1 ~ 9.17	사진인화․액자제작, 영상, 그래픽 등 전시콘텐츠 제작 설치
’15. 9. 18~11.8	전시개막 및 운영
’15.11.9 ~11.20	전시종료 후 철거 및 결과보고

- ‘물길 도시, 서울(국제교류전)’ (’15.11.27~’16.1.24)

추 진 시 기	세 부 추 진 사 업
’15. 2.~ 3.	사업방침 수립, 전시설계 용역 발주 및 준공
’15. 3.	설계도,패널원고,자료목록 북경송부
’15. 4.~ 6.	전시물 제작설치용역 발주 및 업체 선정, 착수보고
’15. 7.~ 9.	전시설계 보완, 전시콘텐츠 제작, 도록 가편집본 작성
’15. 10.	시설공사 관련 북경 측과 협의, 유물 해외반출 관련 허가절차 진행
’15. 11.	전시물 해외운송 및 해포
’15.11.~’16.2.	전시 운영 및 철거

-  ‘청계천 복개시대(가제)’ ( ’15.12.1~’16.3.18)

추 진 시 기	세 부 추 진 사 업
’15. 9.~10.	전시구성안 수립 및 자료 조사
’15. 9월 말	전시방침 수립 및 업체 선정
’15. 10.1 ~10.31	설계 시행, 그래픽 및 전시 연출물 제작
15. 11.12~11.29	전시 공사, 그래픽 시공 등 전시콘텐츠 제작 설치
‘15.12.1~’16.2.28	전시개막 및 운영
‘16.2.29~3.18	전시종료 후 철거, 전시결과 보고

□ 2016 ~ 2020 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	’15년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
	1,102,250	296,578	300,000	310,000	320,000	330,000	340,000

□ 평가지표

(상설전시실 리모델링 공사)

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	30
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	30
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	10
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	8
		소 계	50	48
계		100		98

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

(기획(특별)전시 개최)

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	12
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	27
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	27
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	9
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	8
		소 계	50	44
계		100		91