9-1. 투자심사 대상사업    [장애인자립지원과 장애인재가복지팀]

우리 서울시에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
서대문농아인복지관 별관건립				2,621	`18년	`15년	5%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 ‘15년말 기준으로 작성

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 ‘15년말 기준으로 작성

※ 담당자 연락처, 필요성, 사업개요, 총사업비(재원별), 추진상황, 향후계획, 사업변경 내역 등 순서에 따라 필히 기재

※ 대상사업 중 “의뢰심사”(광역은 중앙, 기초는 중앙 및 시도 의뢰)사업은 의무공시, “자체심사”사업은 사업규모(금액)이 크거나 중요한 사업 등에 대해 자율적으로 대상사업을 선정 공시(최소 10건 이상)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

서대문농아인복지관 별관 건립

담당자

장애인자립지원과 김종민

(☎2133-7451)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인복지관 면적이 993㎡ 밖에 되지 않아 좁은 공간으로 정보제공, 재활치료 등 프로그램 운영에 많은 문제점을 보이고 있으며, 농아노인 쉼터 설치 요구 등으로 별관 건립 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : `15.7월 ~ ‘18.12월

○ 위 치 : 서대문구 수색로4가길 25

○ 규 모 : 연면적 : 826㎡(지하1층/지상7층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,589백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,589			2,621	1,968
국 비
시 도 비	4,589			2,621	1,968
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 복지관 별관 대상지 감정평가 수행(2개소)     ’16. 3월

○ 복지관 별관 대상지 매수 협의                ’16. 5~6월

※ 건물소유지 매입 거부(매입금액 불만으로)

□ 향후계획

○ 남가좌동 관내 다른 부지 물색                ’16. 7월~10월

○ 별관 건축 의뢰(도기본 건축부)                ’16. 11월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 건물소유지 매입금액 불만으로인한 매수 거부로 관내 다른 부지 물색 중