「여의도 파라다이스 유선장」

선체하부 보강공사 검토보고

여의도 한강공원내에 위치한 파라다이스 유선장의 안전성 개선을 위한 선체하부 보강 공사 건에 대하여 검토하고 보고 드림

□ 시설개요

○ 업체명 : 파라다이스(대표 : 윤상덕)

○ 위  치 : 여의도 한강공원(서울시 영등포구 여의도동 86)

○ 최초허가일:1987.9월

○ 현  황 :

- 점용면적: 1,534㎡(본체 규모:32 x 15 x 2)

- 선    박: 총74척(동력4척, 무동력70척)

- 점용목적: 유선사업, 레스토랑

□ 신청 사항

○ 공사개요

- 공사명 : 여의도 파라다이스 유선장 하부 보강공사

- 규  모 : 35.2m x 17.8m x 2.3m(면적626.56㎡):

바지선 1척(파라다이스2호)

- 공사기간 : 2016. 1월 공사개시일~2016.4.31.(4개월 소요)

- 목   적 : 유선장 장기사용에 따른 자연마모·부식에 의해 안전성에                   문제가 있다고 진단되어 하부 보강공사를 하고자 함.

- 시 공 사 : ㈜위더스이엔씨 대표 고춘희 (전화*************)

(현장소장 : 고춘희  전화*************)

-  안전도검사 : 선박안전기술공단(KST)

-  감      리 : 코리아 엔지니어링(예정)

※ 작업 진행절차

- 파라다이스1호:  확장보강(내부격판, 상갑판 구조재 용접 등)

- 파라다이스2호:  하부체 조립(김포마리나 컨테이너부두)→

진수후 예인(김포마리나→ 여의도 한강)→

현장거치(여의도 파라다이스)

□ 현재까지 진행사항

○ '15.01.23.파라다이스로부터 하부 보수공사 추진보고 접수

-도면설계 완료(코리아 엔지니어링)→KST도면승인 추진

○ '15.01.29. 우리본부에서 유선장 하부 보수공사 관련 절차회신

○ '16.01.04. 선박안전기술공단(서울출장소) 도면 검토필 승인

□ 향후 진행계획

→ 유선장 하부공사 승인후 공사 개시

→ 공사완료후 유선장 안전도검사확인서 등 결과 제출

→ 점용면적 변경에 따른 점용허가 변경처리

□ 검토 내용

분 야	내용	검토결과	비고
법령 및 신청문서	유선장 하부 보강 개선공사에 따른 법률 검토	1.선박안전법에 의한 선박안전검사 대상에서 제외(‘15.12해수부 통보) -다중이용시설로 안전도검사 필요 2.선박안전기술공단(KST)에서 도면검토를 필한 사항으로 안전도검사를 완료한다는 조건으로 승인예정 -향후 우리본부에서 추진중인 안전도검사 기준 부합시 검사면제 3.하천법에 따른 점용허가면적이 일부 늘어나는 부분에 대해서는 점용허가변경신청 승인예정	1.정부대행검사기관KST(선박안전기술공단)도면검토 필함. 2.하천점용허가 변경승인예정
	신청문서, 승인도면 공사계획서, 기타자료 등	승인도면(검토필), 공사계획서, 안전관리계획, 환경계획 등 신청문서 이상없음	승인도면 및 공사계획서,안전․환경계획 등 첨부
환경문제	소음 문제	공사관련 사전 안내 및 민원해결 조건부 승인예정	-
	수질오염 및 폐기물처리 문제	수질오염 차단막 설치 및 폐기물 처리는 허가업체 외부 반출	환경계획서 제출
	경관저해 문제	경관저해 폐기물 등 외부적재 금지조치	경관저해 외부보관 불가 조치
안전관리	안전대책	안전시설 설치 및 안전요원 배치 (공사안내판 및 안전요원 등 배치로 이용시민 불편최소화)	안전관리 계획서 제출
	화재예방	작업장 금연 및 소화기 비치, 인부안전교육으로 화재예방 조치	-
	재해대책	재해 발령시 상황에 따른 작업금지	-

□ 검토 결과

- 정부대행검사기관인 선박안전기술공단의 도면 검토를 필하였고, 안전도검사완료를 승인조건으로 함

- 유선장시설의 안전성 확보를 마련하고 수상이용활성화에 도움이 될것으로, 공사승인함이 타당할것으로 사료됨.

작 성 자	운영부장 : 차장운 ☎3780-0801 수상기획과장 : 홍성우 ☎0820 담당 : 권대희 ☎0827