품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)          점검일 : 2022. 9. 1. ~ 9. 2.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원(협력업체 포함)이 보고 이해할 수 있도록 공사장 입구나 공사 현장 내에 현수막이나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람.
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 품질관리자 2명(최순*, 이현*)에 대한 업무분장이 누락되어 있으므로 건설기술진흥법 시행령 제91조에 명시되어 있는 품질관리자의 6가지 업무 범위를 준수하여 업무분장을 실시하기 바람
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관문서 목록표에 문서의 보관장소, 문서관리 책임자를 포함하여 작성하고 기록관리 하기 바람.
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되고 자격인정을 관리할 수 있도록 작업자 자격부여 평가서를 작성 및 활용하기 바람
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 건설 자재가 최상의 품질로 시공될 수 있도록 보관자재 점검표를 작성 활용하여 월1회 이상 점검 실시 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 복공판의 단계별 설치로 중간단계에서 일시적으로 흙막이 설치구간이 필요한 것으로 판단되는 바 현장의 단계별 시공현황에 맞추어 설계 시공 보완 바람 ◦ 가시설 강재 연결부에 연결부 시공이 일부 누락되면 추후 굴착으로 인하여 보완작업이 어려워지므로 철저히 검사하여 누락이 없도록 조치 바람 ◦ (권고사항) 현장 현황과 설계의 차이에 따른 능동적인 대응을 위해 엔지니어링 및 shop drawing 팀을 운영한다면 성공적인 공사수행 및 안전관리를 위해 바람직할 것으로 판단됨 ◦ 106정가장 횡단보도 PE방호벽에 야간조명 추가하여 안전사고를 방지하기 바람 ◦ 107정거장 토류판 배면 뒤채움 조속히 시행 하기 바람 ◦ 108정거장 강재 천막덮기를 통해 부식을 방지하기 바람
※ 본 점검결과는 시공자인 ㈜호반산업과 감리자인 ㈜수성엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.