품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 삼성동 홍실아파트 주택재건축정비사업 건설공사         점검일 : 2023. 8.28. ~ 8.29.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5.2 책임과 권한	각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 품질관리자의 업무는 건설기술진흥법시행령91조3항에 명시되어 있는 업무 범위를 준수하여 업무분장을 실시하기 바람
6.2 품질목표 관리	품질목표 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질관리계획서상의 품질목표에 따라 추진계획을 수립하여 실적을 관리하시기 바람
8.7 중점 품질관리	중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준 설정과 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 관리하기 바람.(중점품질관리 계획서에 내용 추가 바람)
8.11 검사 및 시험, 모니터링	검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정기준, 빈도 등의 적절성	◦ 『검사 및 시험계획서(ITP)』를 작성․활용하여 검사 및 시험대상의 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용장비 및 기법, 발주자 /건설사업관리기술인의 입회시기․장소․방법 등을 특성에 맞게 설정․운영하기 바람. ( ITP 문서화 작성)
8.12 부적합 공사의 관리	부적합 공사(자재 포함) 발생에 대한 처리방법 및 이행의 적절성	◦ 자재의 부적합 내용에 대한 문서화 미흡하니 보완 바람. (부적합 관리대장 및 NCR보고서는 등록된 양식 사용하여 관리)
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 철근 배근에 있어 정착길이 및 피복두께 확보 바람. ◦ 벽체 수직근의 결속 및 철근 간격을 보완 바람. ◦ 슬라브 이어치기 및 자재 인양구 주위 재료분리 부위 면처리 및 무수축 몰탈 등으로 충진 처리 후 후속 공종 진행하기 바람. ◦ 철선 및 FLAT TIE 미제거 부위 제거 후 면처리 바람. ◦ 피로티층 외부 벽체(석재 시공 예정) 후속 공종 진행 전 벽체 외부로 노출된 형틀 고정용 철근 스페이서 면처리 후 감리단 승인 후 후속 공종 진행 바람.
※ 본 점검결과는“삼성동 홍실아파트 주택재건축정비사업 건설공사”의 시공자인 ㈜디엘이엔씨과 감리자인 ㈜희림종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.