품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 수유동 주거복합 주택건설사업                        점검일 : 2020. 7. 23. ~ 7. 24.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 품질목표를 현장에 있는 모든 직원이 볼 수 있도록 안전교육장 및 안전조회장 등에 액자나 입간판 등으로 크게 설치하여 게시하시기 바람.
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 개인별 업무분장은 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성 후, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득하고 문서번호, 결재일자를 기재하여 문서등록대장에 기록하고 누적관리 하시기 바람.
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질문서가 업무관련자(발주처, 감리단, 협력업체, 현장내 직원 등)에게 배포되어 활용될 수 있도록 대장을 작성하여 관리하시고, 개정시 신문서와 구문서가 혼재되지 않도록 회수(폐기)사항을 기록관리 하시기 바람.
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보존연한, 보안등급, 문서관리 책임자가 작성되어 기록관리 되도록 보완하시기 바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육실시 여부	◦ 교육훈련계획서는 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하고 품질교육을 포함한 정기교육이 매월 실시될 수 있도록 보완하시기 바라며, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람.
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람.
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 기자재수급계획은 공정계획을 참고하여 기술분야(건축, 토목, 기계,전기 등)별 기자재에 대한 계획물량 대비 실적이 관리될 수 있도록 보완하시기 바람.
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람.
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리 대상에 대한 사용장비의 명확한 기준을 설정하고, 작업자의 자격기준 등이 설정, 관리될 수 있도록 중점품질관리계획서를 보완 작성하시기 바람.
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재의 식별 및 추적관리 사항을 현장특성에 맞게 작성하여 기자재 유형별 관리방안을 보완하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 철골 기둥에 정착되는 보의 상부철근이 기둥철골과 이격되어 있어, 보의 인장철근 역할이 어려우므로 도면(S-0130)과 같이 철골 부위에 정착될 수 있도록 조치하시기 바람. ◦ 특수전단벽 또는 기둥의 경우 주철근과 후프철근이 밀착되지 않아 주철근의 좌굴방지가 어려우므로, 하부이음부위의 철근의 위치를 조정(아래에서 올라오는 정착이음철근을 안쪽으로)하여 주철근과 후프철근이 밀착될 수 있도록 조치하시기 바람. ◦ 기초두께 1.5m~2.0m부분의 매스콘크리트 시공중인바 수화열 관리 등 콘크리트 품질관리사항을 사전검토하여 시공관리에 적용 요망. ◦ 지하층 SRC기둥 철근 배근에서 지하 기둥 주철근배근(상부)의 배근간격 검토 필요(최소철근 간격이상이 확보되도록 보완시공 검토). ◦ 현장공정과 공법상 기둥하부와 슬라브가 만나는 부분의 후시공 콘크리트 타설부분에 시공전 콘크리트 잔재, 이물질 등 제거후 콘크리트 이어치기 하도록 검토 요망. ◦ 지하층 굴착공사부분 장비 작업중 유도자 미배치 ◦ 지하6층 기초철근상부(매스콘크리트 부분) 철근간격이 넓어 작업자 이동시 위해요소가 있으므로 통로 작업 발판 설치 필요. ◦ 지하층 작업공간에 비상시 대피를 위한 유도 표지판 보완설치 필요.
※ 본 점검결과는“수유동 주거복합 주택건설사업”의 시공자인 ㈜태영건설과 감리자인 ㈜종합건축사사무소 담에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.