품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 영등포구 신길동 역세권 청년주택 신축공사              점검일 : 2023. 8. 7. ~ 8. 8.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
6.1 리스크 및기회관리	리스크 파악 및 관리여부	◦ 리스크 및 기회평가 관리계획서의 이행 주기는 실제 이행주기에 맞춰 변경하기 바람.
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리	문서화된 정보의 보유상태	◦ 품질관리문서 중 효력이 상실된 구문서는 폐기 등 식별관리 하기 바람.
8.4 기자재 구매관리	기자재 수급계획의 수립,검증,식별,보관,재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 보관 자재는 기 작성 된 자재보관점검표를 활용, 점검결과를 항목별로 기재하여 실제 점검이 이루어 질수 있도록 조치 바람.
		◦ 기자재 수급계획은 주요자재가 모두 포함될 수 있도록 수립한 후 실적을 관리하시기 바람.(시멘트,단열재,타일등 추가)
8.12 부적합 공사의 관리	부적합 공사(자재 포함) 발생에 대한 처리방법 및 이행의 적절성	◦ 부적합 공사(자재포함) 실적 관리가 미흡하여 부적합에 대한 분석관리가 어려우니 실재 현장에서 발생되는 부적합에 대한 실적을 추가하여 관리하기 바람.
9.3 내부심사	품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 내부심사 실시 여부	◦ 자체 품질점검계획에 따른 서류점검은 건설공사 품질관리 업무지침의 별표3 “품질관리 적절성 확인 기준 및 요령”으로 실시하고 현장점검은 서류평가가 아닌 실제 현장점검을 실시하고 결과 보고하기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 기준층 슬래브의 폼 반출용 개구부의 철근 배근 및 단면상세를 작성한 후 시공 바람. ◦ 기둥 철근의 코너 부위가 띠철근에 확실히 결속되도록 주근의 위치와 띠철근의 시공을 정확히 할 수 있도록 시공 바람. ◦ 벽체 철근이 제 위치에 위치하여 벽체 양쪽에서 과피복 과소피복이 발생하지 않도록 스페이서 시공을 확실히 할 것. ◦ 지하1층 계단실 벽체 철근 결속 일부 미흡. (현재 5칸 간격을 2칸 이내로 결속) ◦ 1층 보 시스템 동바리 U-Head 편심. (U-Head 돌리기 또는 각재 보강) ◦ 벽체 철근 피복 일부 과다하니 보강 요함. ◦ 계단실 안전난간 즉시 설치 ◦ AL Form 동바리 수직도 일부 미흡하니 콘크리트 타설 전 수직도 체크 및 보완 조치. ◦ 2동 내외부 시스템 비계 연결 간격 넒음. (5m 이내로 이음철물 추가) ◦ 시스템 비계(외부) 가새 보강 실시 바람. <양호사례> ◦ 계단실 가설분전함 접지 상태 양호.
※ 본 점검결과는“영등포구 신길동 역세권 청년주택 신축공사”의 시공자인 ㈜동원개발과 감리자인 ㈜도원엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.