품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사                점검일 : 2021.7.8.~7.9.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2.품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련 전직원의 동기부여 여부	◦ “품질방침 및 품질목표”를 현장내 입간판, 현수막 등으로 게시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업에 임할 수 있도록 조치바람.
5.기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 현장에서 관리 할 기록의 목록이 비치·관리되어야 하나, 생산문서 색인목록표에 생산된 문서가 모두 포함되어 있지 않음으로(2021년 생산 문서 기록 없음) 추가 작성하시기 바람.
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대하여 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람.
17.식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행여부	◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 자재 인수 시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람.
18.기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 보관자재점검은 현장에 반입된 자재가 보관 및 취급 특성에 맞게 관리되어 사용 시 기능이 저해하거나 망실 또는 분실되지 않았는가를 확인하는 점검으로, 자재별 특성에 맞게 점검표를 작성하여 점검을 시행하고 현장소장의 결재를 받아 누적 관리 바람.
27.기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 소화장치의 상시 개방이 가능하도록 조치 바람. ◦ 작업장내 작업자의 대피통로에 대한 안내판, 안내선 등을 설치 바람. ◦ 어스앵커 장착부 강연선이 통로에 정면으로 돌출되어 충돌의 위험이 높음으로 보호캡 등으로 안전조치 바람. ◦ U12 벽체 하단부 균열에 누수 및 백태가 발생되었으므로, 배면부 방수 등의 조치로 누수가 발생하지 않도록 조치 바람. ◦ BOX2 상부(인천 방향) 복공 위 자재 정리정돈 요함. ◦ BOX6 중앙분리대 벽체 철근 콘크리트 페이스트 제거 요함. ◦ BOX5 벽체 시공이음부는 치핑 후 콘크리트 타설 시행 바람. ◦ 벽체 강관 pile 공동 부위는 채움 조치 바람. ◦ BOX4 주변 기초 폐자재는 반출 바람. ◦ 공사기간내 이상 폭우시 빗물이 갱내로 유입되므로, 집수정에서 펌핑 할 때 제물포터널 우수와 겹쳐 처리되는 실정이므로 기존 하수관로의 용량으로 배수가 원활히 되는지 검토 바람. [우수사례] ◦ 건설자재를 우기를 대비하여 방수포로 덮고 식별이 가능하도록 안내판을 설치하여 자재의 보호 및 식별이 용이토록 조치함.
※ 본 점검결과는“국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 시공자인 한신공영(주)과 감리자인 ㈜이산에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.