품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 아현2구역 주택재건축정비사업 신축공사(HDC현대산업개발) 점검일 : 2020.10.15.~10.16.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 개인별 업부분장표 개정은 직원 변동이 발생될 때마다 전 직원들의 업무분장을 재작성(업무담당자, 대직자 서명확인 필수)하고, 시행 일자에 맞추어 최종 결재권자의 승인을 득한 후 문서등록대장을 작성하여 누적관리 하시기 바람.
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 현장 내 생산되어 관리중인 현장보관문서 색인 목록표에 문서담당자를 팀명이 아닌 업무책임자로 지정하여 기록관리 하시기 바람.
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정확보 및 유지 여부	◦ 기반구조 관리상태 점검표는 공사수행(품질활동)을 위한 기반구조와 작업환경이 적절하게 관리되고 있는지를 사전에 점검하는 사항으로, 점검취지에 맞게 반기별(반기 초) 1회 이상 점검하고 점검표를 작성 기록관리 하시기 바람. (2020년도 하반기 미실시)
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련 실시 여부	◦ 2020년 교육훈련 운영계획 중 품질교육도 정기교육에 해당되므로 매월 실시할 수 있도록 재 수립 작성하시기 바라며, 실시한 교육결과서도 작성 기록관리 하시기 바람.
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내,외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에게 작업지시 사항, 안전사고 예방 등 이를 알리는데 어려움 없이, 불편함을 최소화 할 수 있도록 전달방법 체계를 갖출 수 있는 의사소통 관리 기준표를 추가로 작성하시기 바람.
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 기자재 수급계획서는 주요 자재(건축, 토목, 기계, 전기, 조경 등)가 모두 포함될 수 있도록 전체년도 예정공정표를 참고하여 계획대비 실적이 관리되도록 재작성 하시기 바람.
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 매일 환경점검을 실시 작성하여 소장결재를 득하고 일일 환경점검표와는 별도로 매주 일일 점검사항에 대하여 주간단위로 환경영향 조사보고서를 작성, 감리의 확인을 받아 기록관리 하시기 바람. (대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야 등)
16. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재 유형별 관리방안에 주요 자재가 모두 포함되도록 작성하고 특히 자재별 특성에 맞는 식별, 추적성, 취급/보관/보호 방안에 대한 내용을 구체적으로 작성 운영하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 벽체단부 접합부에서 수평철근 단부에 설치되는 U-Bar 결속 고정 및 배치를 보완조치 하시기 바람. ◦ 벽체 수직철근 및 수평철근의 피복두께를 적정하게 유지되도록 조치하시기 바람. ◦ 슬래브 각층 콘크리트 타설 후 수직철근에 부착되어 있는 시멘트 페이스트를 제거하고 후속작업을 실시하시기 바람. ◦ 지수판 설치 시 위치이탈방지를 위해 철근에 견고히 결속될 수 있도록 조치하시기 바람. ◦ WALL 철근에 콘크리트 성분이 부착된 페이스트를 제거하고 후속시공 하시기 바람.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지하주차장 슬래브 철근 이음부 보양재 처리가 미흡함으로 파이프 등 보양재를 활용하여 보완조치 하시기 바람. ◦ 지하주차장 외벽 크랙발생 부분은 에폭시 수지 등으로 인젝션하여 조치하시기 바람. ◦ 슬래브 거푸집 서포트 수직도 불량부분은 보완 조치하시기 바람. < 시공 우수사례 > ◦ 기둥 및 벽체의 철근배근은 대체로 양호하며 특히 기둥 등 구조 부재의 내진상세 적용이 현장배근에 양호하게 반영되어 있음.
※ 본 점검결과는 “아현2구역 주택재건축정비사업 신축공사”의 시공자인 HDC현대산업개발㈜ 와 감리자인 신화엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.