품질관리 적정성확인 업무 흐름도

1. 대상사업(건설기술진흥법시행령 제89조)

○ 감독 권한대행 등 건설사업관리 대상인 건설공사로서 총공사비가 500억 원 이상인

건설공사

○ 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적이 30,000㎡ 이상인 건설공사

○ 당해 건설공사의 계약에 품질관리계획의 수립이 명시되어 있는 건설공사

2. 업무 흐름도

1. 계획수립		① 대상사업조사		∘기간 : 1월초부터 1월 말까지 ∘방법 : 건설기술진흥법등 관련규정을 검토 하여 각 부서에 적정성확인 의뢰안내 ∘부서 : 서울시 인∙허가부서 및 발주부서, 산하 투자기관, 자치구		※ 건설기술진흥법 제55조, 시행령 제89조, 시행규칙 제52조, 서울시건설공사 품질관리등에관한조례 제9조, 제10조
		② 연간 점검계획 수립		∘기간 : 2월 10일~2월 20일 ∘방법 : 각 부서에서 의뢰한 대상사업을 수합 하여 착공시기, 공정 등을 감안, 연간 점검계획수립(※ 3월부터 점검시작)		※ 1월말까지 미 통보 부서에 독려하여 점검계획수립
		③ 월별 세부점검 계획수립		∘기간 : 점검월 이전 월 15일 전후 ∘방법 : 연간 점검계획을 기준으로 공사현장과 사전 협의하여 월별 세부점검계획 수립		※ 실질착공이 안됐으면 뒤로 미루는 방법 등 으로 재조정
2. 점검일정 안 내		① 점검일정 통보 (1차)		∘기간 : 월별 세부점검계획 수립 후 통보(1차) ∘대상 : 공사현장, 감리단, 발주 및 인․허가 부서 ∘내용 : 점검안내 및 점검수수료 납부 안내		※ 발주 및 인허가 부서 공문서 통보 현장 및 감리단 FAX 통보
		② 점검일정 통보 (2차)및 수수료 납부독려		∘기간 : 매월 16일~25일 전후 ∘대상 : 공사현장 ∘방법 : 점검일정을 통보하면서 점검수수료 납부독려		※ 유선(전화) 통보
		③ 점검위원 배정 및 점검안내		∘기간 : 매월 16일~25일 전후 ∘대상 : 해당 외부 점검위원 ∘방법 : 공사현장의 공종과 위원들의 일정을 감안 현장별로 2명씩 배정 및 점검 1주일 전까지 점검안내서 송부 (팩스 및 이메일)		∘점검안내서 내용 ∙ 공사명 ∙ 위 치 ∙ 공사개요 ∙ 점검일시 ∙ 위치도(약도) 등 ∙ 현장전화번호 ∙ 찾아가는 방법 등

3. 점검실시 (적정성확인 : 현장별로 2일 점검)		① 공사 실태점검 (1일차)		∘시간 : 13시 00분 ~ 18시 00분 ∘방법 : 2명의 외부 점검위원과 합동으로 설계와 시공실태 점검 ∘평가 : 점검 후 지적사항에 대하여 토론 및 강평 ∘서명 : 적정성확인 점검표에 서명 (서명자 : 현장대리인, 책임건설사업 관리 기술자, 외부점검위원, 담당직원)		※ 건설공사품질관리지침 별표5(품질관리 계획 적절성 확인 점검표)에 서명
		② 품질관련 서류 점검(2일차)		∘시간 : 10시 30분 ~ 16시 30분 ∘방법 : 담당직원 1 ~ 2명이 품질관리계획수립 및 운영의 적정여부, 품질시험의 적정 여부 등 확인(26개 항목) ∘평가 : 점검 후 지적사항에 대하여 지도 및 강평		※ 건설공사품질관리지침 별표3(품질관리 계획 적절성 확인 점검표) 에 의거 점검실시
4. 점검결과 조 치		① 점검결과보고 및 시정통보		∘기간 : 점검완료 후 1 ~ 2일 (※ 점검건수가 많은 경우 1주일 이내) ∘방법 : 지적사항을 정리하여 점검결과 보고와 동시에 시정통보 ∘대상 : 공사현장대리인, 책임건설사업 관리 기술자, 인․허가 청 및 발주부서 ∘조치기간 : 통보일로부터 1개월		※ 통보내용 : 책임건설사업 관리 기술자 책임 하에 시정 조치하고 1개월 이내 인․허가 또는 발주부서 에서 결과 통보하도록 공문발송)
		② 외부 점검위원 점검수수료 지급		∘기간 : 매월 초 ∘방법 : 월 단위로 위원별 점검일수를 수합 하여 점검수수료 지급 ∘점검수수료 : 220,000원/인/일		※ 특급기술자 노임지급
		③ 점검실적 및 조치결과 정리		∘방법 : 조치결과 통보서를 확인하여 매월 기준으로 분기별 정리 ∘보고 : 분기별로 기술심사담당관 보고 및 시의회 보고자료 활용		※ 점검 후 조치 기간이 2개월이므로 통상 연초 실적은 저조한 실정임.
5. 점검결과 분석 및 종합보고		① 소위원회 운영		∘기간 : 년 2회 (반기별 1회) ∘방법 : 분야별 외부 점검위원 2~3명과 점검 내용 분석 및 개선사항 검토 ∘내용 : 점검 지적사항에 대한 외부 점검위원의 자문을 통해 문제점, 원인, 대책 등을 찾고 품질시험관리System에 등재 및 개선사례 전파		※ 반기(6월, 11월) 1회 자문회의 개최 및 결과 사례전파
		② 점검결과 종합보고		∘기간 : 매년 1월 중 ∘방법 : 연간 점검내용 및 조치결과를 총정리 하여 분석 및 종합보고 ∘내용 : 월별, 기관별 점검현황, 주요 지적사항, 외부 점검위원 점검실적 및 수당지급 현황, 조치결과 등		※ 12월까지 점검 시 조치 시간 부족으로 12월 중 종합보고 곤란