품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 마곡도시개발사업3공구 기반시설 조성공사(2단계)                 점검일 : 2017.4.11.~12

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질관리계획서에 품질목표가 누락되었으니 현장에 맞는 품질목표를 설정하고 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표세부추진계획)을 수립하고 그 추진실적을 관리하기 바람	시정 검토
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 개인별 업무분장을 실시하여 현장 내의 개개인에 대하여 책임과 권한을 명확히 부여하고 업무대행자를 지정 운영하여 담당자 부재 시 업무의 공백이 없도록 조치바람	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리문서는 업무관련자에게 배포하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하고, 효력이 상실된 구문서는 폐기등 식별관리 하기 바람(배포대장 양식 보완)	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적격인력 배치 여부	◦ 품질관리자(장**,이**)는 한국건설기술인협회에 현 근무처인 당해 현장으로 등록하고, 이**은 담당업무는 품질관리 전문분야는 토목품질관리로 변경 신고하기 바람 (현 근무처 미등록되고 담당업무가 잘 못 등록됨)	시정 검토
	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상『기반구조관리상태 점검표』를 작성, 점검 및 관리하기 바람.(미작성됨) 바람.
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 모든 공사참여자(하도급자,기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후, 이를 기준으로 법적정기교육(품질)과 중점품질관리 작업자교육을 포함한 당해년도 교육훈련계획을 수립하기 바람.(재수립 요망)	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 기자재 수급계획 수립은 2017년 예정 공종(건축, 토목, 기계,전기 등)과 부합될 수 있도록 수립하고, 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 공장검사계획을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입될 수 있도록 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리를 하기 바람	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 안전점검과 별도로 비산먼지,수질,소음,진동,폐기물에 대한 일일 환경점검을 실시하고 주간마다 감리원에게 확인하기 바람. (주간단위 작성누락)	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준을 설정하여 장비사용을 승인하고, 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하여 자격인정을 관리하기 바람.	시정 검토
20. 검사 및 시험, 모니터링	․ 자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 품질시험 계획 수립은 국토부『건설공사품질관리업무지침 별표2』건설공사 품질시험기준에 맞게 수립되었는지 확인하고 일부 누락 된 시험 종목(철근 : 겉모양, 무게, 치수)에 대하여는 변경 수립 한 후 시험을 실시하시기 바람	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 현장에 반입 사용중인 동바리 가설자재(재샤용자재)에 대하여 반입시 반드시 재사용 등록필증을 확인하여 현장에 사용하시기 바랍니다. ◦ 복개구조물 바닥 방수공법(아스팔트 시트)를 삭제한 사유와 미적용시 구조물 내구성등의 문제점을 추가 검토 보완하시기 바랍니다. ◦ 비복개 유수지 바닥슬래브 및 부력 앙카 삭제할 경우 타 유수지 적용사례를 추가 검토하시고 또한, 유지관리 비용(LCC)을 고려한 공법적용을 적용하시기 바랍니다. ◦ 수방대비하여 현장 안전관리대책 수립하시기 바랍니다. (이섬범 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설조성공사(2단계)”의 시공자인 (주)KCC건설과 감리자인 경호엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.