품질시험계획의 이행확인 의뢰서

문서번호                                           시행일자  2018년  1월    일

수    신  서울특별시품질시험소장                  발    신  도시기반시설본부장(인)

제    목                                            주    소

『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한조례』제11조 제4항의 규정에 의하여 아래와

같이 품질시험계획의 이행확인을 의뢰합니다.

공 사 명	장지지하차도∼동부간선도로간 연결로 설치공사
공 사 개 요	램프신설 진입연결로 Ramp-A L=638m , 1차로(B=6.0m) , 구조물(U-Type옹벽 : L=78m, 교량 : L=522m) 진출연결로 Ramp-B L=455m , 1차로(B=6.0m) , 구조물(U-Type옹벽 : L=29m, 교량 : L=416m)
발 주 자	서울시 도시기반시설본부 토목부 (담당부서 : 교량건설과 전화 : 3708-2577 )
감 리 자	동일기술공사 외 2개사 (현장전화 : 412-1333 ) (팩스번호 : 412-1334 )
시 공 자	롯데건설㈜ (현장전화 : 425-5713 ) (팩스번호 : 425-5716 )
총 공 사 비	금 삼백이십억칠천오십만원정(32,070,500,000원)
공 사 기 간	2017년 06월 01일 ～ 2019년 09월 30일 ※ 월, 일까지 기재
현 공 정	39.2 % ( 교량 하부 구조물공종 진행중)
※ 첨부서류 : 1. 품질시험계획서 1부(추후 점검시 제출) 2. 당해 공사시방서(특별시방서 포함) 1부(추후 점검시 제출). 끝.

공사 현황 작성 양식 (현장기동반)

공    사    명

장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사

공  사  개  요

- 공사규모

․ 진입연결로 638m, 진출연결로 455m

- 공사소재지 주소

․ 서울시 송파구 장지동 803-1 일원

발 주 자

도시기반시설본부 토목부 (담당부서:교량건설과,전화:3708-2577)

감 리 자

동일기술공사 외 2개사      (현장전화 : 412-1333)

시 공 자

롯데건설(주)               (현장전화 : 425-5713)

(팩스번호 : 425-5716)

총 공 사 금 액

(보상비제외)

금 삼백이십억칠천오십만원정(32,070,500,000원)

공 사 기 간

2017년 06월 01일 ～ 2019년 09월 30일

현  공  정

(주요공종 및 공정율)

- 주요공종

공 종	예정공사기간	비고
토공	2017. 08 ~ 2018. 10
구조물공(교량)	2017. 08 ~ 2018. 12
강교	2017. 10 ~ 2018. 12

- 공정율 : 39.2 %

현장위치도