2018년 풍수해 취약지역(공사장) 점검대상

□ 취약지역 점검대상 : 42개 공사장

구 분	부 서	대상공사장	비고
계		42
시 설 국	토 목 부	16
	건 축 부	8
	방재시설부	11
도시철도국	사 업 부	5
	토 목 부	2

□ 점검기간 : ‘18. 5. 1 ~ 5. 30

- 풍수해기간 : 5. 15 ~ 10. 15 (5개월)

□ 점검대상 공사장

연번	공 사 명 (공구명)	공 사 개 요	공정(%)	추 진 현 황	비고
계	도시기반시설본부	42개 공사장		토목부16, 건축부8, 방재시설부11 도시철도 사업부5, 토목부2
소계	시 설 국	35개 공사장		토목부16, 건축부8, 방재시설부11
	토 목 부	16개 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	78.7	금하지하차도 C-Line 가시설 금하지하차도 C-Line 구조물 시공 금하교차로 비개착공법 강관추진 및 굴착
2	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로	55.9	매헌지하차도 가시설 설치 및 구조물 시공 염곡동서지하차도 구조물 공사
3	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km(지하차도 2개소, 옹벽)	53.3	도봉지하차도 시공(2,990m 중 1,730m 완료) - 주공 18, 19단지 앞 본선 공사 - 상수도이설 2, 4 구간 공사
4	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km(지하차도 2개소 등)	64.8	방음벽기초 신설 및 보강 시공 장암지하차도 2단계 시공 수락고가차도 방음벽(설계) 시공
5	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	38.6	주탑부 및 측경간 거푸집 설치 및 콘크리트 타설 북단IC Ramp-C 보강토옹벽 시공 북단IC Ramp-D, E 교각 시공
6	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	55.3	창경궁 측 통로Box Mass콘크리타설 중앙기둥 시공 및 창경궁 측 통로Box설치
7	서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)	도로연장 : 5.194km,(설계속도 : 80km/h) (터널 : 4.094km(병렬터널), 개착 : 1.1km)	21.5	개착구간 교통전환 가시설 설치 및 지반보강 양평동 비상탈출구 본선 굴착 신도림동 공기정화시설 축류팬실 굴착
8	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)	연장 L=5.136km (터널:3.808km, 개착박스 0.430km, U타입 0.160km)	12.8	구로1동 공기정화시설 축류팬실 굴착 공기정화시설 본선 굴착 개착구간 교통전환 가시설 설치 및 지반보강
9	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	램프신설 : L=1,383m, 램프이설 : L=1,309m 올림픽대로 이설 : 하남방향(1.21㎞), 김포방향(1.46㎞)	30.2	Ramp-J2교(A1,P1,P2) 교량하부공 시공 Ramp-E교(P3,P4,P5,A2) 교량하부공 시공 Ramp-J1, J2, E교 교량하부공 시공 준비
10	광복교~안양교 도로확장공사	도로확장 B=24.5m~31.9m, 6차로, L=1,110m 광복교 보도설치, 안양교 철거 및 신설	30.2	안양교(구로IC방향) 하부공 시공 안양교(구로IC방향) 아치구간 밴트 설치 및 시점부 시점부 보도데크 설치
11	남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사	도로개선 : 폭 30.0m(6차로), 연장 1.1㎞ 교량개축 : 폭 22.0m → 31.4m, 연장 38.0m	21.1	오류IC교(사당방향) 교량 설치 오류IC교(김포방향) 교량 설치
12	중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사	보행교량 신설(B=4.5m, L=191m)	90.7	계단 제작 및 설치 엘리베이터 골조 설치 및 제작 교량 안전난간 및 목재데크 설치
13	장지지하차도~동부간선도로간 연결도로설치공사	진입신설 Ramp-A L=638m , 1차로(B=6.0m) 진출신설 Ramp-B L=455m , 1차로(B=6.0m)	53.7	구조물 하부공(기둥, 코핑) 시공 교량받침 제작 및 설치
14	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사	램프신설:L=712.6m(교량 235.0m, B=6.4m, 옹벽=477.6m), 이설 : 김포방향 1차로	48.4	진입램프 옹벽 구조물 및 교량기초 설치 노들길 확장구간 옹벽구조물 시공 교각기초파일 시공(현장타설말뚝)
15	성산대교 북단 성능개선공사	접속교(B=27m, L=212m) 램프 2개소 - 구조물 보수보강, 슬래브 교체, 가교설치	38.0	가교 상부 거더 설치(램프F Type2) 데크플레이트 설치 BB3 하부공 기초
16	성산대교 남단 성능개선공사	접속교 슬래브 철거․신설 램프교 구조물 보수․보강	4.0	설계도서 검토 및 지장물 조사 사무실 입주(선유도역 인근)
	건 축 부	8개 공사장
17	노들섬 특화공간 조성공사(건축)	지상3층 4개동 연면적 9,385.17㎡	16.1	PIT층 옹벽 철근 배근
18	시민생활사 박물관 리모델링(증축) 공사	리모델링(증축)공사 3개동, 지하1층/지상5층, 연면적 6,919㎡)	16.6	기초보강 공사 구 북부법조단지 환경개선공사 연계 시공
19	남부도로사업소 청사 신축공사	지하1층 지상5층 연면적 5,360㎡	5.9	철거공사 및 건설폐기물 처리 터파기 및 흙막이 지열공사
20	홍릉바이오의료 R&D앵커조성공사(2단계)	신관동(리모델링)지하1층/지상5층,연면적 3,216㎡, 별관동 (증축공사)지하2층/	11.0	신관동 철거공사 별관동 지열공사 및 기초공사 신관동 조적 단열공사 별관동 골조 공사
21	시립노원청소년직업체험센터 신축공사	지하1층/지상3층 연면적 3299.76㎡ 청소년수련시설	17.2	기초 터파기 및 토사 반출 가설사무실 설치
22	시립중랑노인전문요양원 증축공사(장기1차)	지하1/지상5층, 증축 2,280.35, 증축	8.7	기초 터파기 및 토사 반출 가설사무실 설치
23	돈화문 민요박물관 건립공사	지하2층, 지상1층, 연면적 1,384㎡	7.7	흙막이 및 굴착공사 건설폐기물 및 지정폐기물 반출
24	스페이스 살림 조성공사	지하2층/지상7층 연면적: 17,621 ㎡	6.1	휀스설치 파일 시공 중
	방재시설부	11개 공사장
25	제물포터널 민간투자사업(1공구)건설공사	총연장 : 4.28km, 지하차도:660m / 2개소 터널:7,640m/2개소, 기타 부대시설	23.2	공기정화시설 #1(목동운동장) 본선터널 굴착 상선(여의도 방향) 굴착(발파, 천공, 지보설치 등) 하선 굴착, 발파, 쇼크리트 타설
26	제물포터널 민간투자사업(2공구)건설공사	총연장 : 3.25km, 지하차도:694m / 2개소 터널:5,846m/2개소, 기타 부대시설	34.4	공기정화시설 #2(양평유수지) 본선터널 굴착 여의대로(진·출입램프) 가시설 및 토사굴착 올림픽대로(진·출입램프) 구조물 시공
27	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	72.5	수처리 구조물(슬러지, 총인, 생물반응조, 이차침전지, 일차처리시설 등) 시공 기계배관 및 전기 전선관 시공
28	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사	수직구:6개소(저지2,고지1,환기1,유출1,유지관리1) - 저류:L=3.629km,D=10.0m 유도:L=1.097km,D=5.5m	71.5	저류배수시설터널 굴착(4.72km 관통) 터널라이닝 콘크리트 타설(4.72km중 1.8km) 정류지, 수문 수방제어실, 유지관리 수직구 설치 중
29	서초역~방배로간 도로개설공사	도로개설 폭40m(6~8차로), 연장 1.28km(터널 355m포함)	73.7	시점부(내방역) 가시설 및 토공작업 종점부(서초역) U-Type옹벽 기초철근조립 터널부 라이닝 작업 대기
30	양평1유수지CSOs저류조 설치공사	CSOs저류조 설치 46,000㎥	36.4	저류조 구조물 공사(철근조립 콘크리트 타설)
31	남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)	공원(16,373㎡) 주차장(16,992㎡) 조성 곤돌라 신설(888m)	6.6	공사중교통소통대책 규제 심의 건강가정지원센터 저촉부 철거 신설도로 개설
32	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 설치	0.8	지장물 및 관로 이설 가시설공사 시행
33	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 설치 2개소(45만톤/일)	11.6	가시설 및 토공(2처리장)
34	서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 Q=737,000㎥(토목, 건축, 조경공사)	9.5	총인 1, 2계열 가시설 및 토공
35	디지털3단지~두산길간 지하차도건설공사(장기1차)	도로신설 L=452m B=8.0m(왕복2차로)~10.4m(왕복2차로+편측보도)	2.9	지장물 이설 및 철거공사
	도시철도국	7개 공사장		도시철도사업부5, 도시철도토목부2
	도시철도사업부	5개 공사장
36	신림선 도시철도 1공구 건설공사	L=2,287m(정거장 4개소, 환기구 1개소)	5.2	101,102,103,104정거장 토공 및 복공 작업 102E 환기구 토공 및 5단 버팀보 설치
37	신림선 도시철도 2공구 건설공사	L=3,002m(정거장 4개소, 환기구 3개소, 차량기지 1개소)	10.0	104S환기구, 105정거장, 106E환기구 토공 굴착 107정거장 복공판 설치, 108S환기구 암굴착, 파일천공 차량기지(보라매공원) 토공굴착 및 어스앙카 작업
38	신림선 도시철도 3공구 건설공사	L=2,471m(정거장 3개소, 환기구 1개소)	7.1	109, 110정거장 보상진행 중 110E환기구 버팀보 설치 및 토공 굴착 109정거장 이주건물 철거
39	별내선(8호선연장) 건설공사(1공구)	L=1,184m, 정거장 1개소(서울 1개소, 경기 5개소)	1.2	가시설 설치 및 복공 설치
40	별내선(8호선연장) 건설공사(2공구)	연장 2,536m [NATM 1.21km, 쉴드TBM 1.28km (단선병렬), 환기구 2개소]	0.4	토지보상 의뢰(12.28) 2번환기구 부지정리
	도시철도토목부	2개 공사장
41	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	50.8	정거장 비개착공사(NTR공법) 본선 토공, 가시설, 구조물 공사 궤도분야 공사
42	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	71.6	본선 토공, 가시설 및 구조물 공사 입출고선 터널 굴착 궤도분야 공사