문서번호	하천관리과-16684
결재일자	2018.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
협 조
	주무관

풍수해에 안전한 도시! 서울

풍수해 대응능력 강화를 위한 지원기술 개발 계획 (2019년)

2018. 11.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

풍수해 대응능력 강화를 위한 지원기술 개발 계획

국지성 집중호우 예측정보 생산 및 침수취약지역 사전분석을 통해 신속한 재난 대비·대응 지원방안을 마련하고자 함.

Ⅰ		추진배경

❍ 이상 기상현상에 따라 국지성 폭우 등 위험기상으로 인해 대규모 재해발생이 계속 증가하고 있음

- 시간당 30㎜이상 재해발생 위험 강우 증가(‘16년 6회, ‘17년 8회, ‘18년 9회)

❍ 금년 8월 은평·강북·도봉·노원구 등 기습폭우로 인한 침수피해 발생

- 국지성 집중호우로 저지대 및 지하주택 1,465세대 침수

- 예상치 못한 기습호우로 대응반 가동 전 주택침수 등 피해 발생

- 기습폭우로 인해 비상발령 후 대응시간 부족으로 배수지원 등 곤란

Ⅱ		추진경위

❍ 서울시 침수지역 예측시스템 시범운영(기상청 산하 연구기관, ‘17.6~10.)

- 침수취약지역에 대한 선제적 홍수예방 및 대비로 재난피해를 경감코자 하였으나, 침수예측시스템 정확도 미흡으로 활용도가 떨어짐

❍ 호우 영향예보 시범운영(수도권 기상청, ‘17.6~’18.10)

- 한 단계 빠른 대응으로 풍수해 재난의 최소화

❍ 시장요청사항(집중호우 대비 침수예측시스템 마련, ‘18.9.11)

- 시간당 몇㎜ 이상의 비가 얼마나 올 경우 침수 수위까지 올라가는지 등 그간의 빅 데이터 분석을 통해 침수시간을 예측할 수 있는 시스템을 마련하기 바람

Ⅲ		추진현황

❍ 강한 비구름 이동경로 및 침수위험도예측 기술용역(‘18.4~‘19.4)

- 침수위험도 예측으로 신속하고 정확한 대응체계 구축

- 서울 외곽의 강한 비구름 이동경로 사전 예측시스템 개발, 비상체계 가동

❍ 방재성능 분석 및 수리․수문 기초자료구축 기본계획 용역(‘18.6~‘19.6)

- 침수예측 정확도 향상을 위한 기초자료 구축 및 방재성능 검증

Ⅳ		사업계획

구 분	2018년	2019년	2020년 이후
주요내용	- 서울시 행정구역(구/동) 단위 강우량 및 강한 비구름 유입경로 실시간 추정 - 도로단위 서울시 침수해석모델 구축 및 적용성 평가 - 강우시나리오를 이용한 서울시 침수 시나리오 생산 및 침수위험도 제시	- 레이더 자료를 이용한 서울시 실시간 강우예측정보 생산 - 펌프장 운영을 고려한 도시유출해석 및 침수심 분석 - 서울시 자치구별 상세 침수취약지도 작성	- 서울시 도시하천유역 실황/예측 강우정보 생산 저류지 효과를 고려한 도시유출해석 및 침수심 분석 서울시 도시하천 수위 예측기술 개발 내·외수 연계모의를 통한 침수예측기술 개발
소요예산 (백만원)	400	400	1,100

Ⅴ		향후일정

❍ ‘18. 11. ~       기술용역 타당성 심사

❍ ‘19. 01. ~ 12   기술용역 시행

붙임 1. 서울시 도시홍수 예측기술 개발 계획 1부.  끝