’15년 풍․수해 예방대책 준비실태 점검실적

(도시기반시설본부)

Ⅰ		점검 개요

□ 점검기간 :  2015. 6. 2  ～ 6.12(기간 중 9일간)

□ 점 검 자 :  시설4급 임춘근(방재시설부장) 외 17명

Ⅱ		점검 결과

□ 점검 총괄

구 분		계	수방 시설물				지하 차도	지하철 역사	공 사 장
			빗물 펌프장	유수지	수문	빗물 저류조			하천변	굴착 현장	산사태예방	기타공사
점검대상		56							13	38		5
점검실적		56							13	38		5
지적사항		58							15	38		5
조치결과	정비완료	42							5	34		3
	진행중	16							10	4		2

□ 총 평

❍ 도시기반시설본부는 건설공사장에 대한 수방대책을 수행중으로, 공사장별 사전 철저한 수방대책을 마련하여 시행중에 있음

❍ 수방 비상단계 발령시 SMS(문자전송)와 팩스 뿐만 아니라 SNS  (카톡방 개설)를 적극 활용하여 신속한 상황 전파

□ 주요 문제점 및 대책

❍ 현  황 : 공사장별 수방자재 확보, 비상연락망 정비 등 사전대비 완료

❍ 문제점 : -

❍ 원인 및 대책 : -

❍ 개선 사항 : -

□ 수범사례 및 기타 특이사항

❍ 도기본 수방업무 관련 전 직원은 기상특보 등 상세 기상정보를 제공하는 기상청 「맞춤알람 서비스」에 가입하여 기상상황을 사전 정확히 파악, 수방대비에 만전을 기하고 있으며

❍ 광역적 수해 발생시 10개 권역별 대형건설사 지원협력체계를 구축하여 가동하고, 중․대규모 피해발생시 지역별 인접 공사현장(3~6개) 지원체계를 구축하여 만일의 상황이 발생하더라도 복구장비․자재․인력을 지원하여 신속한 대응과 복구 실시

Ⅲ		세부 점검내용

□ 재난상황 시 종합대응계획 점검

❍ 재난대책본부 구성 운영 실태 : 본부 14층 재난안전대책상황실 별도 운영중

❍ 상황 단계별 대응 계획 매뉴얼 작성 실태

- 비상단계별 근무체계 확립 여부 (근무체계 편성)

⇒ 단계별․일자별 근무자 명단 작성하여 문자전송 시스템 입력 및 매뉴얼 배포

- 폭우 사전 예측 및 신속한 상황전파, 비상근무체계

⇒ 기상청 제공 “맞춤알람서비스” 가입하여 특보사항이나 3시간 예보 등 사전 기상상황을 파악하고 있으며, 문자전송 및 카톡방 운영으로 신속한 상황전파

- 휴가 및 연휴기간 중 집중호우 시 비상대책 근무요원 인력동원 계획 수립

⇒ 비상대책 근무요원 부재시 대체요원 지정 운영(근무요원 → 대체요원 통보)

- 기타 사항 : -

❍ 실무반별 편성 직원 임무 숙지 여부 : 숙지상태 양호

❍ 비상연락망(SMS 문자전송) 시범 운영 점검결과

- 대상 99명 : 수신 97명(수신율 98%), 미수신 2명(기기파손 1, 통신불능지역 1)

※ 도기본은 자동통보시스템 없어 문자전송 및 SNS(카톡), 팩스 등으로 상황전파

❍ 상황실과 빗물펌프장간 화상연결 시스템 운영 실태 등 : -

❍ 기타 사항 : -

□ 수방대책 민간위탁 시행 적정성 점검

❍ 위탁기간, 응급복구반 운영 실태 : -

❍ 상황 단계별 작업조 편성, 비상연락체계 정비 여부 등 : -

❍ 기타 사항 : -

□ 수방자재 비축 및 대피소 지정 등 적정성 점검

❍ 수방자재 비축 적정 여부 : 적정

구분	보관 장소	마대 (개)	천막지 (㎡)	PP로프 (m)	비닐 (롤)	묶음줄 (m)	PP포대 (개)	말목 (개)	호스 (m)	비고
확보량	공사현장	15,855	18,076	17,568	421	9,070	10,839	1,205	5,894

❍ 대피소 확보 및 지정 적정 여부 : -

구분	계	개소수	수용인원	비 고
계	-	-	-

❍ 방역물자 비축 적정 여부 : -

구 분	보관장소	살충제 (ℓ)	살균제(ℓ)	소독약(ℓ)	기타	비고
확보량/기준량	-	-	-	-	-

❍ 기타 사항 : -

□ 재해구호사업 추진 적정성 점검

❍ 재해구호물품 확보 및 보관 실태 적정 여부 : -

❍ 재해구호기금 운영 실태 적정 여부 : -

❍ 기타 사항 : -

□ 침수 취약지역 관리대책 적정성 점검

❍ 침수 취약지역 예방대책(수방관련공사, 하수관로 등 준설) 추진 실태

- 당초 계획대비 작업 공정 적정 여부 :  -

- 기타 사항 : -

❍ 침수 취약지역(가구) 관리 현황 적정 여부 : -

❍ 공무원 돌봄 서비스 운영 실태 적정 여부 : -

- 대상가구 관리카드 비치 및 담당 직원 임무 숙지 : -

- 비상 연락망(자동통보시스템) 시범운영 점검결과 : -

대 상	응 답 결 과					비 고
	5분이내	10분이내	20분이내	30분이후	무응답
-						자료첨부

- 기타사항 : -

❍ 하천 비상 대피 시스템(CCTV, 방송장비 등) 운영 및 관리 실태 : -

□ 산사태 예방사업 및 취약지역 관리대책 적정성 점검

❍ 산사태 예방사업 등 추진 실태

연번	구분	위 치	공 사 명	발주부서	공사 개요	착공일	준공 (예정일)	공정
1	예방	-
2

※ 각 기관별 자체 점검결과 시정되지 않고 있는 공사장 등에 대해 중점 현장 확인 점검

- 당초 계획대비 작업 공정 적정 여부(우기철 이전) : -

- 기타 사항 : -

❍ 산사태 취약지역 관리 대책 점검

- 취약지역 지정(지정위원회 구성, 조례 제정) 적정 여부 : -

- 예경보 전파체계 고도화계획(조사표․시나리오 작성, 예측정보․예보 발령 수신자 확대): -

- 취약지역별 관리전담제 실시, 산사태 현장 예방단 및 대응팀 운영 적정 여부 :-

- 응급복구 장비, 자재 확보 현황 및 적정여부 :

구분	보관장소	장비1	장비2	마대	천막	로프	비닐	시멘트	기타1	비고
확보량/기준량		/	/	/	/	/	/	/	/

❍ 기타 사항  :

□ 수방시설물(빗물펌프장 등) 관리 적정성 점검

❍ 각 기관별 수방시설물 관리 현황

구분	계	수방시설물					비고
		빗물펌프장	유수지	수문	저류조	지하차도
	0	-	-	-	-	-

※ 각 기관별 자체 점검결과 시정되지 않고 있는 수방시설물 등에 대해 중점 점검 확인

❍ 각 수방시설물 관리 실태 점검

- 각 시설물 운영메뉴얼 및 위기대응 시나리오 작성 적정 여부 : -

- 정기점검 등(자체, 합동, 전문가) 지적사항 조치결과 이행 여부 : -

- 시운전 가동 실태(기록물 확인) 여부 : -

- 각 수방시설물 유지관리 실태 적정 여부 : -

- 각 시설물 담당직원(근무자) 임무 숙지 여부(실제 가동) : -

- 기타 사항  : -

□ 공사장 수방대책 적정성 점검

❍ 공사장 현황(56개 현장)

1) 하천변 공사

연번	위 치	공 사 명	공사 개요	착공일	준공 (예정일)	공정
1	마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동	월드컵대교 건설공사	교량신설B=6차로, L=1.98km	‘10.3.22	‘20.12.30	23
2	강동구 암사동 ~ 구리시 아천동	구리암사대교 건설공사	교량신설B=4~6차로, L=1.1km	‘06.4.5	‘15.6.30	98
3	중랑구 면목동 194-9	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	교량건설 B=20m L=395m,도로확장B=20m, L=395m	‘08.10.23	‘15.12.31	90
4	성동 금호동4가 용비교 서측~성수동 용비교 동측	용비교~행당중간 도로개설공사	도로개설 폭5~6차로, L=718m	‘07.3.22	‘15.12.31	84
5	성동 응봉동 대림아파트~성수1가 삼표레미콘	응봉교 확장 및 성능개선공사	교량확장B=4→6차로, L=633m	‘08.10.20	‘15.12.31	85
6	동대문구 장안동92 ~ 중랑구 면목동170	장안교(구교)성능개선공사	교량신설 B=17m, L=218m,기존교량철거	‘14.12.16	‘16.12.15	5
7	초안산근린공원 ~ 상계8동 주공11단지	동부간선도로 확장공사 (2공구)	교량신설 B=2~6차로→7~8차로, L=3.2km	‘08.12.30	‘15.12.31	56.6
8	노원구 상계8동 주공15단지 ~의정부시계	동부간선도로 확장공사 (3공구)	도로확장 B=4~6차로, L=2.25km	‘08.2.15	‘15.12.31	55
9	구로구 고척동 63-3일원	서남권돔구장 보행자 전용도로 (보행광장) 설치 및 고척교 확장	보행광장 B=28.3m L=150m, 고척교 확장	‘13.4.8	‘15.6.30	83.6
10	금천구 시흥동 ~ 광명시 소하동	강남순환 도시고속도로 건설공사(4공구)	도로개설 폭4~8차로, L=2.48km	‘01.3.22	‘16.5.19	56
11	서초구 양재대로 187	강남순환 도시고속도로 건설공사(8공구)	도로개설 폭 4~10차로, L=7.96km	‘02.07	‘18.07	25.2
12	송파구 탄천변(장지천 합류부~탄천물재생센터)	위례신도시 차집관로 증설공사	차집관로부설D=800~1,100mm, L=4.4km	‘13.11.22	‘15.6.30	99.2
13	강북구 우이동유원지입구 ~국립4.19묘지입구 사거리	경전철 우이 ~ 신설 1공구 건설공사	경전철 설치 L=1.9km	‘09.9.15	‘16.11.30	72

2) 굴착공사

연번	위 치	공 사 명	공사 개요	착공일	준공 (예정일)	공정
1	송파구 신천동 29일대	잠실역 버스환승센터 조성	정류장 8면, 버스주차장23면	‘14.5.28	‘16.9.27	17.8
2	강동구 암사동~고덕로 훈련원사거리	구리암사대교 연결도로 건설	도로개설L=1.88km, (B=31.5m)	‘12.8.2	‘15.6.30	78.3
3	구로구 개봉동 198-`1 일대	남부순환로(개봉역주변) 구조개선	지하차도설치 4차로 L=736m	‘07.9.10	‘15.6.30	96.5
4	강동구 암사동440-1~고덕동 165-11	선사로∼고덕지구간 도로확장	도로확장B=8→25m L=3.72m	‘09.01	‘15.12	65
5	종로구 권농동8~원남동 166	율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선	도로확장B=4→6차로 L=800m	‘10.10.11	‘17.12.31	47
6	강서구 방화로~부천시 오정대로 삼거리	남부순환로∼오정대로간 도로개설	도로개설B=40m L=1.23km	‘10.9.29	‘15.12.30	59
7	강서구 방화동 ~올림픽대로	방화대교 남단 접속도로	도로개설 3km L=1.23km	‘05.10.5	‘15.10.31	91
8	용산구 보광동217-31	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선	고가철거 L=510m, 교량신설 L=405m,	‘11.1.6	‘15.12.31	72
9	관악구 신림동~봉천동 일원	신림∼봉천터널(2공구) 도로건설	터널건설 폭 4차로 L=2.48km	‘10.10.8	‘17.12.31	21.3
10	은평구 신사동~고양시 덕양구 향동동	신사사거리~고양시계간 도로개설공사	도로개설 B=25m, L=867m	`12.12.27	`15.12.26	72
11	광진구 구의동 아차산역~광장동 광나루역	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 B=10차로, L=900m	‘10.10.11	‘15.12.31	58

연번	위 치	공 사 명	공사 개요	착공일	준공 (예정일)	공정
12	금천구 시흥동 ~ 관악구 신림동	강남순환 도시고속도로 건설공사(5공구)	도로건설 B=6차로 L=5.1km	‘09.9.1	‘16.5.19	77.2
13	관악구 신림동 ~ 낙성대동	강남순환 도시고속도로 건설공사(6-1공구)	도로건설 B=3~4차로 L=1.13km	‘09.9.1	‘16.5.19	65
14	관악구 봉천동 ~ 남현동	강남순환 도시고속도로 건설공사(6-2공구)	터널설치 L=2.2m, 지하차도 1개소	‘09.4.1	‘16.5.19	77
15	서초구 방배동 2726	강남순환 도시고속도로 건설공사(7-1공구)	도로개설 폭6차로, L=1.04m	‘10.6.1	‘16.5.19	65.5
16	서초구 방배동 ~ 우면동	강남순환 도시고속도로 건설공사(7-2공구)	서초터널 6차로, L=2.1km	‘08.4.1	‘16.5.19	75.2
17	성북 정릉동 국민대앞	도시고속도로 연결램프 (정릉길)설치공사	램프설치 B=6.26m, L=533m	‘13.12.30	‘16.12.29	6.3
18	서초구 내곡동	어린이병원 발달센터 증축공사	지하2/지상5	`15.1.20	`17.2.19	12.3
19	성동구 용답동	재사용플라자 건립공사	지하2/지상5	`15.1.15	`17.1.14	8.1
20	강서구 양천로 201 서남물재생센터 내	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	분뇨처리시설4,000톤/일	‘12.11.15	‘16.6.30	52
21	노원구 공릉동406-3	공릉2빗물펌프장 신설공사	펌프장 증설 520㎥/min	‘13.1.8	‘15.6.30	40
22	동대문 이문동 58-3	신이문 빗물펌프장 증설공사	펌프장 증설 875㎥/min,	‘13.1.3	‘15.6.30	97
23	강남구 일원돌 580	탄천물재생센터 복개공원 4단계공사	복개 A=33.978㎡, 공원화 A=36,920㎡	‘13.10.1	‘16.9.29	54.6
24	관악구 신림동 205	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	저류조설치 65,000㎥	‘12.1.6	‘17.5.30	74.8
25	양천구 신월동 ~ 목동빗물펌프장	신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사	저류배수터널 L=3,628m, 유도수로터널 L=1,097m	‘13.5.27	‘17.12.31	13.8
26	마포구 합정동 196-4, 성산동 99-5	합정외1개소 빗물펌프장 증설공사	합정 : 펌프장증설 160㎥/min, 중동: 펌프장증설 2100㎥/min,	‘13.1.4	‘16.4.30	55
27	강서구 방화동 65-2	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	시설현대화 36만㎥/일	‘09.11.19	‘16.2.28	37.7
28	성동구 자동차시장 3길 64	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	시설현대화 25만㎥/일	‘09.2.13	‘16.2.28	70.5
29	강서구 마곡동 91 서남물재생센터 내	마곡지구내 재생수공급 시설 설치공사	재생수처리시설 2만톤/일	‘11.11.1	‘16.07	99
30	강북구 수유동	우이~신설 도시철도 민간투자사업(2공구)	L=3.23km(정거장4개소)	‘09.9.15	‘16.11.30	75.9
31	강북구 미아동 ~ 성북구 정릉동	우이~신설 도시철도 민간투자사업(3공구)	L=3.17km(정거장3개소)	‘09.9.15	‘16.11.30	69.5
32	성북구 정릉동 ~ 동대문구 신설동	우이~신설 도시철도 민간투자사업(4공구)	L=3.09km(정거장3개소)	‘09.9.15	‘16.11.30	73.6
33	송파구	지하철918공구 건설공사	L=1,125m(정거장1개소)	‘10.02.19	‘16.02.17	60.9
34	“	지하철919공구 건설공사	L=1,560m(정거장2개소)	‘09.12.31	‘15.12.29	43
35	“	지하철920공구 건설공사	L=1,390m정거장1개소	‘09.12.31	‘15.12.30	55.3
36	“	지하철921공구 건설공사	L=1,742m(정거장2개소)	‘09.12.31	‘15.12.29	50.1
37	강동구	지하철922공구 건설공사	L=1,470m(정거장1개소)	‘10.09.16	‘16.03.17	61
38	“	지하철923공구 건설공사	L=1,728m(정거장1개소)	‘10.09.20	‘16.03.21	50.5

3) 기타공사

연번	위 치	공 사 명	공사 개요	착공일	준공 (예정일)	공정
1	용산구 용산체육문화센터~마포구 가좌역	경의선 숲길 공원조성공사	공원조성L=3.48km, A=84,268㎡	‘13.9.3	‘16.3.31	62.3
2	마포구 상암동	IT-컴플렉스 건립공사	지하7/지상17	`09.4.3	`16.2.29	85.3
3	노원구 하계동	서울과학관 건립공사	지하1/지상3	`14.1.13	`16.1.12	32
4	구로구 고척동	서남권야구장 건립공사	지하2/지상4	`09.2.4	`15.6.30	94.5
5	종로구 와룡동	돈화문국악예술당 건립공사	지하3/지상1	`13.12.17	`15.10.16	55.9

※ 각 기관별 자체 점검결과 시정되지 않고 있는 공사장(자치구 발주 등 )에 대해 중점 현장 점검 확인

- 공사장 수방대책 수립 적정 여부 : 적정

- 공사장 관리자(시공사, 감리자, 담당공무원) 비상연락체계 유지 실태 적정 여부 : 적정

- 정기점검(자체, 합동, 전문가) 지적사항 조치결과 이행 적정 여부 등 : 적정

- 당초 계획대비 작업 공정 적정 여부 : 적정

- 굴착 토사 방치 여부 : 방치토사 제거

- 배수로 설치 여부 등 : 배수로 정비 실시

- 기타 사항  : -

□ 지하철 역사(차수판, 배수펌프 등) 수방대책 점검

❍ 역사내 수방시설물 관리 현황(지하철 운영기관 해당)

구분 대상	수방 시설물 관리현황								비고
	계	배수펌프			차수판			기 타
		소계	양호	불량	소계	양호	불량
도시철도	-
서울메트로	-
9호선운영사	-

※ 지하철 운영기관 점검 실시

❍ 역사내 각 수방시설물 관리 실태 점검

- 역사 수방 메뉴얼 및 위기대응 시나리오 작성 및 비치 적정 여부 :

- 정기점검(자체, 합동, 전문가) 지적사항 조치결과 이행 적정 여부 등 :

- 역사내 취약지역 관리현황 및 대책 등 적정 여부 :

- 출입구별 차수판 등 수방시설물 관리실태 적정 여부 :

- 역사내 배수펌프 유지 관리 실태 적정 여부 :

- 차수판 등 담당직원(근무자) 임무 숙지 여부(실제 가동) :

- 역사내(에스컬레이터 및 엘리베이터 설치 공사장) 및 주변 공사장 관리실태 :

- 기타 사항  :

□ 기타 사항 점검결과 (각 기관별 위 수방대책 점검대상에 없는 수방 시설 등)

❍ 점검대상 :

❍ 점검결과 :

Ⅳ		세부 지적사항

□ 세부 지적사항(하천변 공사)

연번	공사명	점검결과 (지적사항)	조치결과 (정비여부)	비 고 (사진번호)
1	월드컵대교 건설공사	작업중인 한강 둔치내 접속교 P4 교각설치 자재 및 장비 반출요망	조 치 중 (6.30 한)	1
2	구리암사대교 건설공사	교량 하부 배수관 미설치	조치 완료	2
3	“	암사IC 일대 군 벙크 터파기 구간 사면보호시설 미설치	“	3
4	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	제방 보호대책 미흡	조치 완료	4
5	“	수방자재 확보 부족	조치 완료	5
6	용비교~행당중간 도로개설공사	중랑천 호안블록 작업 조속 마무리 요망	조 치 중 (6.25 한)	6
7	“	모래마대 보충요망	조 치 중 (6.17 한)	7
8	응봉교 확장 및 성능개선공사	중랑천 둔치에 설치된 가벤트자재 반출요망	조 치 중 (6,30 한)	8
9	동부간선도로 확장공사(2공구)	도봉지하차로 피난계단(#5) 둔치에 토사 및 잔재 적치	조치 완료	9
10	“	방학천 임시경사로 미철거로 유수장애	조 치 중 (6.20 한)	10
11	동부간선도로 확장공사(3공구)	법면보호용 대형천막지 확보 필요	조 치 중 (6.20 한)	11
12	서남권 돔구장 보행자전용도로설치 및 고척교 확장	고척교 하부 가설자재 적치	조 치 중 (6.19 한)	12
13	“	고척교 남측A1사면 토사유출 우려	“	13
14	강남순환도시고속도로(8공구)	양재천 하상 흄관 가도존치, 수변구간내 동바리 존치	조 치 중 (6.30 한)	14
15	우이~신설 도시철도 민간투자사업(1공구)	작업중인 인수천 복구구간 마무리 요망	조 치 중 (6.30 한)	15

□ 세부 지적사항(굴착공사)

연번	공사명	점검결과 (지적사항)	조치결과 (정비여부)	비 고 (사진번호)
1	잠실역 버스환승센터 조성사업	석촌호수 동호측 법면부 미흡	조 치 중 (6.19 한)	1
2	“	석촌호수 서호측 법면부 미흡	“	2
3	구리암사대교 연결도로 건설공사	절토부 사면유실 방지 조치 요망	조치 완료	3
4	남부순환로(개봉역주변) 구조개선공사	북측보도 시공구간 사면 토사유출 방지시설 설치 요함	조치 완료	4
5	선사로∼고덕지구간 도로확장공사	배수로 정비 요망	조치 완료	5
6	“	기존 침사지 보완 요망	“	6
7	율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선공사	배수로 토사 퇴적	조치 완료	7
8	남부순환로∼오정대로간 도로개설공사	사면(법면보호공)보완 조치 필요	조치 완료	8
9	방화대교 남단 접속도로 건설공사	수방계획서 보완(비상연락망)	조치 완료	9
10	“	터널 시점부 비탈사면 토사 유실방지 조치 요함	“	10
11	“	교대전면부 측구 터파기 구간 우기전 조기 시공 요함	조 치 중 (6.19 한)	11
12	강남순환 도시고속도로 건설공사(6-1공구)	수방자재 추가 확보 요망	조치 완료	12
13	“	종점부 침사지내 토사 제거	“	13
14	강남순환 도시고속도로 건설공사 (6-2공구)	배수로 정리 미흡	조치 완료	14
15	강남순환 도시고속도로 건설공사 (7-1공구)	절토사면 공사장 보양필요	조치 완료	15
16	강남순환 도시고속도로 건설공사 (7-2공구)	서초터널 개착 상부 배수로 정비불량	조치 완료	16
17	도시고속도로 연결램프 (정릉길)설치공사	집수구 이물질 제거 요망	조치 완료	17
18	어린이병원 발달센터 증측공사	현장 외부 배수로 정비 필요	조치 완료	18
19	재사용플라자 건립공사	공사장 배수로 정비 필요	조치 완료	19
20	“	현장 외부 빗물받이 정비 필요	“	20
21	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	절성토 사면보호공 설치 미흡	조치 완료	21
22	“	작업장내 비수로 정비 미흡	“	22

연번	공사명	점검결과 (지적사항)	조치결과 (정비여부)	비 고 (사진번호)
23	탄천물재생센터 복개공원 4단계공사	상부슬래브 자재보관상태 불량	조치 완료	23
24	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	강풍대비 정문 앞 출입문 보강 필요	조 치 중 (6.30 한)	24
25	신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사	수방자재 및 비상연락망 수정요망	정비완료	25
26	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	법면 상단 천막 설치상태 미흡	조치완료	26
27	“	쉬트파일 배면 천막 설치상태 미흡	“	27
28	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	배수로에 자재 및 토사 적치	조치 완료	28
29	“	사면보호 천막지 훼손	“	29
30	“	물막이턱 정비 요망	“	30
31	“	수중펌프 연결케이블 불량	“	31
32	우이~신설 도시철도 민간투자사업(2공구)	본선4구간 주변 빗물받이 준설 요함	조치 완료	32
33	우이~신설 도시철도 민간투자사업(2공구)	6번정거장 주변 빗물받이 준설 요함	“	33
34	우이~신설 도시철도 민간투자사업(3공구)	7번환기구 장난감 가게앞 빗물받이 준설 요함	조치 완료	34
35	우이~신설 도시철도 민간투자사업(3공구)	9번 정거장 무봉리 순대국집 앞 빗물받이 준설 요함	“	35
36	우이~신설 도시철도 민간투자사업(4공구)	12번 환기구(동대문세무서) 앞 빗물받이 준설 요함	조치 완료	36
37	우이~신설 도시철도 민간투자사업(4공구)	13번 정거장 상부 가설사무실 주변 빗물받이 준설 요함	“	37
38	지하철919공구 건설공사	빗물받이 내부 청소상태 불량	조치완료	38

□ 세부 지적사항(기타공사)

연번	공사명	점검결과 (지적사항)	조치결과 (정비여부)	비 고 (사진번호)
1	경의선 숲길 공원조성공사	가배수로 및 침사지 설치필요(와우교 구간)	설치 예정 (6.20 한)	1
2	“	가배수로 및 침사지 설치필요(원효동 구간)	“	2
3	IT컴플렉스 건립공사	현장 외부 빗물받이 정비 필요	정비완료	3
4	서울과학관 건립공사	보행자 통로 사면 보호 필요	정비완료	4
5	“	집수정 설치 양수기 정비 필요	“	5

붙임 : 세부 지적사항 현황사진( 용량 초과로 별도송부)

세부 지적사항 현황사진

점검기관(부서) : 도시기반시설본부

NO	8	관리청 (조치부서)		도기본 (토목부)	위치	응봉교 확장 및 성능개선공사	NO	15	관리청 (조치부서)		도기본 (토목부)	위치	강남순환 도시고속도로 건설(7-1공구)
분야	하천						분야	굴착
지적사항 (사진설명)			중랑천 둔치 가벤트 자재적치				지적사항 (사진설명)			절토사면 모양 필요