투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하남선(5호선연장) 2단계 구간 시설물검증시험 종료회의(2차) 실시에 따른 협조 요청

1. 서울시도시기반시설본부 도시철도설비부-330호(2021. 1.12) 관련입니다.

2. 하남선(5호선연장) 2단계 구간 시설물검증시험 종료회의(2차)를 실시(2021. 1.14)하고,

결과를 통보하오니 영업시운전을 착수할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 협조 요청내용

가. 도시철도토목부

- H1정거장 외부출입구 지상부 진입로 등 시공을 2021. 2.15까지 완료 및

시민이 안전하게 통행할 수 있도록 조치

나. 서울교통공사(하남선운영준비단, 승무시스템처)

- 보완사항(기존열차 정위치정차시험) 재시험에 따른 열차 투입

- 1월중 영업시운전을 착수할 수 있도록 계획서를 공단에 2021. 1.22까지 제출

다. 경기도(철도건설과), 하남선시스템통합감리단

- 장애 처리에 대한 결과를 2021.1.15.까지 제출

→ 장애기록부, 장애처리보고서[현황, 원인, 재발 방지대책, 처리결과(사진, 도면 필요시

포함)].  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	도시철도토목부장,경기도지사(철도건설과장),서울교통공사사장(하남선운영준비단),하남선시스템통합감리단(책임감리원)
주무관			차량과장			도시철도설비부장
협조자
시행	도시철도설비부-472	(	2021. 1. 15.	)	접수	도시철도토목부-580	(	2021. 1. 17.	)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7289	/전송	772-7308	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)