품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 하남선1-2공구 건설공사                                 점검일 : 2016. 09. 29 ~ 09. 30

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
1.건설공사 정보	․ 품질관리계획 적용범위와 사유의 정당성 여부	◦ 품질관리계획서에 제7장 설계관리항목을 적용범위에서 적용제외 하기 바람.(적용제외 누락됨)	시정 검토
2. 현장품질 방침 및목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진, 계획 의 수립 및 실행 여부	◦ 품질관리계획서에 품질목표가 없으니 추가하고, 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표세부추진계획)을 수립하여 그 추 진실적을 관리하기 바람. ◦ 현장내에 품질방침 및 목표를 게시(입간판)하여 모든 공사참여자들 이 이해하고 품질확보에 만전을 기 할수 있도록 하기 바람.	시정 검토
3. 책임및 권한	․ 조직편성 및 적정인력 배치 ․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 개인별 업무분장에 업무대행자가 미지정되어 있으니 재작성하여, 현장내의 개개인에 대한 업무대행자를 지정 운영하여 담당자 부재 시 업무의 공백이 없도록 하기바라며, 직원 2명이 각각 현장조직도에 미등재되거나 업무분장이 안되어 있으니 시정하기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식 의 적절성과 관리상태	◦ 품질관리계획서 관리대장(또는 배포대장)에 협력업체 배포현황을 기록유지하기 바람.(협력업체 배포현황 없음)	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경된 사항을 모든 공사참여자(협력업체 포함)에게 교육하고 교육결과보고서를 작성하여 소장까지 보고(결재)하기 바람.	시정 검토
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련 실시 여부	◦ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성 을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후, 이를 기준으로 법적 정기교육(품질)을 포함한『당해년도 교육훈련계획』을 수립하기 바라며, 교육결과보고서는 현장소장까지 보고(결재)하기 바람.	시정 검토
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통 여부	◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통관리기 준을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립,검증,식별, 보관,주기적인점검 실시여부	◦ 기자재(지급자재)수급계획서는 자재규격별로 구분하여 월별 계획 물량/실적물량을 관리하도록 재작성하기 바람.	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리 대상공종을 축소조정하기 바라며, 공사특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준을 설정하여 장비사용을 승인하고 작업자의 자격기준을 작업특성에 맞게 설정하여 자격인정을 관리 하기 바람.(미설정됨)	시정 검토
17. 식별및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적 취급․보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람.(미작성됨)	시정 검토
18.기자재목적 물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시 설물의 보존상태	◦ 균열관리계획서를 작성하기 바람.(미작성됨) ◦ 보관자재점검표와 보관자재관리대장을 작성하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
20.검사 및 시험,모니터링	․ 검사 및 시험계획에 대한 항목,합 격판정기준,빈도 등의 적절성 ․ 자재 및 공정 검사 적기실시 여부 검사 및 시험결과 기록의 적절성	◦ 『검사 및 시험계획서(ITP)』를 작성․활용하여 검사 및 시험대상의 항목,합격판정기준,빈도,사용장비 및 기법,책임자,발주자/감리자의 입회시기․장소․방법 등을 특성에 맞게 설정․운영하기 바라며, 검사 및 시험이 적기에 누락됨이 없이 실시하기 바람.( ITP 미작성됨)	시정 검토
24. 자체 품질점검	․ 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성등에 대한 자체 품질점검	◦ 자체 품질점검계획이 미수립되고 점검실적이 없으니 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시바람.(년 1회이상 실시요망)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 본선 4-2구간 토사반출시 먼지발생을 최소화하기 바람. - 복공판 상부에 살수요망함 ◦ 입출고선 갱구부는 갱문설치전 폐합요망.(락 볼트,숏크리트 등) ◦ 굴착깊이가 깊은 (약20m) 입출고선, 강일성모요양원 등 취약개소 는 스트럿트에 설치된 응력계를 추가로 설치하여 축력,좌굴 및 처짐분석 요망함 ◦ 본선 4-2구간,입출고선 지역은 굴토공사 진행에 따라 띠장,버팀 보 등은 연속적으로 시공하기 바람.(이오형위원) ◦ 본선4-2구간 띠장 하부 보걸이 여유길이가 부족하니 여유장을 확 보하기 바람.(L=20Cm이상) ◦ 본선4-2구간 낙하예상위험물(모래마대)를 제거하거나 안전망을 설 치하여 하부의 작업자를 낙하물로부터 보호하기 바람. ◦ 본선4-2구간 보행자 통로의 복공판구멍에 마개를 설치하여 주민들 의 보행에 지장(뒷굽빠짐)을 주는 일이 없도록 하기 바람. ◦ 본선4-2구간 ㄷ형 찬넬 절곡부에 홈메우기 시공을 하여 안전성을 확보하기 바람.	시정 검토

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 본선 환기구 용접작업장에 소화기를 반드시 비치하기 바람. ◦ 입출고선 : 철근에 묻은 콘크리트몰탈잔재를 깨끗이 제거하고 후속 작업에 임하기 바람. ◦ 입출고선 : 배수트렌치 체수구간을 배수처리하여 체수로 인한 환경 위해현상(해충발생 등)을 방지하기 바람. ◦ 입출고선 : 볼트 여유장이 부족한곳의 볼트를 교체시공하기 바람. ◦ 입출고선 : 띠장 상,하단을 연결하여 안전성을 확보하기 바람 ◦ 입출고선 : 배수트렌치가 단절된 구간을 복구하여 통수에 지장이 없도록 하기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “하남선1-2공구 건설공사”의 시공자인 (주)쌍용건설과 감리자인 ㈜대한컨설탄트측에서 제     시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.