하남선 복선전철 2단계 작업장 인계 예정일 현황

구 분		2단계 작업장 인계 예정일
		4공구			5공구
전노선 (궤도)		·자재반입	레일 반입 완료		·자재반입	레일 반입 완료
		·작업장인계	‘19.02.28		·작업장인계	‘19.05.01
		·현황 : 궤도, 전차선, 신호통신, 송변전공사 진행중			·현황 : 전차선, 신호통신, 송변전 공사 진행중
정거장기능실	신호기계실	·건축공사완료	‘19.08.31		·건축공사완료	‘19.07.31
	통신기계실	〃	‘19.08.31		〃	‘19.07.31
	전기실	〃	‘19.08.31		〃	‘19.08.31
	변전실	해당없음	-		〃	‘19.08.31
		·현황 : 구조물공사 완료후 건축, 기계, 전기공사 진행중			·현황 : 구조물공사 완료후 건축, 기계, 전기공사 진행중
정거장 사용필증		소방, 전기, 승강기시설		‘20.01.31 수령 예정	소방, 전기, 승강기시설		‘20.02.28 수령 예정
잔여공사 등 완료 예정일		·2020년 01월 공사 완공 예정			·2020년 3월 공사 완공 예정