등록번호

안전치수과-9908

주무관

기전팀장

안전치수과장

안전건설교통국장

등록일자

2021.5.21.

결재일자

2021.5.21.

공개구분

비공개(5)

협  조

예산팀장

하상여과시설 변전설비 개량계획

서 대 문 구

안전치수과

하상여과시설 변전설비 개량계획

노후된 하상여과시설 변전설비를 개량하여 서대문, 종로, 마포, 은평 4개구 주민이 이용하는 하천(홍제천․불광천)의 원활한 유지용수 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시설현황

○ 위    치 : 상암동 1536-1(하상여과시설)

○ 시설현황 : 변전설비 1면, 펌프제어반 4면(인버터 각 3대), 자동제어반 2면, 자동제어프로그램 1식

○ 위치도 및 현장사진

하상여과시설
위치도	하상여과시설 변전설비

○ 설치년도 : 2008년(제어반 내용연수 : 10년)

○ 현황 문제점

- 변전설비 노후로 인해 고장빈도 증가

- 인버터, PLC 등 펌프제어반 핵심장비의 단종으로 향후 부분교체 불가

Ⅱ		정비개요

○ 정비내용

- 변전설비 3면 교체설치

- 펌프제어반 4면 교체설치

- 자동제어반 2면 교체설치 및 제어프로그램 수정

○ 정비기간 : 2021. 06. 01. ~ 2021. 11. 30.

Ⅲ		소요예산

○ 소요예산 : 금712백만원(금칠억원)-구비356백만원, 시비356백만원

- 하상여과시설 변전설비 개량   : 금712,000천원

○ 예산과목 : 2021년 추경예산 편성요청(시·구비 매칭사업)

○ 행정사항

- 기획예산과 : 구비 추경 편성 협조 요청

- 서울시 하천관리과 : 시비 추경 편성 협조 요청

Ⅳ		추진일정

○ 2021. 06. : 공사 사전절차 이행(계약심사 등)

○ 2021. 07. : 공사계약 및 착공

○ 2021. 08. ~ 10. : 자재 구매 및 공사추진

○ 2021. 11. : 변전설비 시운전 및 준공.      끝.