문서번호		안전치수과-15678		주무관		하수팀장	안전치수과장			안전건설교통국장	부구청장
등록일자		2014.08.27.
결재일자		2014.08.27.
공개여부		공개
				협 조
					치수팀장
					주무관
					주무관
체계적인 하수관로 유지관리를 위한
	하수관로 CCTV 조사자료 GIS DB 구축 추진계획
안전건설교통국 (안전치수과)

	체계적인 하수관로 유지관리를 위한
하수관로 CCTV 조사자료 GIS DB 구축 추진계획

관내 지선 하수관로에 대한 CCTV 전수조사를 실시 하수관로의 중·장기적인 유지관리계획을 수립 및 활용코자 하수관로 CCTV 전수조사 자료에 대하여 서울시 하수도관리전산시스템(GIS)에 DB를 갱신·구축하여 우리구 하수도 GIS의 정확도를 향상시켜 향후 지속적인 업무의 효율성을 제고하고자 함.

1			추 진 근 거

안전치수과-5560호(2014.03.28) 『용산구 하수관로 CCTV DB 구축사업 계획 보고』

안전치수과-6134호(2014.04.04) 『2014 하수사업 GIS DB 구축용역 추진계획』

2			현황 및 문제점

서울시의 하수관거 강우확률빈도 상향조정(지선5년→10년)에 의거 『용산구 하수도 종합정비계획 및 관거조사 용역』 지선하수관거의 수리검토가 완료(2013.02.27) 됨에 따라,

관내 지선 하수관로에 대한 CCTV 전수조사를 2013년도부터 체계적으로 실시하여 서울시 하수도관리전산시스템(GIS)과의 일치여부를 확인하여 현황에 맞는 하수관로의 중․장기적인 정비계획 수립하여 왔지만,

하수관로에 대한 CCTV 전수조사 조사자료가 이동식 저장장치에 보관하여 활용하고 있는 실정으로,

외장하드 보관 중 인사이동이나 관리소홀에 따른 자료의 훼손 또는 분실의 위험으로 자료의 활용도가 저하되는 등 하수관로의 중․장기적인 유지관리 업무 효율 및 신속한 하수도민원 업무 처리에 어려움이 있음.

3			개 선 방 안

현재 하수관로에 대한 CCTV 전수조사 자료를 이동식 저장장치에 보관하여 활용하고 있는 방법을,

서울시 하수도관리전산시스템(GIS)에 DB를 갱신․구축하여 우리구 하수도 GIS의 정확도를 향상시켜 향후 지속적인 업무의 효율성 제고 및 신속한 민원업무 처리에 만전을 기하고자 함.

⇒ 하수관로 CCTV 조사자료 유지관리 방안

ex) 서울시 하수도관리전산시스템(GIS) DB 구축 처리과정

구 분	동영상 링크(웹주소)
CCTV 촬영준비	http://youtu.be/OqzuOnZE9cw
CCTV 내부진입	http://youtu.be/s5c3YkQs45E
하수관로 CCTV 촬영	http://youtu.be/UlIUKW1Cmuw
GIS시스템 CCTV 영상 탑재	http://youtu.be/6ZVUpOa4NKI

4			추 진 계 획

대    상 : L=65.53Km

- 2013년도 : L=23.80Km(한남동 지역) - CCTV 촬영완료

- 2014년도 : L=41.73Km(용문동 L=7.92Km, 원효1,2동 L=33.81Km)

⇒ 2014. 08월 현재 : L=41.73Km 중 3.96Km CCTV 촬영완료

추진기간 : 2014. 08. ~ 2014. 12.

소요예산 : 30,000천원

- CCTV GIS DB구축 : 44.66Km(65.53Km×68%) × 671,870원(1Km 당) = 30,000,000원

- 예산확보 방안 : 2014 관내 하수도 및 구조물 보수공사(연간단가)」 이설비 활용

사업 시행

⇒ 2015년도 부터 : 본예산 확보 사업 시행

5			기 대 효 과

관내 지선 하수관로에 대한 GIS DB 구축으로 하수관로 유지관리의 효율성 제고 및 신속한 민원업무 처리

GIS DB 구축으로 지선 하수관로 CCTV 조사자료 체계적인 관리 및 보존

하수관로 노후도에 따른 사업시행 우선순위 결정과 중장기 유지관리 계획 수립 관련 활용도 극대화

6			행 정 사 항

예산부서 사전협의 2015년도 본예산 확보 사업시행

비관리청(건축물 사용승인 등) CCTV 제출자료 추가 구축방안 모색.  끝.