◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆
			(주) 도 화 엔 지 니 어 링 Dohwa Engineering Co.,LTD.
우편 : 경기도 구리시 토평동 996번지 3층 / 홈페이지 www.dohwa.co.kr 전화(031)555-5013,02-426-1257 / 전송(031)555-5014 / 담당 김윤호 k67youn@naver.com
문서번호 : 고덕감리 2015-483호 시행일자 : 2015. 12. 14. 수 신 : 도시기반시설본부장 참 조 : 토목부장							선 결				지시
							접수	일자 시간			결재 ∙ 공람
								번호
							처리과
							담당자
제 목 : 우수관로 GIS DB 구축 정산 실정보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. GIS DB 구축 관련하여 고덕감리 제2015-381호 (‘15.8.26)로 실정보고 된 사항 중 강일삼거리 공사 제외와 우수관로 중 우수받이에서 주요 관로로 연결되는 비대상 부분을 제외한 「“공공측량 성과 수수료 고지”(대한측량협회)」에 의거 GIS DB 구축 연장을 정산변경 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. GIS DB 구축 연장 변경 및 정산 현황

구 분	단위	당초	변경	증 감		비고
연 장	km	3.934	2.798	감	1.136
공사비	천원	33,550	23,859	감	9,691

붙임 : 감리검토의견서   1부

암사대교건설공사 외1건 책임감리원 김 동 수

(주)도화엔지니어링 (주)제일엔지니어링	감 리 검 토 의 견 서	2015. 12.
사 업 명	구리암사대교연결도로건설공사	작성자 : 김윤호
검 토 건 명	우수관로 GIS DB 구축 정산 실정보고

1. 개요

구리암사대교 연결도로 건설공사 구간내 우수관로 GIS DB 구축 기 실정보고「고덕감리 제2015-381호 (‘15.8.26)」승인사항 관련 강일삼거리 공사 제외와 우수관로 중 우수받이에서 주요 관로로 연결되는 비대상 부분을 제외한 「“공공측량 성과 수수료 고지”(대한측량협회)」에 의거 GIS DB 구축 연장을 정산변경에 대하여 보고함.

관련근거 : 공공측량 수수료 고지

대한측량협회 기술2014-3899(‘14.10.23)

대한측량협회 기술2015-2294(‘15. 6.15)

2. GIS DB 구축 현황

[ 본선구간 ]

Φ450, L=600m

Φ450, L=578m

Φ500, L=50m

Φ600, L=481m

Φ500, L=71m

Φ600, L=307m

Φ450, L=120m

Φ450, L=101m

Φ800, L=65m

기타구간 :  암사 R-C~R-F Φ1200 85m

서원마을 횡배수관 Φ600 17m

[ 강일삼거리 ]

고덕교

선사로

고덕차량기지

우수BOX (1.5×1.5)

L=323m

3. GIS DB 구축 연장 변경 및 정산 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증 감		비 고
연 장	km	3.934	2.798	감	1.136
공사비	천원	33,550	23,859	감	9,691

4. 검토의견

“도로법 시행규칙 제21조”에 의하여 우수관로 시설에 대하여 GIS DB 구축 공공측량성과 심사 기관인 대한측량협회의 “공공측량성과 수수료 고지”를 반영한 수량 정산은 타당하고 이를 설계변경시 반영코자 합니다.

붙임 : 관련공문

- 신성암사 제2015-347호 (‘15.12.11)

- 공공측량성과 수수료 고지

: 대한측량협회 기술2014-3899 (‘14.10.23) “강일삼거리 우수 BOX”

: 대한측량협회 기술2015-2294 (‘15. 6.25) “본선”

확인자 : 책임감리원  김 동 수 (인)