한강교량 등 보수․보강공사 추진계획 (붙임3)

○ 한강교량

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업 개요	예산액	사업추진계획	주관부서
계	13건		29,946
1	한강교량 일상유지보수	○ 사업위치 : 한강교량 20개소 ○ 사업규모 : 연간 상시 및 긴급보수 - 교면포장 700a, 신축이음 보수 300m - 강재도장 2,000㎡ 등 ○ 사업기간 : ‘15.3 ~ ’15.12 ○ 총사업비 : 7,000백만원	7,000	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
2	동호대교 보수공사	○ 사업위치 : 동호대교 ○ 사업규모 : - 교면포장 68a, 단면보수 587㎡ - 신축이음 교체 156m 등 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15.12 ○ 총사업비 : 1,921백만원	1,921	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
3	성산대교 보수공사	○ 사업위치 : 성산대교 ○ 사업규모 : - 바닥판 치환보수 400㎡ - 교면포장 및 방수 10a, 등 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 1,000백만원	1,000	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
4	원효대교 보수공사	○ 사업위치 : 원효대교 ○ 사업규모 : - 상판 치환 780㎡ - 단면보수 및 표면처리 145㎡ 등 ○ 사업기간 : ‘15.1 ~ ’15.12 ○ 총사업비 : 629백만원	629	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
5	천호대교 보수공사	○ 사업위치 : 천호대교 ○ 사업규모 : - 신축이음정비 334m - 강재 보수 등 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 576백만원	575	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '14.12 : 공사 준공	교량안전과
6	동호대교 기초구조물 (우물통)보수공사	○ 사업위치 : 동호대교 우물통 공사 ○ 사업규모 : - 가물막이 제작 21기 - 가물막이 설치 및 철거 21기 등 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 4,699백만원	4,699	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
7	동작대교 보수공사	○ 사업위치 : 동작대교 ○ 사업규모 : - 교면방수 및 포장 216a - 강재 재도장 52,120㎡ 등 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 9,000백만원	9,000	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
8	가양대교 보수공사	○ 사업위치 : 가양대교 ○ 사업규모 : - 강재 도장 8,026㎡ - 바탕면처리 8,026㎡ 등 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 1,000백만원	1,000	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
연번	사 업 명	사업 개요	예산액	사업추진계획	주관부서
9	잠실철교(도로교) 보수공사	○ 사업위치 : 잠실철교 ○ 사업규모 : - LMC 포장 균열보수 1,384㎡ - 차량방호울타리 교체 1,235m 등 ○ 사업기간 : ‘15. 3 ~ ’15.12 ○ 총사업비 : 510백만원	510	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
10	영동대교 보강공사	o 위 치 : 영동대교 o 사업개요 - 교면포장 60a - 균열보수 400m 등 o 사업기간 : 2015. 1 ∼ 2015. 12 o 총사업비 : 822백만원	822	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
11	성수대교 보수공사	o 위 치 : 영동대교 o 사업개요 - 교면포장 23a - 표면보수 700㎡m 등 o 사업기간 : 2015. 1 ∼ 2015. 12 o 총사업비 : 745백만원	745	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
12	성산대교 성능개선 (기본 및 실시설계)	o 위 치 : 성산대교 o 사업개요 : 슬래브 전면교체 및 상부 구조물 보강 o 사업기간 : 2013. 11 ∼ 2018. 12 o 총사업비 : 112,800백만원	500	○ '15.10 : 기본 및 실시설계 ○ '16. 1 ~ : 단계별 공사 시행	교량안전과
13	광진교 보수공사	o 위 치 : 광진교 o 사업개요 - 교면포장 80a - 단면보수(연석부) 700㎡m 등 o 사업기간 : 2015. 1 ∼ 2015. 12 o 총사업비 : 1,545백만원	1,545	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과

○ 일반교량

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업 개요	예산액	사업추진계획	주관부서
계	7건		1,863
1	중차량 운행허가 시스템 유지운영	○ 시스템명 : 중․제한차량 운행허가시스템 ○ 사업내용 - 점검, 업데이트 장애처리 등 시스템 유지보수 ○ 사업기간 : ‘15. 3 ~ ’15.12 ○ 총사업비 : 33백만원	33	○ '15. 1 : 유관부서 협의 ○ '15. 3 : 용역계약 및 착수 ○ '15. 12 : 용역 준공	교량안전과
2	중차량 노선시설물 성능개선	○ 사업위치 : 헌릉교, 신내교 ○ 사업규모 : - 성능개선 실시설계 1식 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 100백만원	100	○ '15. 1 : 용역 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착수 ○ '15.12 : 용역 준공	교량안전과
3	서울역고가 보수공사	○ 사업위치 : 서울역고가 ○ 사업규모 : - 단면보수 및 표면보수 1,700m2 등 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 400백만원	400	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
연번	사 업 명	사업 개요	예산액	사업추진계획	주관부서
4	고가도로 철거 및 활용방안 수립	○ 사업위치 : 서울시내 고가차도 ○ 사업규모 : - 고가차도 관리계획 타당성 용역 1식 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 295백만원	295	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 용역계약 및 착수 ○ '15.12 : 용역 준공	교량안전과
5	선유고가차도 보수공사	○ 사업위치 : 선유고가 ○ 사업규모 : - 받침교체 4개소 - 단면 및 표면보수 101m2 등 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 320백만원	320	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
6	모래내고가 보수공사	○ 사업위치 : 모래내고가 ○ 사업규모 : - 단면복구 694m2 - 유도배수관 설치 115m 등 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 215백만원	215	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과
7	도림천고가 보수공사	○ 사업위치 : 도림천고가 ○ 사업규모 : - 박스거더 재도장(중방식) 6,000m2 - 기타 공중비계등 가시설 ○ 사업기간 : ‘15. 1 ~ ’15. 12 ○ 총사업비 : 500백만원	500	○ '15. 1 : 계약심사 및 발주 ○ '15. 2 : 계약 및 착공 ○ '15.12 : 공사 준공	교량안전과