한강교량 보수•보강공사 현황
〇 용역명 : 한강교량 보수·보강공사 건설사업관리용역 (‘17.06.09 현재)
연번	공사명	시공사	도급비(원)	공사기간	주 요 공 종	비고 (공정율%) (실적/계획)
1	일상유지 보수공사 (1공구)	(주)풍산씨앤씨	2,672,035,400	01.13~12.31	철거공 483m 교면보수공 148a 방수공 3,613㎡ 신축이음보수공 116m 상판보수공 101㎡ 콘크리트보수공 2,131㎡ 강재보수공 9ton 도장보수공 8㎡	43.4/38.8
2	일상유지 보수공사 (2공구)	(주)선진기술공사 (주)엘엔케이시설물	2,661,671,000	01.09~12.31	철거공 531m 교면보수공 148a 방수공 3,603㎡ 신축이음보수공 117m 상판보수공 101㎡ 콘크리트보수공 3,394㎡ 강재보수공 9ton 도장보수공 1,247㎡	51.9/36.1
3	동작대교 보수공사 (3차)	(주)케이에스씨건설 (주)선하에스티 매일엔지니어링(주)	4,081,447,600 (18,305,672,000)	02.15~12.31	강재도장 33,758㎡ 공간비계 15,588㎡ 콘크리트보수 12,022㎡	36.67/37.95 (86.07/86.35)
4	한강교량 보도부노후 목재데크 보수공사	경인건설(주)	412,642,500	05.11~09.07	데크보수 - 한강대교 1,097㎡ 한남대교 367㎡ 콘크리트보수 669㎡	5.4/9.9
5	한남대교 보수공사	유등건설(주)	445,062,275	05.11~11.06	교각보강(P7) 1기 전망대단면보수 308㎡	-
6	한강대교 보수공사	이지건설(주)	430,806,970	05.11~11.06	아스팔트포장 및 방수 3.64a 신축이음보수 111.30m 측구보수 572.15㎡ 방호벽 차수조인트 24m 교각균열보수 10.8m	-
7	동호대교 보수공사	진원피앤씨(주)	824,034,900	06.02~11.28	절삭후 아스팔트 덧씌우기 41.4a 교면방수 2,272㎡ 교량받침교체 8개소 신축이음보수공 28.4m	-
8	성수대교 보수공사	(주)에스지공영	740,075,000	06.02~11.28	교면포장 22.3a 강재도장 3,391㎡ 공중비계 2,473㎡	-
9	PSC교량 안전강화 (원효대교)	(주)성익건설	1,400,063,000	06.05~12.01	절삭후 아스팔트 덧씌우기 74.5a 교면방수 7,450㎡ 상판보수 1,863㎡	-
10	PSC교량 안전강화 (서강대교)	고황건설(주)	1,232,553,570	05.31~11.26	아스팔트포장 138.7a 교면방수 13,872㎡	-
11	한강교량 하상잔재물 처리용역	(주)합동종합건설	415,863,000	04.19~09.15	1공구(반포,동작,한강,원효) 317톤 2공구(마포,서강,양화,성산) 283톤	37.2/32.0