문서번호	교량안전과-1326
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
협조
	주무관

한강교량 일상유지보수공사(잠수교)

실정보고에 대한 검토 보고

2015. 09

안전총괄본부

교량안전과

한강교량 일상유지보수공사(잠수교)

실정보고에 대한 검토 보고

’15년 한강교량 일상유지보수공사(9차, 잠수교 신축이음장치 교체) 추진 중 감리단 실정보고 사항이 있어 이에 대한 검토 보고임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)

- 작업지시 : 2015년-제9차(15.7.2), 잠수교

○ 위    치 : 잠수교 신축이음부 P21~P24

○ 공사기간 : 작업지시일로부터 ~ ’15.9.25

○ 공 사 비 : 322,850천원(도급액)

○ 공사내용 : 신축이음장치 교체 L=72m(18m×4개소)

○ 도 급 자 : ㈜이젠리버텍

□ 실정보고 내용

○ 현장상태 상이로 인한 신축이음장치 자재 규격 변경(두께 축소)

- P21, P24(JHF-120) : T80mm → T30mm

- P22, P23(JHF-160) : T80mm → T52mm

○ 공사 작업조건 변경에 따른 노임 할증 조정

- 당초 야간작업으로 계획하였으나, 야간공사시 품질 및 안전관리에 어려움이 있어 주간작업으로 변경함에 따라 할증 조정

□야간 87.5% → 주간 15%

○ 도면 변경에 Co2 용접 물량 변경

- P21, P24(JHF-120) : 당초 1m당 2m →  10 m

- P22, P23(JHF-160) : 당초 1m당 2m →  6.22m

○ 강상판 고정용 플레이트 철거 반영

- 당초 강상판 고정용 플레이트를 존치토록 계획하였으나, 플레이트 부식으로 철거 필요하여 철거비 반영

□ 공사비 증감내역

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
신축이음보수	234,984,084	187,465,611	△47,518,473
제 경 비	87,865,916	69,934,389	△17,931,527
도 급 공 사 비	322,850,000	257,400,000	△65,450,000

□ 검토의견 및 조치계획

○ 상기 실정보고 사항은 현장상태 상이로 인하여 자재단가 변경 및 할증 조정 등을 반영코자하는 것으로 타당하다고 사료됨

○ 실정보고 사항을 승인 조치하고 조정된 공사비에 대하여는 추후 설계변경시 반영코자 함

붙임 : 실정보고 관련문서 각1부.  끝.