문서번호	사업기획과-397
보존기간	5년
결재일자	2008.03.20.
공개여부	공개
방침번호	서울특별시장 방침 제(139)호

사업기획부장	한강사업본부장	행정2부시장		서울특별시장
협 조
	예산담당관
	한강사업기획단장
	사업관리부장
	특화사업부장

한강르네상스 종합추진계획 보고

2008. 3

한 강 사 업 본 부

한강르네상스 종합추진계획 보고

○  다양한 의견수렴과 논의를 거쳐 완성한 「한강르네상스 기본계획」의      내용을 시민고객과 국내외 전문가들에게 널리 알리고자 하며,

○  기본계획에 기반한 주요 과제별 사업계획을 차질없이 추진코자 함

1	기본계획 수립 경과보고

□ 추진개요

○ 수립기간 : ‘06.11 ~ ’07.12

○ 기초용역 : 2건

- 서해연결 한강주운 및 수변개발계획에 관한 연구

- 한강시민공원 권역별 특화 기본계획

○ 시행주체 : 한강사업본부, 시정개발연구원

○ 주요 추진경위

- ‘06.11~’07.7 : 용역 시행 및 기본계획(안) 발표

- ‘07. 8~12     : 의견수렴 및 기본계획 완성

□ 의견수렴

○ 전문가 토론회 : 국제심포지움 (2회), 전문가 워크샵, 전시회

○ 시민설명회 등 : 일반시민․자치구민 등

□ 보고서 발간

○ ‘08. 2  : 영문번역 감수 및 마무리 편집

○ ‘08. 3  : 보고서 발간 (2종 : 종합기본계획서, 홍보용 요약서)

2	르네상스 프로젝트의 개요

□ 추진목표

○ 적극적 친수(親水)를 통한 한강의 문화․경제적 가치 창출

○ 도시경쟁력을 견인할 문화브랜드로서 ‘한강의 재탄생’ 추진

□ 추진방향

○ ‘문화도시’로의 미래비전을 담는 한강중심의 도시발전계획 제시

○ 시민고객의 수요를 고려한 우선순위에 따라 연차별 사업 집행

- 도시의 지속가능성을 고려, 균형과 조화를 강조한 도시디자인

□ 프로젝트 체계

한강르네상스 기본계획
		기 조		훼손된 가치의 ‘회복’, 새로운 도시문화 ‘창조’
		주요과제		▶ 서해연결 주운기반 조성 ▶ 한강중심의 Eco-Network 구축 ▶ 한강으로의 접근성 개선 ▶ 강변 역사유적 연계강화	▶ 한강중심의 도시공간구조 재편 ▶ 워터프런트 타운 조성 ▶ 한강변 경관 개선 ▶ 테마가 있는 한강공원 조성
		1단계사업	:	5개분야 33개사업
		(~2010)
미래 비전 : 천만시민과 세계인이 즐겨찾는 세계적 명소‘한강’

3	르네상스 기본계획의 주요내용 (8대과제)

□ 한강중심의 도시공간구조 재편

▶ 한강의 주운활성화와 연계, 한강변의 도시 공간적 활용도 증진 유도를 위한 도시계획적 기틀 마련

○ 주요내용

- 수변 거점지역의 도시기능을 특성별로 집중 육성하고 이를 중심으로 부도심․중심지 기능을 한강으로 확장

- 상위계획인 도시기본계획상 준거를 마련, 실행력 확보

○ 2020 도시기본계획 재정비시 내용 반영 : ‘09년 예정

□ 워터프런트 타운 조성

▶ 강변도로 지하화 등 적극적 수변 공간개조와 복합적인 토지이용을통해 서울의 도시경쟁력을 높일 수 있는 한강변 Waterfront 창출

○ 주요내용

- 배후지역 개발계획과 연계, 특성별 지역발전 및 이를 지원하는 도시기반시설의 기본 방향을 설정하고,

▷ 대상지 : 6개소(마곡, 당인리, 용산, 흑석, 행당, 잠실)

- 전체 마스터플랜 하에 체계적 개발 및 도시발전 촉진책 강구

○ 향후계획

- 성격별, 소관기관별 상세계획 수립에 대비, 광역 및 지역 교통기반시설 기본계획 ‘08 일괄 수립 (한강사업본부, 도로교통본부)

□ 한강변 경관개선

▶ 건축물의 제도적인 관리와 야간 조명의 수준향상을 통한 매력적인 한강변 수변경관 연출

○ 주요내용

- 건축지침 강화를 통한 건축외관 향상 및 토지이용의 변화 유도

- 강변 건축물, 한강공원, 한강교량을 포함한 야간경관 종합계획 수립 및 연차별 사업추진

○ 추진현황 및 계획

- 건축물 디자인 가이드라인 마련(‘07), 건축조례 개정(’08)

- 한강변 도시관리 발전방안 마련(‘07~‘08)

▷ “한강연접지역 경관 및 기능개선 방안 연구” (주택국, 시정연)

- 한강교량, 한강공원 야간 조명개선 단계적 사업시행 (~‘10)

□ 서해연결 주운기반 조성

▶ 경인운하 추진 등 서해뱃길 개방에 대비, 한강의 광역주운계획을 적기 수립하여 효과적인 사업시행

○ 주요내용

- 서해연결 주운계획 수립

▷ 기존 한강내부 주운 활성화 및 서해로의 여객․관광을 위한 주운기반 구축

▷ 여의도․용산을 광역주운(국제여객선 운항)의 거점으로 조성

- 주변의 여건을 고려하여 단계별 사업 시행

▷ 기본계획을 토대로 기본설계 등 후속절차 진행

○ 추진현황 및 계획

- 서해연결 한강주운 및 수변개발계획에 관한 연구 시행(‘07)

- 한강주운 기반시설 조성 기본설계 진행(‘08)

▷ 경인운하 등 중앙정부의 계획내용과 추진일정을 고려 구체적 사업계획 수립

□ 한강중심의 Eco-Network 구축

▶ 시 전역 지천과 연계한 수생 동․식물의 서식환경 개선 및 수변 녹지공간의 확충

○ 주요내용

- 콘크리트 인공호안 철거 등 생태적인 자생환경 회복에 주력

- 상․하류지역 생태거점 확충과 지천과의 생태축 연계성 강화

○ 추진현황 및 계획

- 분야별 계획에 따라 연차별 사업시행 (~‘10)

▷ 생태공원 확충(3개소), 지천합류부 생태환경 개선(3개소), 지천 생태복원(14개소)

- 자연형 호안 조성 세부추진계획 수립, 구간별 사업시행

▷ 구체적인 사업계획 확정(사업구간, 연차별 시행계획)

□ 한강으로의 접근성 향상

▶ 한강 접근 방식의 근본적 변화와 보행 및 대중교통을 이용한 편리한 한강 접근체계 구축

○ 주요내용

- 강변도로 입체화로 지상 보행녹도(Green Way) 적극 조성

- 버스, 지하철 등 대중교통을 이용한 접근시스템  확충

- 기존 한강 접근로의 보행환경 대폭 개선

○ 추진현황 및 계획

- 분야별 계획에 따라 연차별 사업시행 (~‘10)

▷ 대중교통 접근 시설 확충(한강교량 6개소, 지하철역 3개소)

▷ 접근환경 개선(접근도로 38개소, 지하통로 33개소)

- 배후지 도시관리적 여건을 고려한 보행녹도 조성계획 수립(‘08)

▷ 대상지역 선정, 조성방안, 사업추진방식(재정․민자) 검토 등

□ 한강변 역사유적 연계 강화

▶ 한강변 역사문화 유산의 다양한 체험 기반을 구축하여 교육 및 관광자원으로 활용

○ 주요내용

- 한강변 역사유적과 한강공원과의 시․공간적 연계성 강화

- 다양한 유․무형 컨텐츠 개발로 관광자원 활용기반 구축

○ 추진내용 및 계획

- 역사문화 탐방로 조성사업 중장기 추진

- ‘수변 역사문화 활성화 기반조성 계획’ 수립(‘08), 단계별 사업시행

▷ 워크샵 개최, 한강문화 창조를 위한 포럼 구성․운영

□ 테마가 있는 한강공원 조성

▶ 단조로운 체육․휴식공간에서 탈피, 시민의 수변문화 욕구를 담아내는 도시수변공원으로 조성

○ 주요내용

- 지역의 이용특성을 고려, 12개 한강공원을 친수문화 및 레저 중심의 종합계획 수립

▷ 문화 gallery, 야외극장, 환경조형물, 수변휴게공간 등 조성

- 수상이용 및 관광수요를 고려한 구체적인 운영 프로그램 개발

- 단계별, 연차별로 사업시행

○ 추진내용 및 계획

- 한강공원 권역별 특화 기본계획 수립(‘07)

- 1단계 4개공원 특화사업 시행

▷ ‘07.10 ~’09.12(여의도, 뚝섬, 난지, 반포)

- 주운 및 워터프런트 타운 조성 등 추진일정과 연계, 단계적으로 특화사업 시행

4	1단계(~2010년) 사업계획 조정

□ 배  경

○  ‘06 한강르네상스 프로젝트의 최초 계획수립 이후, 신규사업의 추가․사업시행여건 변경 등 발생

○ 단위사업의 효율적인 보완․조정을 통해 사업관리를 강화 필요

□ 조정 개요

○ 5개분야  33개사업  2,533억원  ⇨  33개사업  6,582억원

구 분	당 초	변 경	비 고
계	33건 2,533억원	33건 6,582억원	- 건 (4,049억)
자 연 성 회복	7건 775억원	7건 941억원	- 건 (166억)
접 근 성 향상	7건 1,046억원	6건 1,076억원	감 1건 (30억)
문화기반 조성	10건 401억원	12건 2,802억원	증 2건 (2,401억)
경 관 개 선	5건 261억원	4건 225억원	감 1건 (- 36억)
수상이용 활성화	4건 50억원	4건 1,538억원	- 건 (1,488억)

□ 세부 조정내역

○ 신규사업 추가 : 증 7개 사업 (‘08예산 반영)

- 한강 지천합류부 생태개선

- 4개 한강공원 권역별 특화 (반포, 여의도, 뚝섬, 난지)

- 광나루 자전거공원 조성

- 서해연결 한강주운 기반 조성

○ 기존사업 조정 : 감 7개 사업

관리대상 제외	- - 5개 사업

1) Hi-seoul Bike : 시 전역의 종합계획 차원에서 추진토록 조정

▶ 추진상황 시장보고시 지시('07.7) / 추진부서 변경(도시교통본부)

2) 노들섬 문화 Complex 건립 : 별도 계획으로 추진(주택국)

3) 권역별 특화사업에 포함하여 검토(3개 사업)

▶ 조각공원 조성(소형 군집형태 → 임팩트가 강한 대형 조형물)

▶ 친수형 실개천 조성(캐스케이드, 4계절 수영장, 난지생태수로)

▶ 번지 점프대 설치

유사내용 통합	- - 2개 사업

1) 한강변 건축경관 개선

▶ 한강 연변아파트 조명개선 + 한강변 건축경관 자연친화적 개선

: 사업 성격이 한강변 공동주택의 경관관리와 이를 위한 제도적 기반이 요구되는 유사내용으로 통합 관리

2) 수상이용 및 지원시설의 관광자원화

▶ 수상이용 및 지원시설의 관광자원화 + 지구별 수상이용시설 재배치

: 기존 노후시설의 현대화와 기능개선 및 적합 장소로의 재배치 등 사업내용이 유사하므로 통합하여 관리

□ 향후 조치

○ 사업조정 결과를 각 사업별 담당부서에 통보, 책임관리토록 조치

○ 조정내용을 사업관리 관련 계획에 반영 조치

- 시정 4개년 추진계획, 성과목표 관리 등

붙임	- - - 1단계사업 조정내역

(단위:백만원)

과 제 명		주 요 사 업	계	2006	2007	2008	2009	2010
계		33개 사업	658,225	4,010	68,310	170,288	240,777	174,840
1	자연성 회복 (7)	인공호안 녹화	21,380	900	2,500	7,050	10,930	-
		여의도 샛강 생태공원 조성	36,800	-	2,000	14,400	20,400	-
		암사동 한강둔치 생태공원 복원	3,840	-	2,000	1,840	-	-
		강서 습지생태공원 확충	2,773	-	160	2,613	-	-
		지천 생태 복원	별도	-	-	-	-	-
		자연형 친수공간 조성	6,062	-	1,025	5,037
		한강 지천합류부 생태 개선	23,210	-	-	370	10,000	12,840
2	접근성 향상 (6)	한강 연결 보행녹도 조성	30,600	-	4,700	-	10,400	15,500
		한강교량 보행로 확장 및 녹도설치	36,258	660	10,580	19,768	5,250	-
		한강 접근도로 정비	19,800	-	5,700	14,100	-	-
		기존 제방 지하통로 환경정비	20,446	560	5,940	1,914	12,032	-
		한강 접근 안내체계 정비	351	-	351	-	-	-
		Shuttle Bus 운행	116	-	116	-	-	-
3	문화기반 조성 (12)	잠수교를 보행전용 공간으로 조성	5,850	-	3,600	2,250	-	-
		반포대교 낙하분수 설치	9,680	-	9,680	-	-	-
		Floating Island 조성	민간	-	-	-	-	-
		광진교 걷고 싶은 다리조성	6,400	-	200	6,200	-	-
		난지도 하늘다리 설치	21,492	-	272	1,820	19,400	-
		절두산성지 주변 근대역사 관광 지 조성	1,280	-	200	1,080	-	-
		「한강 박물관」건립	별도	-	-	-	-	-
		한강공원 반포권역 특화사업	43,020	-	8,220	25,800	9,000	-
		한강공원 여의도권역 특화사업	78,000	-	1,800	23,390	52,810
		한강공원 뚝섬권역 특화사업	51,000	-	200	14,180	36,620	-
		한강공원 난지권역 특화사업	56,000	-	200	16,950	38,850	-
		광나루 자전거전용 공원 조성	7,500	-	-	900	6,600	-
4	경관개선 (4)	한강 교량 조명개선	10,491	1,740	4,056	4,695	-	-
		한강공원내 조명개선	7,390	-	1,000	1,720	4,670	-
		한강변 건축 경관 개선	50	50	-	-	-	-
		공원시설물 미관제고	4,600	100	1,000	1,485	2,015	-
5	수상이용활성화 (4)	한강수상교통 이용시설 설치	3,836	-	2,810	1,026	-	-
		수상이용 및 지원시설의 관광자원화	민간	-	-	-	-	-
		수상시설 육성을 위한 제도정비	제도개선	-	-	-	-	-
		서해연결 한강주운 기반 조성	150,000	-	-	1,700	1,800	146,500