문서번호	문화홍보과-4139
결재일자	2016.12.7.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화홍보과장	총무부장
협조

한강 공공예술공간 조성

시범사업 추진계획

2016. 12.

한강사업본부

(총무부)

한강 공공예술공간 조성 시범사업 추진계획

한강의 정체성․예술성을 나타낼 수 있는 공공예술공간 조성 시범사업의   성공적이고 지속가능한 추진을 위한 시범사업 추진계획을 수립함

1		한강 공공예술공간 조성사업 개요

○ 사업철학 : 예술은 쉼을 만들고, 쉼은 예술을 만든다

○ 추진방향 : “함께하는”, “아름다운”, “가고싶은” 한강

- 함께하는 : 시민이 함께 참여하고, 만들고 가꾸어 가는 문화예술 프로젝트

- 아름다운 : 한강의 자연성 회복 및 사업의 정체성을 반영한 융․복합 프로젝트

- 가고싶은 : 새로운 볼거리, 즐길거리 제공 등 함께 즐길 수 있는 한강 명소화 계획

○ 사업기간 : ’16년 ~ ’17년(2년간)

○ 추진과정 : 기본계획(‘16.5월) ⇒ 마스터플랜(‘16.7월~11월) ⇒ 시범사업(‘16.11월～’17.3월) ⇒ 본사업(2017년)

○ 총사업비 : 132억(‘16년 12억, ‘17년 120억)

- ‘17년 예산 편성(요구) 현황 : 국비 61.5억, 시비 58.5억

○  사업장소 : 여의도(‘16년), 여의도,반포,이촌·잠원(3개 권역,’17년)

2		추진현황

○ “한강 자연성 회복과 관광자원화를 위한 종합계획” 연구 용역 ( ‘15.12)

○ 공공미술사업 TF 회의(4회, ‘16.3.30 ~ 7.28, 행정1부시장)

○ 한강 공공예술공간 조성사업 기본계획 수립(‘16.5.18)

- 은병수(前 서울시 전시예술․공공디자인 감독) 총감독 내정

○ 총감독 약정 체결(‘16. 7. 14)

○ 한강시민위원회 사업계획 보고(‘16. 7. 15)

○ 관광자원화사업 공정보고(2회, ‘16.7.28, 9.26, 행정 2부시장 주재)

○ 전문가 자문위원회 개최(‘16.11.4)

○ 시범사업 용역업체 선정(‘16.10.31) 및 시범사업 개시(‘16.11.18)

3		시범사업 추진계획

시범사업 개요

○ 추진방향

- 사업초기 단계부터 한강 공공예술공간 조성에 대한 시민의   관심 및 공감대 형성

- 시범사업이 본사업으로 연게될 수 있도록 지속가능한 시스템 구축

- 사업	에 대한 관심과 기대를 확산 시키는 이슈화 프로그램 및

사업의 정체성과 방향성을 공개하는 장 마련

○ 사업기간 : ‘16.11.18 ~ ’17.3.31

○ 사업대상지 : 여의도한강공원 잔디마당 일대

○ 사업 구성

- 오픈프로젝트 : 공모방식을 통해 시민 및 전문작자들이 모두 참여하는 사업

․ ‘한강한장’ 공개공모, 신진작가 지명공모

- 기획프로젝트 : 전문신진작가가 참여, 한가의 자연성과 정체성을                   반영한 예술 작품 설치 사업

․ 노후어선프로젝트, 아트플랫폼

- 특별프로젝트 : 사업의 정체성과 방향성을 공개, 본사업에 대한                    공감대 및 기대 형성 행사

․ 시범사업 쇼케이스

2. 세부사업 추진 계획

①  ‘한강한장’ 공개공모

○ 공모개요

- 공모주제 : 자연과 사람이 조화를 이루는 예술쉼터

(휴식할 수 있는 기능성 설치물)

- 공모대상 : 누구나 (팀의 경우 3명 이내)

- 공모기간 : 2016년 11월 18일(금) ~ 12월 19일(월) / 32일간

- 접수방법 : 온라인 접수(홈페이지), 오프라인 접수(우편 및 방문, 현장접수)

- 선정방법 : 선정위원회(총감독 포함 총 5인 내외로 구성)

- 시상내용 : 우수작품 특전 – 선정된 우수작품 2점 실제 작품                                     제작・설치 기회 부여

○ 시민 아이디어 공모당선작 설치(작품 2점)

- 아티스트 풀(Artist Pool) 내에서 지명방식을 통해 참여작가 2인 선정

- 공모에 당선된 시민 아이디어를 바탕으로 시민~작가 협업을 통해 작품 기획 및 제작

공개공모	→	심사	→	당선작 발표	→	작가선정 및 계약	→
‘16.11.18~12.19		’16.12.23, 28		’16.12.30		‘17.1.2~1.6
작품제작	→	작품현장설치	→	작품전시/시범운영
‘17.1.9~3.7		‘17.3.8~3.21		‘17.3.24~3.31

○ 추진 프로세스

② 신진작가 지명공모

○ 잘 알려지지 않은 국내외 신진작가를 발굴해 작품창작의 기회 제공

○ 아티스트 풀(Artist Pool) 구성 및 작가 선정

- 국내 문화예술 7개 기관의 추천을 통해 40명의 아티스트 풀 구성

- 작가 선정 ; 선정위원회에서 추천작가 대상 선정(선정위원: 총감독 포함 5인 내외)

- 선정된 작가(20인 내외) 대상 사업의 철학과 취지 및 가이드라인에 적합한 작품 제안 요청

국내문화예술기관 작가추천	→	작가컨택 및 포트폴리오 수령	→	선정위원회 구성	→	아티스트풀 구성 (작가40명)	→
‘16.11.7~11.25		‘16.11.14~11.25		‘16.11.25		‘16.11.28
선정위원회 1차심사(작가20명)	→	작가 Co-Creation	→	아이디어 접수	→	선정위원회 최종심사(작가2명)	→
‘16.12.2		‘16.12.7		‘16.12.8~12.26		‘16.12.28
선정작 발표	→	작가선정 및 계약, 작품제작	→	작품현장설치	→	작품전시/시범운영
‘16.12.30		‘17.1.2~3.7		‘17.3.8~3.21		‘17.3.24~3.31

○  추진 프로세스

③ 노후어선 프로젝트

○ 수명을 다한 노후어선이 예술을 통해 자연성 회복의 상징으로 시민들이 쉴 수 있는 예술작품으로 재탄생

- ‘예술은 쉼을 만들고, 쉼은 예술을 만든다’는 사업철학에 부합

- 강 위, 강변, 둔치 등으로 이어지는 작품설치로 한강의 공간성 부각

○ 아티스트 풀 내 작가지명 및 라운드테이블을 통해 작가 1인~3인 선정

※ 해양수산부 및 고흥군 협조로 노후어선 3척 수집

노후어선 수집 (전남고흥군, ‘16.10.14)	완성 이후사례 예시

노후어선 3척 수집 (해양수산부, 고흥군)	→	기획 및 작가선정 (라운드테이블)	→	작품구상화 및 제작	→	작품전시/시범운영
‘16. 10. 14		‘16. 11.1 ~ 11. 30		(‘16. 12 ~ ’17. 3. 10)		‘17.3.24 ~ 3.31

○ 추진 프로세스

④ 아트플랫폼

○ 시민과 작가들이 지속적인 예술창작활동을 구현할 수 있는 새로운 형태(고정형, 이동형)의 플랫폼 구축

○ 한강의 지형적 특성을 고려하여, 고정형(둔치 등/On the ground)과 이동형(강가 및 강 위/On the River)으로 구축

○ 시범사업 기간 동안 공간구축 및 쇼케이스 예술 프로그램 구성・운영하고, 본 사업 시 구축된 플랫폼을 기반으로 전시・공연 등 예술 프로그램 운영

서울시 보유 바지선		온더리버 완성 이후 장기적 사례 예시(파리 센느강)

※ 이동형 아트플랫폼은 서울시 보유 바지선 활용(19.1m*6.5m*1.5m/21톤, 3척 내외)

바지선 확보	→	공간 및 콘텐츠 기획		플랫폼 구축		콘텐츠 구성
‘16.11월		‘16.11.1~12.30		‘17.1.2~2.3		‘17.1.9~2.17
안전관리 자문		시뮬레이션	→	안전관리 시설보완	→	시범운영
‘17.2.24		‘17.2.20~3.10		‘17.3.15~3.21		‘17.3.24~3.31

○ 추진 프로세스

⑤ 시범사업 쇼케이스

○ 한강 공공예술공간 조성 사업철학과 비전을 시민에게 소개하고, 향후 전개해나갈 본 사업에 대한 기대감 조성

○ 오픈 프로젝트(한강 한 장 공개공모, 신진작가 지명공모)와 기획 프로젝트(노후어선 프로젝트, 아트플랫폼)의 작품제작 및 준비과정을 주요 콘텐츠로 시범운영

○ 쇼케이스 시범운영 개요

- 기간 : 2017년 3월 24일(금)~3월 31일(금) / 8일간

※ 오프닝 : 3월 24일(금) 17시 예정 / VIP, 사업관계자 및 작가, 시민초청 약 200여명 참석

- 프로그램 : 한강 한 장 공개공모 작품전시 (2작품), 신진작가 지명작가 작품전시 (2작품),

노후어선 프로젝트 작품 전시(3작품), 아트플랫폼,

쇼케이스 개막 시민참여 전시, 도슨트 프로그램 운영

<시범사업 쇼케이스 개막 시민참여 전시 예시>			<도슨트 작품 투어 예시>

4		향후계획

○ ‘16.11. ~  ’17.03. : 공공예술 공간 콘텐츠 제작․작품설치(시범사업)

○ ‘17.04. ~  ’17.12. : 공공예술 공간 콘텐츠 제작․작품설치(본사업)

붙임 : 1. 시범사업 세부추진계획 1부

2. 사업 홍보계획 1부. 끝