밤섬 생태관찰데크 조성사업

당인리발전소 공원화 및 홍대일대와 창작발전소 등과 밤섬생태관찰데크을 연결하는 문화관광벨트 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 마포 당인리발전소 앞 한강변

❍ 사 업 량 : 생태관찰데크 1,560㎡, 연결도교 238㎡, 인공식물섬 1,900㎡

❍ 사업기간 : ’16. 1. ~ ’19. 12.

❍ 사 업 비 : 100억원(서울시 50%/국비 50%)

❍ 용역기간 : ’17. 8. 2 ~ ’18. 8. 1(12개월)

❍ 용 역 비 : 294,500천원

❍ 용 역 사 : ㈜건축사사무소 매스스터디스 대표 조민석외 1

□ 추진사항

❍  ‘15.10. 2 : 투자심사 완료(결과 - 적정)

❍  ‘15.10.29 : 한강 자연성 회복 및 관광자원화 종합추진계획(2부시장)

❍  ‘16. 3.30 : 밤섬 생태관찰데크 추진계획보고(본부장)

❍  ‘16. 7.20 : 지명설계공모 실행계획(본부장)

❍  ‘16.12.07 : 공모심사 및 선정(당선자 : 조민석)

❍  ‘16.9.1~12.15 : 지명설계공모 관리용역시행 및 준공(MA건축사사무소)

❍  ‘17. 7.12 : 밤섬생태관찰데크 현안업무 보고(행정2부시장)

□ 보고일시 : 2017.7.12.(수), 16:30~18:30(행정2부시장실)

□ 보고내용 : “밤섬생태 관찰데크” 현안사항 및 향후계획 보고

□ 보고결과 : 설계시행하고 시설비(48억원)확보여부 문체부와 협의 지속추진

❍  ‘17. 8. 2  : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수

□ 추진실적

❍  ‘17. 8.25  : 본사업과 관련한 부서 합동회의 개최

- 일시 및 장소 : ‘17.8.25(금)13:00~18:00(중부발전소 회의실)

- 참석자(18명) : 본부(2), 도시공간개선단(1), 마포구청(4), 중부발전소(8), 용역사(4)

	<회의개최결과>
□ 위치선정 : 발전소 유입수로 주변이 최적의 장소임(도시공간개선단, 마포구청의견) ∙ 단, 발전소 유입수이용 간섭, 퇴적여부는 용역시 검토 □ 용역범위에 속하지 않은 과업에 대해서는 서울시(재생정책과)와 문체부 협의하여 추가 예산확보 가능여부 확인후 추진 ∙ 고수부지 약 12,000㎡ 공원조성 등 ∙ 유입수로내 자전거도로(7연속 콘크리트 박스구조물)이전시 교량설계 등

□ ‘17년 추진일정

❍ 2017.09~11. : 현장조사 및 자료수집, 검토(측량 등)

❍ 2017.12~2018.3. : 서울지방국토관리청 협의시행

❍ 2017.11. : 한강시민위원회 자문희의 개최(일정 유동)

❍ 2017.12. : 중간보고회 개최(본부장)