문서번호	공원사업과-1664
결재일자	2015.12.30.
공개여부	비공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원사업과장	공원부장		한강사업본부장
협 조
	치수과장

한강 수상택시 도선장 이전계획 보고

2015. 12

한강사업본부

(공원사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

한강 수상택시 도선장 이전계획 보고

한강 수상관광콜택시의 이촌 도선장은 지역주민들이 재산권 침해 등을 사유로 이전을 요구하고 있어 세빛섬과 연계한 관광활성화 방안을 고려한 반포지구로 이전하여 운영 정상화를 도모하고자 함

❑ 현  황

◦ 이촌지구 도선장은 2009.5.19일 양화지구에서 이촌으로 이전하면서 이촌 현대한강아파트 516세대가 재산권(조망권) 침해 등을 사유로 민원을 제기하여

◦ 현재까지 도선장 개·보수공사 등 정상 운영이 불가한 상태이며

◦ 세월호 사고 이후 수상택시 사업이 양도·양수되었으며 양수업체인 대한민국특수임무유공자회에서 반포지구로 이전을 희망하고 있음

❑ 도선장 이전 개요

◦ 장 소 : 이촌지구(한강대교 하류) ⇒ 반포지구(세빛섬 하류)

◦ 규 모 : 길이 40m, 폭 20m, 계류시설, 도교

◦ 일 정 : 2016. 1. 6(수) - 임시 이전부지로 이동

❑ 이전설치 적정여부 검토

◦ 현장 여건(세빛섬 하류)

- 한강 중앙부에 위치하여 수상택시 콜 신청시 신속하게 대처 가능하고, 도선장에 입·출항시 공선 운항이 단축되어 유류 절감 효가가 있음

- 한강의 명소인 세빛섬 및 반포무지개분수와 연계한 관광객 수요증가, 다양한 신상품 개발 등 긍적적인 효과로 활성화 기대가 큼

❑ 이전 시 문제점 및 대책

◦ 이전 예정부지는 하상퇴적으로 인하여 사전 준설과 사후 정기적인 유지관리가 필요한 지역임

⇛ 대책

- 수상택시 활성화를 위해 이전부지 준설은 본부(치수과)에서 2016년 조기발주하여 준설하고 향후 유지관리는 운영업체에서 정기적으로 시행

- 이촌지구는 민원으로 도선장 개·보수공사를 시행할 수 없어 준설시까지 이전부지 주변으로 임시 이전하여 도선장 개·보수공사를 시행하고 준설 이후 세빛섬(예빛섬) 하류로 이전 완료하고자 함

❑ 검토결과

◦ 상기 검토내용과 같이 이촌지구 도선장을 반포지구로 이전하여 2016. 3월까지 도선장 개·보수공사를 시행하고 조속히 운영 정상화 할 수 있도록 조치코자 함.

첨부 : 도선장 이전계획 위치도 1부. 끝.