합   의   각   서

1. 계약건명 : 자전거도로 교통안전표지 설치공사(서강로)

2. 계약업체 : 예건디자인㈜ 김규식

3. 계약금액 : 금이천삼백이십이만삼천팔백일십원정(￦23,223,810)

4. 계약연월일 : 2017년 12월 14일

5. 계약기간 : 2017년 12월 14일 ~ 2018년 06월 11일

6. 변경사항

계약금액	당 초	금이천삼백이십이만삼천팔백일십원정(￦23,223,810)
	변경후	금이천삼백이십이만삼천팔백일십원정(￦23,223,810)
	증․감액	변동없음
계약기간 변경	당 초	2017년 12월 14일 ~2018년 6월 11일
	변경후	2017년 12월 14일 ~2018년 11월 30일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과       같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . 5.    .

주관과 경유		계 약 자
소 속	기전과	상 호 : 예건디자인㈜
직 급	공업6급	주 소 :송파구 석촌동 235-20 한양빌딩3층
성 명	정영술	대표자성명 : 김규식 (인)

서울특별시(분임)경리관 귀하

청렴 서울! 이제는 실천입니다.