합  의  각  서

1. 계 약 건 명 : 서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기공사

2. 계 약 업 체 : 주식회사 금호전력

3. 계 약 금 액 : 일금 이십구억팔천오백삼십육만원정(\2,985,360,000)

4. 계약 연월일 : 2010. 12. 09.

5. 계 약 기 간 : 2010. 12. 15 ~ 2014. 08. 29.

6. 변 경 사 항

공사기간	당 초	2010. 12. 15. ~ 2014. 08. 29
	변경후	2010. 12. 15. ~ 2014. 10. 15

본 계약에 대하여 위와 같이 공사기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공 할 것을 확약합니다.

2014.    08.   27.

계약자 : 대표자  장  복  규

상  호 : 주식회사 금호전력

주  소 : 전라남도 광양시 성황동 194-2

서울시 도시기반시설본부 귀하