합   의   각   서(5차1회)

1. 계약건명:하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역(5차)

(고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완))

2. 계약업체 : ㈜대한컨설탄드 외 2개사

3. 계약금액 : 금이천이백만원정(￦22,000,000)

4. 계약연월일 : 2017. 12. 18

5. 계약기간 : 2017. 12. 15 ~ 2018. 04. 29.

6. 변경사항

계약금액 변경	당 초	금이천이백만원정(￦22,000,000)
	변경후	금이천이백만원정(￦22,000,000)
	증․감액	변경없슴.
계약기간 변경	당 초	2017. 12. 15 ~ 2018. 04. 29.(136일)
	변경후	2017. 12. 15 ~ 2018. 08. 08. (237일)
	변 경 사 유	고덕교 디자인 심의 및 특정제품 심의에 따른 계약기간 변경(101일 추가)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위

준공할 것을 확약합니다.

2018    .    .

주관과 경유		계 약 자Ⅰ	주식회사 대한컨설탄트 서울특별시 종로구 사직로 109 대 표 이 사 이 진 산 (인) 주식회사 이 산 경기도 안양시 동안구 부림로121 대 표 이 사 이 원 찬 (인) 주식회사 동해종합기술공사 서울특별시 성동구 광나루로6길35 대 표 이 사 정 점 래 (인)
소 속
직 급
		계 약 자Ⅱ
성 명
		계 약 자Ⅲ

서울특별시(분임)경리관 귀하

청렴 서울! 이제는 실천입니다.