합   의   각   서

1. 계약건명 : 석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역

2. 계약업체 : (주)한국구조물안전연구원 (대표 이채규)

3. 계약금액 : 금142,800,000원(금일억사천이백팔십만원정)

4. 계약연월일 : 2014. 09. 01.

5. 계약기간 : 2014. 09. 01. ～ 2015. 02. 28.

6. 변경사유 : 동절기 시설물 손상상태 점검 및 유관기관 자료검토와

진단용역 기술심의에 따른 절대공기 부족

7. 변경사항

공사기간	당 초	2014.09.01. ~ 2014.12.31.
	변경후	2014.09.01. ~ 2015.02.28.

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2014 .   12.    .

주관과 경유		계 약 자
소 속	시설보수과	상 호 : (주)한국구조물안전연구원 (대표 이채규)
직 급	시설주사	주 소 : 서울시 중랑구 송림길 147(망우동, 양원역사)
성 명	김 호 규	대표자 : 이채규 (인)

서울특별시동부도로사업소(분임)경리관 귀하